UFFICIO  TECNICO	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1221 DEL 01-08-2019
Registro Generale 1283

Matelica, li 22-08-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	NUOVA STRADA COLLEGAMENTO TRA LA SP256 MUCCESE E VIA BELLINI. APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI.	

Premesso che:
•	con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017;
•	con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/09/2017 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell’Assessore competente e della Giunta Comunale;
•	all'interno dell'elenco annuale dei LL.PP. per l'anno 2017 è ricompreso quello relativo all'"Adeguamento viabilità esistente SP 256 Muccese (Loc. Trinità) e Via Bellini (Quartiere S. Rocco) per un importo pari a €. 450.000,00;
•	con  Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 12/10/2017 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'UTC in data Ottobre 2017, dei lavori di "Adeguamento viabilità esistente SP 256 Via Bellini '17", dell'importo complessivo di €. 450.000,00;
•	con Deliberazione Giunta municipale n. 61 in data 12/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento viabilità esistente SP 256 (Loc. Trinità) e Via Bellini (Quartiere San Rocco)";
•	con Determina  del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica n. 728 del 24/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Cesare Liberati in data 28/04/2018, dei lavori per la "Realizzazione nuova strada di collegamento tra la SP 256 Muccese e Via Bellini", dell'importo complessivo di €. 450.000,00 e che presenta il seguente quadro economico:
LAVORI 	Parziali 	Totali	
Importo soggetto a ribasso	€. 304.759,78		
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00		
Importo lavori a misura	€ 316.759,78	€. 316.759,78	
SOMME  A  DISPOSIZIONE			
Iva 10% su lavori 	€. 31.675,98		
spese tecniche	€. 38.000,00		
CNPAIA 4%	€. 1.520,00		
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,00		
Fondo incentiv. art.113 comma 2  D Lgs 50/2016	€. 2.787,49		
Fondo incentiv. art.113 comma 4  D Lgs 50/2016	€ 1.267,04		
Indagini geologiche, IVA e CNPAIA incluse	€. 14.276,38		
Rilievi topografici	€. 1.220,00		
Lavori su fattura, IVA compresa	€. 17.118,47		
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86		
Sommano	€. 133.240,22	€. 133.240,22	
Totale		€. 450.000,00	
•	con  Determina  del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica  n. 730 del 24/05/2018  si stabiliva di procedere all’acquisizione , previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori per la REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 256 MUCCESE E VIA BELLINI, con il criterio del minor prezzo; e  si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Potenza, Esino e Musone di San Severino Marche
•	con Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n. 93 del 24/07/2018  veniva aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di  REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 256 MUCCESE E VIA BELLINI” alla ditta Massicci s.r.l. con sede legale in Via Codacchio snc,  – 04013 – Sermoneta, P.IVA 01864970513, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,769% corrispondente ad un prezzo per l’esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad €. 226.226,23, per un importo contrattuale pari a €. 238.226,23;
•	con Determina  del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Matelica n. 1609 del 31/10/2018 con cui si approvava la variazione di quadro economico n. 1 redatta, a seguito dai gara, dall'Ufficio tecnico comunale in data 31/10/2018 secondo il seguente schema:
LAVORI	Parziali 	Totali	
Importo soggetto a ribasso	€. 226.226,24		
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00		
Importo lavori a misura	€ 238.226,24	€. 238.226,24	
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva 10% su lavori 	€. 23.822,62		
spese tecniche	€. 38.000,00		
CNPAIA 4%	€. 1.520,00		
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,40		
Fondo incentiv. art.113 comma 2  D Lgs 50/2016	€. 2.787,49		
Fondo incentiv. art.113 comma 4  D Lgs 50/2016	€ 1.267,04		
Indagini geologiche, IVA e CNPAIA incluse	€. 4.919,19		
Lavori su fattura, IVA compresa	€. 114.082,16		
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86		
Sommano	€. 211.773,76	€. 211.773,76	
Totale		€. 450.000,00	
•	in data 19.10.2018 prot. 6812 è stato sottoscritto il contratto di appalto  per il lavori in oggetto tra la ditta Massicci srl ed il Comune di Matelica.
•	in data 29.11.2018 sono stati consegnati i lavori i quali dovevano essere compiuti in 150 giorni e quindi completati entro il 28.04.2019
•	in data 17 04  2019 i lavori sono stati sospesi per la necessità di redigere una perizia di variante per la necessita di di eseguire un aumento della lunghezza del muro di sostegno in adiacenza alla centrale termica dell'IPSIA per la presenza di lenti di sabbia che rendevano instabili le scarpate e per realizzazione di un raccordo stradale più sicuro tra i parcheggi a servizio rispettivamente dell'IPSIA e dell'ITC;
•	in data 26/04/2019, prot. n. 6159  il Direttore dei Lavori, Ing. Cesare Liberati ha trasmesso la relazione per una perizia suppletiva e di variante dei lavori relativi all'Adeguamento della viabilità esistente tra la la S.R. 256 Muccese e Via Bellini, che presenta il seguente quadro economico:
LAVORI 	variazioni a seguito della gara	variazione quadro di perizia	
Importo soggetto a ribasso	€. 304.759,78		€. 379.680,91		
ribasso d'asta del 25,769%	€.78.533,54		€. 97.839,97		
importo lavori ribassato	€. 226.226,24		€. 281.840,94		
Oneri della sicurezza diretti	€ 12.000,00		€. 15.000,00		
Importo lavori a misura	€ 238.226,24	€ 238.226,24	€. 296.840,94	€. 296.840,94	
SOMME  A  DISPOSIZIONE					
IVA 10% su lavori 	€. 23.822,62		€. 29.684,09		
Fondo incentiv. art.113 comma 2  D Lgs 50/2016	€. 2.787,49		€. 2.787,49		
Fondo incentiv. art.113 comma 4  D Lgs 50/2016	€ 1.267,04		€. 1.267,04		
spese tecniche progettazione, DL e sicurezza	€. 38.000,00		€. 48.000,00		
CNPAIA 4% su spese tecniche	€. 1.520,00		€. 1.920,00		
IVA spese tecniche 22%	€. 8.694,40		€. 10982,40		
Indagini geologiche, CAP e IVA incluse	€. 4.919,19		€. 4.919,19		
Fornitura , IVA compresa	€. 114.082,16		€. 53.598,85		
Imprevisti, IVA inclusa	€. 16.680,86		0		
Sommano	€. 211.773,76	€. 211.773,76	€. 153.159,06	€. 153.159,06	
	Totale	€. 450.000,00		€. 450.000,00	
•	con Deliberazione della Giunta Municipale n° 121 del 26 04 2019 è stata approvata la perizia di variante in  oggetto  secondo il seguente importo  296.840,94;  costituito per euro 281.840,94 da lavori e per euro 15.000,00, per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
•	in data 25 07 2019 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione della perizia di variante tra il Comune di Matelica e l’Impresa Massicci Srl   
Considerato che:
•	durante il mesi di aprile – maggio 2019 nel territorio comunale si sono verificati forti fenomeni meteorici che, tra le varie, hanno creato problemi anche alla conservazione del solido stradale, già parzialmente realizzato, in particolar modo in corrispondenza del tratto  i maggior pendenza compreso tra l’ingresso dalla rotatoria posta lungo l’attacco della S.R.  256 Muccese per una lunghezza di 130 m circa;
•	siccome in tale tratto la sezione stradale è in rilevato, per ristabilire le capacità portante e migliorare la stabilita di tale tratto di strada, si rende opportuno prevedere la realizzazione di un allargamento della scarpata di valle dalla sezione 5 alla sezione 14  per una lunghezza di 120 – 140 circa e per una larghezza media, misurata in prossimità del codolo stradale di 150 -180 cm e secondo una pendenza di natural declivio del materiale di apporto, da realizzarsi a strati con materiale ghiaioso proveniente sia dal sito del cantiere, sia integrato  on altro, proveniente da fuori cantiere, il tutto opportunamente sistemato e compattato;
•	i lavori sopra descritti sono ritenuti necessari per aumentare la stabilità generale del tratto strada;
•	per tali lavori di sistemazione della scarpata il Direttore dei Lavori, Ing. Cesare Liberati ha trasmesso in data 19 07 2019 prot. 10785 una relazione relativa all’esecuzione di lavori in economia su tali opere, per l’importo di 14.168,16 euro, tutto ricompreso nelle somme a disposizione dell’intervento, senza aumento di spesa complessivo;
•	gli elaborati prodotti dall’ing, Cesareti per i citati lavori in economia sono i seguenti:
All A-E relazione tecnica – Quadro economico
All B-E Computo metrico lavori in economia 
Tav 01 Planimetria e sezioni 
secondo il seguente quadro economico
LAVORI 		
Importo soggetto a ribasso	€. 12.6849,88		
ribasso d'asta del 25,769%	€.-3.259,75		
importo lavori ribassato	€. 9.390,13		
Oneri della sicurezza diretti	€ 1.200,00		
Importo lavori a misura	€ 10.590,13	€ 10.590,13	
SOMME  A  DISPOSIZIONE			
IVA 10% su lavori 	€. 1.059,03		
spese tecniche per collaudatore statico  iva e cassa compresa	€. 1.757,27		
Imprevisti, IVA inclusa	€. 761,74		
Sommano	€. 3.578,03	€. 3.578,03	
	Totale	€. 14.168,16	

•	Visto che  l’impresa Massicci s.r.l. con sede legale in Via Codacchio snc, – 04013 – Sermoneta, P.IVA 01864970513 in data 25 07 2019 prot. 11042 ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori in economia

 Visto il decreto sindacale n. 29 del 18/05/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
 D E T E R M I N A
- approvare le premesse;
- approvare la perizia dei lavori in economia redatta dall’Ing. Cesare Liberati per la sistemazione del tratto stradale in rilevato per un importo complessivo di 14.168,16 euro secondo il seguente quadro economico
LAVORI 		
Importo soggetto a ribasso	€. 12.6849,88		
ribasso d'asta del 25,769%	€.-3.259,75		
importo lavori ribassato	€. 9.390,13		
Oneri della sicurezza diretti	€ 1.200,00		
Importo lavori a misura	€ 10.590,13	€ 10.590,13	
SOMME  A  DISPOSIZIONE			
IVA 10% su lavori 	€. 1.059,03		
spese tecniche per collaudatore statico  iva e cassa compresa	€. 1.757,27		
Imprevisti, IVA inclusa	€. 761,74		
Sommano	€. 3.578,03	€. 3.578,03	
	Totale	€. 14.168,16	

     - affidare i lavori in economia all’impresa Massicci s.r.l. con sede legale in Via Codacchio snc,  – 04013 – Sermoneta, P.IVA 01864970513, già presente in cantiere-

   - dare atto che la spesa trova capienza all'interno del quadro economico approvato.  

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to Boldrini Giovanni	

Il Responsabile del Settore
f.to  Ronci Roberto

==============================================================

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 21-08-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==============================================================