UFFICIO  TECNICO	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.555 DEL 12-04-2019
Registro Generale 575

Matelica, li 22-05-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA LOGGIA DEL MERCATO". CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Vista la delibera di Giunta comunale n. 90 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Restauro e Risanamento conservativo della Loggia del Mercato", dell'importo complessivo di Euro 280.000,00;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 190 del 10/08/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Restauro e Risanamento conservativo della Loggia del Mercato", dell'importo complessivo di Euro 280.000,00;

Vista la determina n. 1115 del 23/10/2017 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di relativi alla "Restauro e Risanamento conservativo della Loggia del mercato", che prevede il seguente quadro economico:

A	Importo totale dei lavori (IL)	€. 200.186,95	
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29	
B	Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)	€. 5.057,47	
C	Importo totale (IL + CSA)	€. 205.244,42	
D	Importo lavori soggetto a ribasso di gara (IL - CSI)	€. 193.165,66	
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
E1	IVA sui lavori 10%	€. 20.524,44	
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00	
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16	
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48	
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13	
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.800,00	
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 546,85	
E	Totale somme a disposizione	€. 79.813,05	
TOTALE (A + E)	€. 280.000,00	

Vista la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°13 del 19.02.2018 con cui viene aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo della Loggia del Mercato” alla ditta Lopergolo Costruzioni s.r.l. con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, 133 – 62024 – Matelica, P.IVA 01808390437, avendo la stessa ottenuto il punteggio complessivo migliore, relativo alle offerte tecniche, temporali ed economiche proposte in sede di gara, con un ribasso percentuale pari a 31,650% corrispondente ad un prezzo per l’esecuzione dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, pari ad €. 132.028,73, per un importo contrattuale pari a €. 144.107,49;

Vista la determina n. 1101 del 26/07/2018 con cui si approva la variazione di quadro economico secondo il seguente schema:

A	Importo totale dei lavori (IL)	€. 132.028,73	
A.1	Spesa sicurezza inclusa (CSI)	€. 7.021,29	
B	Spesa sicurezza aggiuntiva (CSA)	€. 5.057,47	
C	Importo totale 	€. 144.107,49	
			
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
E1	IVA sui lavori 10%	€. 14.410,75	
E2	Spese tecniche per progetto, DL, contabilità e sicurezza	€. 38.079,00	
E3	4% per Cassa Nazionale Inng-Archh	€. 1.523,16	
E4	IVA 22% su spese tecniche	€. 8.712,48	
E5	Incentivi e spese per la progettazione	€. 2.627,13	
E6	Integrazione ponteggio e puntellature su Via Cuoio (oneri fiscali inclusi)	€. 7.810,00	
E7	Arrotondamenti ed imprevisti	€. 62.729,99	
E	Totale somme a disposizione	€. 135.892,51	
TOTALE (A + E)	€. 280.000,00	

    Vista la richiesta di proroga della ditta “Lopergolo Costruzioni srl”  di Matelica (MC) pervenuta in data 04/04/2019 con la quale si chiedeva una proroga al termine contrattuale;

    Vista la nota del direttore dei lavori "Studio Ingegneria Tosti e Associati" pervenuta in data 08/04/2019 sulla richiesta di proroga che esprime parere favorevole;

    Vista la relazione del R.U.P. Ing. Roberto Ronci in data  10/04/2019 sulla richiesta di proroga che esprime parere favorevole limitatamente a giorni 110;

Ritenuto condivisibile ed accoglibile la richiesta presentata dalla ditta appaltatrice

Visto l'art. 38 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
   
Visti i decreti sindacali n. 48 n. 49 del 29/12/2018 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

 - di concedere alla Ditta “LOPERGOLO COSTRUZIONI srl” di Matelica, appaltatrice dei lavori in oggetto,  una proroga di giorni 110 sul termine contrattuale;

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to Boldrini Giovanni	

Il Responsabile del Settore
f.to  Ronci Roberto

==============================================================

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 20-05-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==============================================================