COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

====================================================================

C O P I A 
--------- 
VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 57 del 22-07-017

Registro generale n. 684

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: lavori di sostituzione edilizia del complesso sco=  
lastico in Montereale capoluogo-edificio strategi= 
co - approvazione e liquidazione stato finale 
 
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di luglio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso: 
che gli edifici scolastici presenti in Montereale capoluogo e destinati ad ospitare la Scuola Elementare e la Scuola Media risultano essere stati danneggiati dal sisma del 06/04/2009 che ne ha determinato l’inagibilità;

che l’edificio presente in Via Porta Marana e destinato a Scuola Elementare è già stato oggetto di un intervento di demolizione;

che l’Amministrazione Comunale richiedente già beneficiaria di un finanziamento previsto al n.39 dell’allegato al decreto n.89 del 27/12/2011 per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per ospitare la Scuola Elementare e la Scuola Media in Montereale capoluogo, risulta altresì beneficiaria di un ulteriore finanziamento di € 1.200.000,00 per “Demolizione e Ricostruzione Edilizia Scolastica in Montereale Capoluogo – Opere di Completamento” (Delibera CIPE 135/2012 Edilizia Pubblica Cratere 2013 – 2015);

che con deliberazione n° 82 del 9 agosto 2013 la Giunta Comunale ha:
•	nominato il geom. Italo Durastante quale responsabile unico del procedimento, per lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico per ospitare la Scuola Elementare e la Scuola Media del Comune di Montereale;
•	dato formale mandato al geom. Italo Durastante  di adottare  ogni atto necessario e conseguente per l’attivazione dei lavori sopra citati;

che con propria determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni n° 192 del 4 settembre 2013 è stato stabilito:
•	di approvare il verbale di gara redatto in data 4 settembre 2013 e conseguentemente di affidare l’incarico professionale per lo svolgimento del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di demolizione della scuola media di Montereale capoluogo e successiva ricostruzione al dott. ing. Romeo Bucci, nato ad Amatrice ( RI ) il 06/05/1969 con sede legale in Amatrice, via Madonna della Porta, 5, C.F.: BCC RMO 69E06 A258D, P.I.: 00849410576, al prezzo di euro 96.556,71 al netto del ribasso d'asta del 3,00 % oltre Cassa ed I.V.A.;
•	di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà il disciplinare di gara per accettazione; 
•	di prendere atto , ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione; 
•	di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente C.U.P. : I83D13000250005 ed il seguente C.I.G.: 52912383BA; 
•	di dare atto che l'intervento è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici "approvato con decreto del Commissario Straordinario con atto n° 29 del 16 marzo 2012 nell'importo di euro 800.000,00 e che tale importo sarà aggiornato contestualmente all'approvazione del nuovo programma" giusta art. 13 del D.P.R. 207/2010 ed artt. 126 e 128 del D. Lgvo 12 aprile 2006, n° 163, ( codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),, il quale prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo a base d’asta superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno; 
•	di dare atto che alla spesa necessaria per la remunerazione del professionista si farà fronte con le somme a disposizione dell'Amministrazione che saranno previste nel quadro economico del progetto;

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni n° 266 del 25/11/2013 è stato affidato al dott. Alessandro Lorè, nato a Brunico ( BZ ) il 04/11/1967, residente a L'Aquila, via Cerfennia ( Pettino ) n° 2, con studio in loc. S. Elia, via Manieri, n° 18, C.F.: LRO LSN 67S04  B220Q, P.I. n° 01328660665, matricola Epap: 008970K, il seguente servizio: *   redazione indagini geognostiche e geofisiche, relazione geologica, geotecnica e sismica sui terreni per la ricostruzione di un edificio scolastico in Montereale. CIG :5820543009 - CUP : I83D13000250005,  al prezzo di euro 7.900,00 oltre contributo previdenziale 2% ed I.V.A. 22 % e così complessivamente euro 9.830,76.
che il Consiglio Comunale, con la deliberazione n° 40 del 3/12/2013, ha approvato il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche ove è previsto, tra l’altro, l’intervento in parola;

che con deliberazione n° 4 del 17 gennaio 2014 la Giunta Comunale ha attribuito “valenza strategica all’edificio scolastico in parola che ospiterà sia la scuola media che la scuola elementare di Montereale capoluogo;

che con determinazione dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni n° 14 del 21 gennaio 2014 è stato stabilito, tra l’altro, di:
•	affidare all’arch. Loreto Maria Forti, nato a Montereale il 31/01/1943, P.I. 00156640666, collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico in Montereale capoluogo al prezzo forfettario omnicomprensivo di euro 4.000,00 oltre cassa 4%, pari ad euro 160,00 ed I.V.A. 22 %, pari ad euro 915,20 e così complessivamente euro 5.075,20;     
•	dare atto che la spesa sarà prevista nel quadro economico del progetto definitivo;
•	dare atto che all’intervento è stato attribuito il seguente C.I.G.: Z700D6DA21.

che il progetto definitivo, redatto dal professionista incaricato, dott. ing. Romeo Bucci, è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 25 del 21/03/2014 sulla scorta dei pareri rilasciati dagli Uffici competenti ed appresso richiamati unitamente ai provvedimenti assunti: W.F. di L’Aquila prot. n° 0000655 del 21/01/2014; ASL di L’Aquila prot. n° 0002456 del 14/01/2014; Genio Civile di L’Aquila prot. n° 13634 del 28/02/2014;

che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, con nota del 10/04/2014, prot. n° 1575, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 12/04/2014, n° 2875, ha ritenuto di dover incrementare l’importo di euro 1.872.000,00, già in programmazione con DCR n° 89 del 27/12/2011 per un importo di euro 672.000,00 e con delibera CIPE n. 135/2012 per un importo di euro 1.200.000,00,  per euro 47.033,46 e pertanto l’importo complessivo dell’intervento ammesso a finanziamento risulta essere pari ad euro 1.919.033,46;

che con determinazione dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni n° 108 del 16/05/2014 è stato stabilito:
•	di approvare il preventivo di spesa rimesso dallo studio Legale Eulex, con sede a Roma in via Virginio Orsini, 19, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 16 aprile 2014, al n° 2941, con cui lo stesso studio ha dichiarata la propria disponibilità a svolgere l’attività di assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione di gara e nella gestione della procedura di affidamento al prezzo di euro 6.000,00 oltre CPA ed IVA come per legge;
•	di imputare la spesa complessiva di euro 7.612,80 nel fondo incentivante di cui all’art. 92 del decreto legislativo n° 163/2006 e ss. mm. ii.;
•	di prendere atto che ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà la presente determinazione per accettazione; 
•	di prendere atto , ai sensi dell’art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
•	di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all’intervento è stato assegnato il seguente C.U.P. : I83D13000250005 ed il seguente C.I.G.: Z050F3C734; 

che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, con nota del 5 giugno 2014, prot. n° 2920, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 10 giugno 2014 al n° 4049, ha comunicato l’ultimazione dell’istruttoria sul progetto esecutivo con “ esito positivo “ e, contestualmente, ha richiesto della documentazione ai fini dell’emanazione del Decreto di  approvazione della spesa;

che il progetto esecutivo, redatto dal professionista incaricato, dott. ing. Romeo Bucci, è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 57 del 20/06/2014; 

che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, vista la documentazione inviatagli a seguito della richiesta innanzi richiamata, ha inviato a questo Comune la determinazione n° 153 del 26 giugno 2014, concernente l’approvazione della spesa relativa al progetto esecutivo ed il trasferimento di danaro a titolo di acconto inerente alla sostituzione edilizia del complesso scolastico sito in Montereale capoluogo ospitante la scuola elementare e media – Comune di Montereale;
 
che con determinazione dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni n° 133 del 27 giugno 2014 è stato stabilito di:
 
1.	considerare le premesse parte integrante e sostanziale dello stesso;
2.	approvare il bando ed il disciplinare di gara;
3.	indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara aperta avente ad oggetto la sostituzione edilizia del complesso scolastico in Montereale per ospitare gli alunni della scuola elementare e media;
4.	individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara e nel disciplinare; 
5.	demandare l’esame della documentazione amministrativa e tecnica nonché dell’offerta economica ad apposita commissione  giudicatrice che sarà nominata in conformità all’art. 84 del decreto legislativo n° 163/2006 e ss. mm. ii.;
6.	stabilire che l’esecuzione del lavoro verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
7.	riservare all’Amministrazione di procedere all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
8.	di procedere alla pubblicazione del bando in conformità alle procedure di legge, giusta art. 66 del decreto legislativo n° 163/2006 e ss. mm. ii..

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni n° 199 del 07/10/2014 è stato:
1.	nominata la commissione giudicatrice come appresso:
•	geom. Italo Durastante - Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni – Responsabile Unico del Procedimento;
•	dott.ssa Maria Pascarella – Segretario comunale – commissario;
•	dott. ing. Giovannino Anastasio – Responsabile Area Sisma – commissario;
•	dott. ing. Andrea De Simone – Responsabile Area Tecnica comune di Cagnano Amiterno – commissario;
•	dott. arch. Giovanni Luca Germinario - Responsabile Area Tecnica comune di Scoppito – commissario;
•	sig.ra Angela Maria Garofalo – collaboratrice professionale – segretario verbalizzante;

1.	stabilito che ai commissari: - dott.ssa Maria Pascarella, dott. ing. Giovannino Anastasio ed al segretario di commissione sig.ra Angela Maria Garofalo quali dipendenti della stazione appaltante non spetta alcun compenso economico; 
2.	determinato in euro il compenso al netto di spese ed oneri per la redazione del progetto definitivo della palestra in: (CP) ∑(V x P x G x Qi) = euro  9.220,39 da tenere in considerazione ai fini della determinazione del compenso spettante ad ogni commissario esterno alla stazione appaltante; 
3.	determinato il compenso spettante ad ogni commissario esterno alla stazione appaltante in euro 714,65 come appresso quantificato: 
•	compenso base: euro 9.220,39 x 5 % = euro 461,02;
•	compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato oltre il 1° è pari al 5 % del compenso base: 5 % di 461,02 x 8 = euro 184,48;
•	rimborso forfettario spese varie nella misura del 15 % del compenso base: 15 % di 461,02 = euro 69,15;
•	compenso complessivo spettante ad ogni commissario: euro 461,02 + 184,48 + 69,15 = euro 714,65 oltre oneri previdenziali se dovuti;

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni, n° 207 del 04/11/2015, è stato stabilito:
•	di approvare provvisoriamente i verbali di gara, redatti dalla commissione giudicatrice ai fini dell'espletamento della gara aperta per l'affidamento dei lavori di sostituzione edilizia complesso scolastico - edificio strategico - in Montereale capoluogo, contraddistinti con i nn° 1, 2, 3 e 4 da cui risulta che alla ditta RGS Costruzioni sono stati attribuiti complessivamente 100 punti di cui 50 punti per l'offerta tecnica e 50 punti per l'offerta economica e, conseguentemente, è risultata 1° classificata;
•	di affidare provvisoriamente alla ditta RGS Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, i lavori di  sostituzione edilizia complesso scolastico - edificio strategico - in Montereale capoluogo, ivi compresi quelli previsti nell'offerta tecnica, al prezzo di euro 1.423.145,87 al netto del ribasso d'asta offerto del 10,313% oltre ad euro 44.632,12 per oneri per la sicurezza speciali ed uro 9.601,42 per oneri per la sicurezza diretti ( compresi nei prezzi unitari ) non soggetti a ribasso d'asta;
•	di subordinare l'affidamento definitivo dei lavori all'avvenuta acquisizione della certificazione di cui al decreto legislativo n° 159/2011;
•	di prendere atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica;
•	di prendere che alla spesa complessiva di euro 1.919.033,46 si farà fronte con i fondi messi a disposizione dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
•	di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.U.P.:I83D13000250005 e C.I.G.: 5820543009.

che con determinazione dell'area tecnica lavori pubblici, urbanistica, servizi e manutenzioni n° 60 del 04/04/2016, è stato stabilito:  

•	di approvare definitivamente i verbali di gara, redatti dalla commissione giudicatrice ai fini dell'espletamento della gara aperta per l'affidamento dei lavori di sostituzione edilizia complesso scolastico - edificio strategico - in Montereale capoluogo, contraddistinti con i nn° 1, 2, 3 e 4 da cui risulta che alla ditta RGS Costruzioni sono stati attribuiti complessivamente 100 punti di cui 50 punti per l'offerta tecnica e 50 punti per l'offerta economica e, conseguentemente, è risultata 1° classificata;
•	di affidare definitivamente alla ditta RGS Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, i lavori di  sostituzione edilizia complesso scolastico - edificio strategico - in Montereale capoluogo, ivi compresi quelli previsti nell'offerta tecnica, al prezzo di euro 1.423.145,87 al netto del ribasso d'asta offerto del 10,313% oltre ad euro 44.632,12 per oneri per la sicurezza speciali ed uro 9.601,42 per oneri per la sicurezza diretti ( compresi nei prezzi unitari ) non soggetti a ribasso d'asta;
•	di prendere atto che l'affidamento definitivo dei lavori è fatto in forza dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 06/09/2011, n° 159 e ss. mm. ii., che consente alla Stazione Appaltante di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia fatta salva la condizione risolutiva del contratto;  
•	di prendere atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica nel rispetto dei termini di cui all'art. 11, comma, 10, del decreto legislativo n° 163/2006 e ss. mm. ii.;
•	di prendere che alla spesa complessiva di euro 1.919.033,46 si farà fronte con i fondi messi a disposizione dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
•	di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente C.U.P.:I83D13000250005 e C.I.G.: 5820543009;

che con determinazione dell'area servizi e manutenzioni n° 25 del 17/06/2016, è stato stabilito:  
•	di nominare l'ing. Sevi Tommaso, nato a L'Aquila il 11/03/1954, C.F.: SVE TMS 54C11 A345O, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di L'Aquila con il n° 741, collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico in Montereale capoluogo al prezzo forfettario omnicomprensivo di euro 4.000,00 oltre cassa 4%, pari ad euro 160,00 ed I.V.A. 22 %, pari ad euro 915,20 e così complessivamente euro 5.075,20; 
•	di dare atto che l'ing. Tommaso Sevi subentra all'arch. Loreto Maria Forti agli stessi patti e condizioni;    
•	di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto definitivo;
•	di prendere atto che ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà la presente determinazione per accettazione; 
•	di prendere atto , ai sensi dell’art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
•	di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all’intervento rimane lo stesso CIG ovvero il seguente: Z700D6DA21.

Che con determinazione dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica n° 58 del 5/9/2016 è stato stabilito:
•	di prendere atto dell’errore materiale commesso nell’espletamento della gara ivi compreso e nell’indicazione dell’importo dei lavori indicati nella determinazione dell'area tecnica lavori pubblici, urbanistica, servizi e manutenzioni n° 60 del 04/04/2016;
 
•	di approvare il nuovo quadro economico alla luce del ribasso conseguito a seguito dell’espletamento della gara pubblica e delle spese effettivamente sostenute ad oggi ed appresso trascritto:
 	 	 	 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO	 	 	 	
 	 	 			PROGETTO	POST GARA	
A		 	Somme a base d'appalto	 	 	 	
 	A.1	 	Importo lavori soggetti a ribasso	 	€ 1.514.490,05	€ 1.514.490,05	
 		 	 	 	 	 	
 	A.2	 	Oneri sicurezza diretti 	 	€ 9.601,42	€ 9.601,42	
 	A.3	 	Oneri sicurezza speciali - indiretti (non soggetti a ribasso)	 	€ 46.632,12	€ 46.632,12	
 	A.4	 	Oneri Manodopera	 	 	 	
 			importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	 	 	 	
 	A.5		Ribasso d'Asta (10,313% su 1.514.490,51)	 	€ 156.189,410	€ 156.189,41	
 			 	 	 	 	
 	 		Totale parziale A Nel post-gara[(A1+A2+A3+A4)-A5] (imp. Contr.)	 	€ 1.414.534,64	€ 1.414.534,64	
 	 	 	 	 	 	 	
B		 	Somme a disposizione dell'amministrazione	 	 	 	
 	B1	 	Lavori in economia		 	 	
 	B2	 	Rilievi accertamenti, indagini		 	 	
 		B.2.1	Indagini		 	 	
 		B.2.2	Rilievi 		€ 4.000,00	€ 4.000,00	
 		B.2.3	Altro oneri per richiesta pareri progetti 		€ 600,00	€ 600,00	
 	B3	 	Allacci ai pubblici servizi		 	 	
 	B4	 	Imprevisti, Fondi per acconto bonario		 	 	
 		B.4.1	Imprevisti 		€ 7.701,43	€ 7.701,43	
 		B.4.2	Fondo per accordi bonari (D. L. n. 163/2006 - Art. 12 - max 3%)		 	 	
 	B5	 	Acquisizione aree e immobili		 	 	
 	B6	 	Spese  generali ( B.6.1+B.6.2+B.6.3+B.6.4 )		€ 108.735,77	€ 108.735,77	
 		B.6.1	Progettazione , preliminare, definitiva, esecutiva		 	 	
 		B.6.2	Direzione lavori e contabilità		 	 	
 		B.6.3	Spese geologiche (relazione)		€ 7.900,00	€ 7.900,00	
 		B.6.4	Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione		 	 	
 	B7	 	Spese di supporto al Rup consulenza giuridica x gara		 	€ 5.000,00	
 	B8	 	Spese per commissioni giudicatrici		€ 3.000,00	€ 1.429,30	
 	B9	 	Spese per pubblicità e per opere artistiche		 	 	
 	B10	 	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo		 	 	
 		B.10.1	Analisi di Laboratorio		 	 	
 		B.10.2	Collaudo statico		 	 	
 		B,10,3	Collaudo tecnico-amministrativo		€ 4.000,00	€ 4.000,00	
 		B.10.4	AVCP		€ 600,00	€ 600,00	
 	B11	 	Fondo interno (Incentivi Rup)		 	 	
 		B.11.1	Fondo interno (art. 93 c.7bis ai sensi dell'art 13 bis D. Lgs. n. 90/2014)	 	 	
 		B.11.2	Art. 90, comma 5		€ 31.414,00	€ 25.070,00	
 	B12	 	Spese per IVA 		€ 172.621,27	€ 172.621,27	
 		B.12.1	IVA per Lavori in appalto	10%	€ 141.435,46	€ 141.435,46	
 		B.12.2	CNNPAIA (4% SU B6) + ( B.2.2 + B6 + B7+B.10.3 )	4%	€ 4.511,43	€ 4.911,43	
 		B.12.3	IVA per spese generali (Iva su B6+7+B.12.2)	22%	€ 26.674,38	€ 27.818,38	
 	B13	 	Spese per Trasloco (Max 5 € al m²)		 	 	
 	B14	 	Economie Lavori (post gara)		€ 156.189,41	€ 156.189,41	
 	B15	 	Economie Lavori IVA (post gara)		€ 15.618,94	€ 15.618,94	
 		 	economie varie	 	 	€ 1.588,08	
 	 	 	Totale parziale (B) (B1+B2….+B14+B15)	 	€ 504.498,20	€ 502.910,12	
 	 	 	TOTALE (A+B)	 	€ 1.919.033,46	€ 1.919.033,46	

			 	 	 	 	
			 	 	 	 	
 	 	 	Economie 	 	 	 	
 	 	 	Economie Lavori (post gara)	 	 	€ 156.189,41	
 	 	 	Economie Lavori IVA (post gara)	 	 	€ 15.618,94	
 	 	 	Altre Economie (variazioni somme a disposizione)		 	€ 1.588,08	
 		 	 	 	 		
 	 	 	TOTALE	 	 	€ 173.396,43	

Che con deliberazione n° 19 del 01/03/2017 la Giunta Comunale ha:
•	approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori  di sostituzione edilizia del complesso scolastico in Montereale capoluogo-edificio strategico, proposta dalla direzione lavori, dott. ing. Romeo Bucci, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 11 febbraio 2017 al n° 1990;
•	preso atto che i lavori di sbancamento in roccia compatta con l’uso del martello pneumatico ed il conseguente trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, già eseguiti dall’impresa RGS Costruzioni srl, hanno determinato una maggiore spesa di euro 77.167,05 oltre I.V.A. 10 %; 
•	preso atto che la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva è costituita dai seguenti elaborati: 
•	Tavola D.02 - relazione tecnica illustrativa;
•	Tavola D.03 - planimetria scavo su roccia e contabilizzazione scavi e documentazione fotografica; 
•	Tavola D.04 - computo metrico estimativo di variante;
•	Tavola D.05 - quadro comparativo;
•	Tavola D.06 - quadro economico e schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
•	Autorizzato l’ufficio a procedere all’affidamento dell’incarico professionale di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione e di collaudatore statico e tecnico-amministrativo per i lavori di costruzione della palestra a servizio del complesso scolastico in Montereale capoluogo, già in corso di realizzazione;
Vista la determinazione dell’area tecnica lavori pubblici ed urbanistica n° 15 del 24 marzo 2017 con cui è stato stabilito:
•	di approvare la proposta migliorativa formulata dalla ditta RGS Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 25/02/2017 al n° 3003, consistenti nella modifica dei materiali per la costruzione delle tramezzature interne e del controsoffitto;
•	di prendere atto che l’impresa eseguirà le migliorie proposte agli stessi patti e condizioni previste nel contratto di appalto;
•	di prendere atto che le proposte migliorative determinano una riconsegna anticipata del complesso edilizio scolastico di giorni 35 oltre ai 30 giorni già stabiliti con la precedente modifica delle tamponature esterne;
•	di stabilire che per effetto di tutte le migliorie proposte dall’impresa ed approvate dalla stazione appaltante il complesso scolastico dovrà essere restituito con 65 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata per il giorno 7 settembre 2017 e quindi entro e non oltre il giorno 4 luglio 2017;
•	di confermare che ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna completa dell’opera verrà applicata una penale di € 1.000,00 ( euro mille/00 );

Visto 
Il certificato redatto in data 4 luglio 2017 da cui risulta che i lavori di sostituzione edilizia complesso scolastico in Montereale capoluogo – edificio strategico – risultano ultimati alla data del 4 luglio 2017 e quindi nel rispetto dei tempi stabiliti;

la relazione a strutture ultimate per quanto concerne il deposito  n° 113/14/AQ, redatta dal professionista all’uopo incaricato, dott. ing. Romeo Bucci nonché l’attestazione di avvenuto deposito rilasciata dal Genio Civile di L’Aquila, prot. n° 0155228/17 del 08/06/2017, restituita in data 30 giugno 2017;

la relazione a strutture ultimate per quanto concerne il deposito  n° 515/16/AQ ( Palestra ), redatta dal professionista all’uopo incaricato, dott. ing. Romeo Bucci nonché l’attestazione di avvenuto deposito rilasciata dal Genio Civile di L’Aquila, prot. n° 0156142/17 del 09/06/2017, restituita in data 30 giugno 2017;
 
gli atti contabili “ Stato Finale ” presentati dalla direzione lavori ed acquisiti al protocollo generale dell’Ente in data 20 luglio 2017, prot. n° 8332 da cui risulta un credito a favore della ditta R.G.S. Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, di euro 48.846,57 oltre I.V.A. 10 %, pari ad euro 4.884,66 e così complessivamente euro 53.731,23;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero di protocollo INAIL_8104184, con scadenza validità 28/10/2017, da cui risulta che la ditta R.G.S. Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, è in regola;  

Ritenuto in questa fase di dover procedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo stato finale e disporne il pagamento a favore degli aventi diritto dopo l’accredito delle somme da parte dell’USRC;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n° 207;

VISTO il D.lgvo 267/2000;
determina

1. di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di sostituzione edilizia del complesso scolastico in Montereale capoluogo-edificio strategico, da cui risulta un credito a favore della ditta R.G.S. Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, di euro 48.846,57 oltre I.V.A. 10 %, pari ad euro 4.884,66 e così complessivamente euro 53.731,23;

2. di liquidare e pagare, dopo l’accredito delle relative somme da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione alla ditta R.G.S. Costruzioni srl, con sede legale in via Melchiorre Delfico, n° 42, 64100, Teramo, C.F. e P.I.:01749180673, la somma di euro 48.846,57 oltre I.V.A. 10 %, pari ad euro 4.884,66 e così complessivamente euro 53.731,23 a tacitazione di quanto dovutogli relativamente allo Stato Finale dei lavori di sostituzione edilizia del complesso scolastico in Montereale capoluogo-edificio strategico;

3. di imputare la spesa complessiva di euro 53.731,23 sul cap. 2639, int. 2040301, del bilancio corrente esercizio, gestione residui; 

4. di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all’intervento è stato attribuito il seguente CUP : I83D13000250005 ed il seguente CIG :5820543009 per quanto concerne i lavori. 

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

===================================================================

Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

===================================================================