COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

====================================================================

C O P I A 
--------- 
VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 42 del 06-06-017

Registro generale n. 565

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: lavori  di manutenzione straordinaria del cimitero  
di  VILLE  DI  FANO  di  Montereale      C.I.G. n. 
Z931CBC4C6 - proroga al termine contrattuale 
 
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di giugno

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 adottata nella seduta del 23 giugno 2015, giuridicamente efficace, è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015;

- che con determinazione dell’Area Lavori Pubblici e Urbanistica  n.02 adottata in data 01 giugno 2016, è stato stabilito di approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a €.40.000,00 di cui all’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e di pubblicare lo stesso per giorni 10 naturali e consecutivi con scadenza la 10 giugno 2016 ore 23,59;

- che il relativo avviso è stato pubblicato dal 01 al 10 giugno 2016 termine ultimo per presentare la richiesta di inserimento nell’elenco di che trattasi da parte degli operatori economici interessati;

- che con successiva determinazione dell’Area Lavori Pubblici e Urbanistica n. 09 adottata in data 18 Giugno 2016, è stato approvato  “l’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o  inferiore a Euro 40.000,00 di cui all’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016”;

- che con  deliberazione di Giunta Comunale n.105 adottata nella seduta del 27 dicembre 2016, è stato approvato, tra gli altri, anche il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di VILLE DI FANO di Montereale    per il complessivo importo di €.28.330,31 e come da seguente quadro economico:

a. Lavori:
a.1. Importo lavori …………………..………….……..€.22.847,02
   (di cui €.685,00. quale oneri della sicurezza non soggetti a riobasso)
 Totale lavori……………………..€.22.847,02
b. Somme a disposizione dell’Amministrazione
b.1. importo I.V.A. al 22% di a……………..…….€.5.026,35
b.2. incentivo art. 113 D.L.gs n.50/2016 pari 2% di a….€.456,94
Totale somme a disposizione……€.5.483,29
_______________________
Totale Intervento…………€.28.330,31

- che a seguito della procedura di gara espletata in data  31 dicembre 2016 , con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.99 adottata in data 31 dicembre 2016, sono stati affidati i lavori di che trattasi alla Impresa Individuale Alberto Sabatini, nato a Montereale (AQ) il 27 dicembre 1949, con sede in Montereale, Frazione Busci, Via Comunale n.c.08 - P.I.: 01346950668, che ha offerto il ribasso del 23,00% sull’importo posto a base d’asta rideterminando il seguente quadro economico:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo lavori di progetto……………….....€.	22.847,02		
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre..………€.	685,00		
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.€..	22.162,02		
A.4. Ribasso offerto pari al 23,00% a detrarre……………€.	5.097,27		
Importo dei lavori al netto del ribasso…..€.	17.064,75		
Importo oneri sicurezza a sommare…….€.	685,00		
A. Totale importo di contratto  e oneri della sicurezza…………..€.	17.749,75	
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%......................€.	456,94		
B.2 importo I.V.Al.al 22%.................................................€	3.904,95		
B.3. Economie di gara………………………………..…€.	6.218,67		
B. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione…….€.	10.580,56	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)………………..€.	28.330,31	

- che con determinazione n.17 adottata in data 24 marzo 2017, è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza (ex- D.L. 81/2008 e s.m.i.) all'Ing. Daniele Sevi, nato a L'Aquila il 26 giugno 1989, con studio in L'Aquila,Via Giosuè Carducci n.c.37 - C.F.SVEDNL89H26A345G - P.I.:01995190665 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n.3249 sez. A rideterminando il nuovo seguente quadro economico:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo lavori di progetto………………...……....€.	22.847,02		
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre..………………..…€.	685,00		
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza..…€.	22.162,02		
A.4. Ribasso offerto pari al 23,00% a detrarre……………€.	5.097,27		
Importo dei lavori al netto del ribasso…..€.	17.064,75		
Importo oneri sicurezza a sommare…….€.	685,00		
A. Totale importo di contratto  e oneri della sicurezza…………..€.	17.749,75	
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 		
B.1. Spese Tecniche:		
B.1.a. Direzione Lavori.…………….......…………€.	1.783,00		
B.1.b. Coordinamento sicurezza in esecuzione……€.			
A sommare B.1............€.	1.783,00	
B.2. Incentivo art.113 D.L.vo n°50/2016 2% di A.1 (€.456,94)		
B.2.a. R.U.P. pari al 60% del 2%.........................€.	274,16		
B.2.b. Collaboratore pari al 5% del 2%................€.	22,85		
B.2.c. Fondo innovativo pari al 20% del 2%........€.	91,39		
A sommare B.2............€.	388,40	
B.3. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1......…………………..€.	71,32	
B.4. Importi I.V.A.	
	
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% per lavori su “A”……….......€.	3.904,95		
B.4.b. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche  B.1+B.3...€.	407,95		
B.4. a sommare………………….€.	4.312,90	
B.5. Economie di gara...................................................................................€.	4.024,94	
B. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione…….€.	10.580,56	
IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)………………..€.	28.330,31	

Considerato  che con verbale redatto in data 04 maggio 2017, i lavori di che trattasi sono stati formalmente e di fatto iniziati dall'Impresa esecutrice a tutt'oggi mai sospesi;
Rilevato  che  la lettera di invito protocollo n.12151 del 28 dicembre 2016, sottoscritta per accettazione dall'Impresa in luogo del contratto di appalto prevedeva il termine per l'esecuzione delle opere in giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi;
Vista la richiesta di proroga di giorni 10 (dieci) formulata dalla Impresa esecutrice pervenuta in data 05 giugno 2017 ed acquisita al protocollo n.6551 con apposto in calce alla stessa il parere favorevole della Direzione Lavori datato 30 maggio 2017;
Visto l’art.159 D.P.R. n°207/2010 commi 5, 6 e 7;
Ritenuta altresì la competenza a procedere ai sensi del comma 10° art.159 del D.P.R. n°207/2010;
Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

determina

1. Per le motivazioni indicate nella richiesta formulata Impresa Individuale Alberto Sabatini, nato a Montereale (AQ) il 27 dicembre 1949, con sede in Montereale, Frazione Busci, Via Comunale n.c.08 - P.I.: 01346950668 pervenuta in data 05 giugno 2017 ed acquisita al protocollo n.6551 con apposto in calce alla stessa il parere favorevole della Direzione Lavori datato 30 maggio 2017, di AUTORIZZARE La proroga al termine contrattuale di giorni  10 (DIECI) naturali e consecutivi per un complessivo termine contrattuale di giorni 40 (QUARANTA) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
3. di dare atto che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000,  e  del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

===================================================================

Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

===================================================================