COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

====================================================================

C O P I A 
--------- 
VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 14 del 06-04-018

Registro generale n. 256

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: :    donazione  della  Fondazione Onlus Prosolidar  
della  "struttura  permanente  che ospiti la scola 
dell'infanzia  di Montereale e la sede municipale" 
-  demolizione della scuola dell'infanzia in  Mon= 
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di aprile

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- che il territorio del Comune di Montereale  e di altri Comuni limitrofi il 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma con successive ulteriori forti scosse del 30 ottobre e del 18 gennaio 2017;

- che a causa del terremoto è stata messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che nella immediatezza dell’evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici ;

- che con Decreto Sindacale n.6252 adottato in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto la apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 adottata nella seduta del 09 maggio  2017, l'Amministrazione Civica ha stabilito  "accettazione iniziativa di solidarietà da parte della Fondazione Prosolidar per la costruzione di una nuova sede municipale e scuola materna in Montereale Capoluogo individuazione dell'area e demolizione edificio pericolante;

- che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.18 adottata nella seduta del 06 giugno 2017, è stata definitivamente accettata la donazione e approvato lo schema di convenzione;

- che con deliberazione di giunta Comunale n.91 adottata nella seduta del 20 settembre 2017, è stato approvato il progetto architettonico della nuova struttura anche ai sensi del dell’art.7 comma 1° lettera a) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. delegando, con il medesimo atto,  la attuazione della deliberazione e di tutti gli atti consequenziali  il responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica;

- che il progetto prevede la preventiva demolizione dell'immobile esistente;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.112 adottata in data 20 novembre 2017, è stata approvata la variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 prevedendo la copertura finanziaria di €.50.000,00 per fare fronte alla demolizione dell'immobile esistente come da seguente quadro economico:

A. Importo lavori:		
Importo lavori a base di gara (di cui €.1.200,00 per oneri sicurezza)……..€.	40.000,00	
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%......................€.	800,00		
B.2 importo I.V.Al.al 22%.................................................€	8.800,00		
B.3. Imprevisti...................................................................€.	400,00		
B. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione…….€.	10.000,00	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)………………..€.	50.000,00	

Dato atto:
- che con determinazione n.47 adottata in data  14 giugno 2017, è stato stabilito di approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici con validità annuale 2017/2018 per l’affidamento di lavori di importo pari o  inferiore a €.40.000,00 di cui all’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e di pubblicare lo stesso per giorni 10 naturali e consecutivi con scadenza alle ore 23,59 del 25 giugno 2017;

- che il relativo avviso è stato pubblicato dal 14 al 25 giugno 2017 termine ultimo per presentare la richiesta di inserimento nell’elenco di che trattasi da parte degli operatori economici interessati;

- che con successiva determinazione dell’Area Lavori Pubblici e Urbanistica n. 87 adottata in data 02 novembre 2017, è stato approvato  “l’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o  inferiore a Euro 40.000,00 di cui all’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016”;

- che a seguito della procedura di gara esperita in data 07 dicembre 2017, con determinazione dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.92 adottata in data 07 dicembre 2017, sono stati affidati i lavori di demolizione della scuola dell'infanzia in  Montereale e smaltimento macerie alla impresa Individuale Emidio Pacifici, con sede in Piazza Duomo, 03 - 67017 - Pizzoli - P.I.: 01189560665 per un importo pari ad €.38.797,20 di cui €.1.200,00 quale importo oneri per la sicurezza rideterminando il seguente nuovo quadro economico scaturito a seguito della procedura di gara:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo lavori di progetto………………...……....€.	40.000,00		
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre..………………..…€.	1.200,00		
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza..…€.	38.800,00		
A.4. Ribasso offerto pari al 3,10% a detrarre……………€.	1.202,80		
Importo dei lavori al netto del ribasso…..€.	37.597,20		
Importo oneri sicurezza a sommare…….€.	1.200,00		
A. Totale importo di contratto  e oneri della sicurezza…………..€.	38.797,20	
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%......................€.	800,00		
B.2 importo I.V.Al.al 22%.................................................€	8.535,38		
B.3. Imprevisti...................................................................€.	400,00		
B.4. Economie di gara………………………………..…€.	1.867,42		
B. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione…….€.	11.202,80	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)………………..€.	50.000,00	

- che durante l'esecuzione della demolizione, tra le murature portanti è affiorata una canna fumaria e nei locali sottotetto inaccessibili ad un sopralluogo dei serbatoi entrambi in eternit;

- che nel serbatoio destinato al riscaldamento posto al piano interrato dell'ala vecchia è risultato contenente una quantità  gasolio che deve essere estratta e smaltita prima;

- che in data 08 marzo 2018, è pervenuto il preventivo offerta rimesso dall'impresa richiesto verbalmente per l'urgenza che prevede una spesa complessiva di €.18.013,79 ottenuto come di seguito:

a. bonifica n.2 serbatoi, una canna fumaria in eternit e estrazione e smaltimento liquidi.....a corpo................................................................................................€.14.765,40
b. importo I.V.A. al 22%...........................................................€.3.248,39
totale a+b.......................€.18.013,79

- che a causa dell'urgenza legata alla natura e specificità dei materiali da rimuovere è stata data disposizione verbale di proseguire nella rimozione e bonifica;

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in atti depositato;
Visto il codice C.I.G. n.Z2D220FD25
Visto:
•	l’art.102 comma 2° e l’art.216 del D.Lgs n.50/2016
•	l’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016
•	il D.L. 18.08.2000, n° 267, l’art. 107, l’art. 109 e art. 184, commi 1, 2 e 3;
•	il D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009.

Determina

1. di ratificare la disposizione verbale di procedere alla bonifica eternit e estrazione e smaltimento gasolio impartita all'impresa dal Responsabile Unico del procedimento;

2. di approvare il preventivo offerta pervenuto in data 08 marzo 2018e vistato dallo scrivente per congruità fornito dalla Impresa Individuale Emidio Pacifici, con sede in Piazza Duomo, 03 - 67017 - Pizzoli - P.I.: 01189560665  che prevede la spesa complessiva di €.18.013,79 di cui €.14.765,40 per lavori ed €.3.248,39 quale importo I.V.A.al 22%;

3. di affidare alla  Impresa Individuale Emidio Pacifici, con sede in Piazza Duomo, 03 - 67017 - Pizzoli - P.I.: 01189560665 la bonifica dei due serbatoi e la canna fumaria in eternit e la'estrazione con smaltimento del gasolio contenuto nel serbatoio interrato

4. Di autorizzare, rispetto al progetto iniziale  per l’esecuzione delle maggiori opere, una proroga al termine contrattuale di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi per un complessivo termine contrattuale di giorni 50 (cinquanta);

5. di far gravare la spesa di €.18.013,79,  sul capitolo n.2630 codice n.04.01-2.02.01.09.003;

6. di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza Pubblica;

7. di prendere atto che ai sensi dell’art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà la presente determinazione con i relativi allegati per accettazione; 

8. di prendere atto , ai sensi dell’art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione con i relativi allegati;

9. di dare atto che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"

10. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all’Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000,  e  del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

===================================================================

Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

===================================================================