COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676	

Reg. generale 176						CIG 
IMP. N. _________ DEL ______________
Ufficio TECNICO		CAP ____________ [  ]C  [  ]R

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE

Numero  76   Del  03-10-19

Oggetto:	POR  FESR ABRUZZO  2014/2020 ASSE V RIDUZIONE DEL RISCHIO  IDROGEOLOGICO  INTERVENTI  DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO  DELLA  RESILIENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A R ISCHIO  IDROGEOLOGICO.  PRIMI  INTERVENTI  DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO CUP D66J15000070001.   RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E SPESE TECNICHE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO REGIONALE DI REVOCA  QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli  effetti dell’art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali  ;

PREMESSO :

•	che il  Comune di Pietracamela è stato inserito nella proposta di programmazione POR-FESR 2014-2020 per le opere di risanamento idrogeologico per instabilità dei pendii che interessa infrastrutture stradali di collegamento ed abitazioni in località MONTE CALVARIO nel Comune di Pietracamela – LOTTO I Cod. ReNDiS 13IR822/G1,  per un importo complessivo di €   326.000,00;
•	che con determinazioni Responsabile  Area Tecnica dott.ssa Serena Taglieri n. 9/2015 e  26/2015 è stato incaricato l'ing. Ernesto Foschi quale progettista strutturale  e ambientale  dell'intervento;
•	con determinazione  area tecnica n.  119/2015 è stato  affidato al Dott. Marco Iti l'incarico per la relazione geologica CIG Z6014C7DD1  ;
•	che con determinazione area tecnica n. 121/2015 è stato  affidato al Geom Fazzini Gabriele  l'incarico per gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008  CIG Z081664043 ;
•	che con  delibera del Commissario Straordinario  assunti i poteri della  Giunta n. 10/2015 del 26/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare;
•	che con  delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della  Giunta n. 22/2015 del 25/06/2015 è stato approvato il progetto preliminare con QTE rideterminato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo;
•	che con delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della Giunta n. 8 del 08/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo ;
•	che in data 13/04/2017 si è avuto un improvviso distacco di massi, dovuto  alle sollecitazione degli ultimi e ripetuti eventi sismici, che sono precipitati sulla provinciale 43 per Prati di Tivo ed al ridosso di alcune strutture alberghiere;
•	che in data 14/04/2017 prot. 1286 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha provveduto mediante l'istituto della somma urgenza ai primi interventi di rimozione delle maggiori condizioni di pericolo, provvedendo al disgaggio controllato dei massi smossi e al consolidamento mediante reti paramassi delle parti maggiormente instabili, disponendo la esecuzione dell'intervento a carico della ditta  F.lli Persia srl di Teramo;
•	che in data 19/04/2017 prot.  1286 è stata rimessa  alla  Giunta la richiesta di autorizzazione per la somma urgenza con la relativa  annessa perizia  giustificativa per i  conseguenti provvedimenti;
•	che la direzione dei lavori in somma urgenza è stata svolta dall'Ufficio Tecnico con il supporto dell'Ing. Foschi progettista dell'intervento sul pendio di Monte Calvario;
•	che con delibera di GC 29 del  24/04/2017 è stata  approvata ed  autorizzata la somma urgenza da parte della Giunta Comunale;
•	che al fine di finanziare l'intervento di somma urgenza la documentazione relativa, essendo alcuni dei lavori eseguiti in somma urgenza già previsti nel progetto POR-FESR, è stata inoltrata alla Regione Abruzzo Dipartimento OOPP e Governo del Territorio - Servizio Difesa del Suolo DPC027;
•	in data 28/04/2017 è stato eseguito un apposito sopralluogo dal Servizio Tecnico della Difesa del Suolo al fine di verificare lo stato dell'arte;
•	la Regione Abruzzo  Dipartimento OOPP e Governo del Territorio - Servizio Difesa del Suolo DPC027, ha rimesso in data 8/05/2017 prot. 133180/17 l'autorizzazione, con le motivazioni nella stessa nota riportate,  per  l'iscrizione degli interventi eseguiti in somma urgenza nel progetto di che trattasi provvedendo alla conseguente rendicontazione nel rispetto delle modalità dall'Autorità di Gestione  del programma di finanziamento ai fini della loro ammissibilità;
•	che in data 19/10/2017 l'Ing Foschi ha rimesso progetto esecutivo variato come da indicazione della Regione Abruzzo e a seguito dell'intervento di somma urgenza sopra ricordato, approvato con delibera di Giunta Comunale 66/2017  ed a avente il seguente QTE ;

QUADRO TECNICO - ECONOMICO POR FESR 2014-2020 ASSE V - PRIMI INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTO SULLA INSTABILITA DEI PENDII CHE INTERESSA MONTE CALVARIO I° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO CUP D66J15000070001 COD. ReNDiS 13IR822/G1

IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA (AL NETO RIBASSO DEL 20%)	125.982.52			
				
IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	93.097,01			
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	5.269,36			
SOMMANO			224.348,89	
				
SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto				
Rilievi topografici	5.054,61			
Indagini geotecnici	4.500,00			
Studi geologici 	6.500,00			
Imprevisti 10%	-			
Acquisizione aree e immobili e indennizzi	7.300,00			
Spese tecniche  e art 92 Dlgs 163/2006	39.798,98			
Spese per commissioni giudicatrici	-			
Spese per accertamenti di laboratorio	2.523,69			
ANAC	-			
Iva  lavori e imprevisti 10%	22.434,89			
Iva indagini geognostiche 22%	-			
Cassa previdenza e iva  22% studio geologico geotecnico	2.688.40			
Spese generali - Cassa previdenza e iva 22%  su spese tecniche e  contributo ANAC	10.850,54			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	101.651,11		101.651,11	
TOTALE INVESTIMENTO			326.000,00	

•	che con determinazione Area Tecnica 78/2015 è confermato l'affidato all'Ing. Ernesto Foschi  la progettazione  definitiva ed  esecutiva e la ddl dell'intervento di che trattasi CIG  Z5514C7DBC, rettificando l'importo dell'affidamento;
•	che con determinazione Area Tecnica 202/2017 sono state rideterminate le spese tecniche;
•	che con determinazione 173/2017 rettificata dalle determinazioni 50 e 71 del 2018 è stata indetta procedura di evidenza pubblica mediante procedura ristretta  in due fasi e  modalità  di selezione dell'operatore  con il  massimo ribasso;
•	che con determinazione 160/2018 si è provveduto alla aggiudicazione definitiva a favore della ditta F.lli  Persia Costruzioni;
•	a seguito di tale aggiudicazione si ha il seguente QTE post gara:

QUADRO TECNICO - ECONOMICO POR FESR 2014-2020 ASSE V - PRIMI INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTO SULLA INSTABILITA DEI PENDII CHE INTERESSA MONTE CALVARIO I° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO CUP D66J15000070001 COD. ReNDiS 13IR822/G1

IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA (AL NETO RIBASSO DEL 20%)	125.982,52			
				
IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO al netto del ribasso d'asta	87.166,80			
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	5.269,36			
SOMMANO			218.418,68	
				
SOMME A DISPOSIZIONE				
Rilievi topografici	5.054,61 			
Indagini geognostiche	4.500,00 			
Studi geologici geotecnico	6.500,00 			
Imprevisti 10%	-			
Acquisizione aree e immobili e indennizzi	7.300,00			
Spese tecniche  e art 92 Dlgs 163/2006	39.798,98 			
Spese per commissioni giudicatrici	-			
Spese per accertamenti di laboratorio	2.523,69 			
ANAC	-			
Iva  lavori e imprevisti 10%	21.841,59 			
Iva indagini geognostiche 22%	- 			
Cassa previdenza e iva  22% studio geologico geotecnico	2.688.40 			
Spese generali - Cassa previdenza e iva 22%  su spese tecniche e  contributo ANAC	10.850,54			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	101.058,08 		101.058,08	
RIBASSI ASTA E QUOTA IVA COMRPESA	6.523,24		6.523,24	
TOTALE INVESTIMENTO			326.000,00	

•	che nel corso dei lavori si è reso necessario approntare una perizia di variante suppletiva con le motivazioni  riguardante interventi non previsti e non prevedibili quali riportati nella relazione di perizia;
•	che la documentazione inerente detta perizia di variante è stata inoltrata con prot. 538 del 12/02/2019 alla Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture per la approvazione di rito;
•	che la Regione Abruzzo ha sospeso con propria nota del 01/04/2019 acquisita al protocollo del Comune . 1143 del 02/04/2019, la disponibilità dei ribassi d'asta per le ragione illustrate dal Responsabile d'Azione nella riunione del  27/02/2019;
•	che la Regione Abruzzo ha diniegato, con propria nota del 11/09/2019 acquisita al protocollo del Comune n. 3002 del 12/09/2019, l'uso delle economie rinvenibili nel quadro economico causa il mancato raggiungimento a livello regionale del target di spesa relativo al performance framework del 31/12/2018 con il conseguente taglio di oltre 1,5 milioni di euro sul programma di finanziamento;
•	che a seguito di quanto sopra il taglio lineare applicato a tutti i soggetti attuatori è pari a 6,5798 % che per il Comune di Pietracamela equivale ad euro 21.450,31 ;
•	che necessita rimodulate il QTE, rettificando le imputazioni di spesa in essere ed accantonando le somme di cui sopra che non potranno essere rendicontate e liquidate;
•	che il quadro dei pagamento ad  oggi è il seguente:

1	Lavori in somma urgenza	€. 138.580,78	
2	Lavori appaltati da contratto	€. 95.883,48	
Spese generali		
3	Indagini geognostiche	€.   5.490,00	
4	Rilievi topografici	€.   6.289.95	
5	Contributo ANAC	€.       255,00	
Spese tecniche		
6	Spese geologo	€.   4.977,60	
7	Spese progettazione e ddl 	€.  29.871,27	
			
	totale	€. 281.348,08	

•	che il quadro dei pagamenti/impegni da liquidare ad  oggi è il seguente:

spese tecniche		
1	Attivita di cui al DLgs 81/2008	€.   3.586,00	
2	Art 103 dlgs 50/2016	€.   1.346,10	
Spese generali		
3	Somme accantonate per conto della Regione	€. 21.450,31	
	totale	€. 26.382,41	

•	che il totale delle somme impegnate o da impegnare per obblighi vincolanti ammonta  ad  euro  307.730,49;
•	che le risorse disponibili da impegnare per la perizia di variante ammontano ad  euro 18.268,73;
•	che per  quanto sopra necessita rideterminare il QTE;
•	che per quanto sopra necessita  accantonare le somme stralciate dalla Regione Abruzzo;

VISTI: 

•	Il DLGS 50/2016 per la parte vigente  ed il  DPR 207/2010 per la parte vigente;
•	Il D.Lgs 267/2001;
•	dato atto che  è stato acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria  ai sensi degli artt. 147 b.  e 153 c. 5 del TUEL;

DETERMINA

•	Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
•	di riapprovare il QTE economico dell'intervento dando atto degli impegni, pagamenti sopra citati, così costituito:

	QUADRO TECNICO - ECONOMICO ESECUTIVO		
					
A)	LAVORI	 	senza iva		
A.2	Importo lavori  SOMMA URGENZA al netto del ribasso 20%	 	125.982,52	125.982,52	
 	 	 	 		
A.3	importo lavori da CONTRATTO al netto degli oneri di cui DLgs 81/2008	 	81.897,44		
A.3	Oneri di cui al D.lgs, n. 81/08 	 	5269,36	87.166,80	
            Importo totale dei lavori d	 	213.149,32	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	 	 		
B.1	Rilievi topografici e analisi materiali	 	5.155,70		
B.2	Indagini geognostiche	 	4.500,00		
B.3	ANAC	 	255,00		
B.4	Imprevisti	 	0,00		
B.5	Acquisizione aree	 	0,00		
B.6	oneri di cui art 113 dlgs 50/2016  	1.346,10	 		
B.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione,  Direzione dei lavori, misura e contabilità.	23.542,92	 		
B7.1b	 Cassa previdenziale  progettazione e  ddl  (Ingegneri 4%)	941,72	 		
B.7.2	studio geologico	4.000,00	 		
b7.2b	 Cassa previdenziale relazione geologica 2%	80,00	 		
B.7.3	Adempimenti di cui DLgs 81/2008	2.800,00	 		
B.7.3b	Cassa previdenza DLgs 81/2008  (geometri 5%)	140,00	 		
B.7	Totale spese tecniche	 	31.689,02		
B.7b	Totale cassa previdenza spese tecniche	 	1.161,72		
B.12	Spese per accertamenti di laboratorio collaudo IVA compresa	 	0,00		
B.8	iva 22%   su spese indagini geologico geotecnico sismico rilievi 	 	9.055,27		
B.9	iva su lavori 	 	21.314,93		
 	   Importo totale somme a disposizione	 	73.131,64	73.131,64	
C)	SOMME  STRALCIATE DALLA REGIONE	 	21.450,31	21.450,31	
D)	SOMME  RESIDUE	 	18.268,73	18.268,73	
TOTALE INTERVENTO	326.000,00	

•	di sub impegnare sull'impegno 140/2017 CAP 3550/0 con capienza di euro 32.229,04    €. 1.346,10 accantonandole in apposito capitolo di Bilancio per le  erogazione di cui art. 103 DLgs 50/2016,  euro 21.450,31  svincolate quali somme trattenute dalla Regione Abruzzo  eventualmente da restituire se erogate  ed  euro   9.432,63 da destinare alla esecuzione dei lavori  di completamento  da impegnare a favore della ditta F.lli Persia CIG  74671517EF  come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3550/0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 RIDUZIONE RISCHIO  IDROGEOLOGICO. INTERVENTO DI M.TE CALVARIO   ART 103 DLGS 50/2016	9	2	2	2	2	9	000	31/12/2019	1.346,10	
Impegno	140/2017 Sub 1	CIG		CUP			

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3550/0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 RIDUZIONE RISCHIO  IDROGEOLOGICO. INTERVENTO DI M.TE CALVARIO   RESTITUZIONE SOMME REGIONE	9	2	2	2	2	9	000	31/12/2019	21.450,31	
Impegno	140/2017 Sub 2	CIG		CUP			

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3550/0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 RIDUZIONE RISCHIO  IDROGEOLOGICO. INTERVENTO DI M.TE CALVARIO LAVORI SUPPLETTIVI	9	2	2	2	2	9	000	31/12/2019	9.432,63	
Impegno	140/2017Sub 3	CIG	74671517EF	CUP			

Di sub impegnare all'impegno 141/2017 del CAP 3550/0, con capienza di euro 2.828,69,  pari somma da destinare alla esecuzione dei lavori  di completamento  da impegnare a favore della ditta F.lli Persia CIG  74671517EF come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3550/0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 RIDUZIONE RISCHIO  IDROGEOLOGICO. INTERVENTO DI M.TE CALVARIO LAVORI AGGIUNTIVI	9	2	2	2	2	9	000	31/12/2018	2.828,69	
Impegno	141/2017 SUB 1	CIG	74671517EF	CUP			

Di sub impegnare sull'impegno 142/2017 del CAP 3550/0 con disponibilità di euro 10.980,00, la somma di euro  7.391,20 da destinare alla esecuzione dei lavori  di completamento  da impegnare a favore della ditta F.lli Persia CIG  74671517EF,  come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3550/0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 RIDUZIONE RISCHIO  IDROGEOLOGICO. INTERVENTO DI M.TE CALVARIO LAVORI AGGIUNTIVI F.LLI PERSIA	9	2	2	2	2	9	000	31/12/2018	7.391,20	
Impegno	142/2017 SUB 1	CIG	74671517EF 	CUP			

•	di trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
•	di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’Ente per  quindici giorni.

Il responsabile Area territorio e Ambiente
Arch D. Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

In data ________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Segretario Comunale
[ ] Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

Ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

[ ] La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile del Servizio Finanziario	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20-11-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pietracamela, lì _____________________	
Il responsabile dell’area	
TURLA DOMENICO