COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676	

Reg. generale 56						CIG 74671517EF
IMP. N. _________ DEL ______________
Ufficio TECNICO		CAP ____________ [  ]C  [  ]R

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE

Numero  23   Del  09-04-19

Oggetto:	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE V RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AZIONE 5.1.1INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO RESILIENZA DEI TERITORI. PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO I STRALCIO CUP D66J15000070001. APPROVAZIONE PRIMO SAL ED EMISSIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli  effetti dell’art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali  ;

PREMESSO
•	che il  Comune di Pietracamela è stato inserito nella proposta di programmazione POR-FESR 2014-2020 per le opere di risanamento idrogeologico per instabilità dei pendii che interessa infrastrutture stradali di collegamento ed abitazioni in località MONTE CALVARIO nel Comune di Pietracamela – LOTTO I Cod. ReNDiS 13IR822/G1,  per un importo complessivo di €   326.000,00;
•	che con determinazioni Responsabile  Area Tecnica dott.ssa Serena Taglieri n. 9/2015 e  26/2015 è stato incaricato l'ing. Ernesto Foschi quale progettista strutturale  e ambientale  dell'intervento;
•	con determinazione  area tecnica n.  119/2015 è stato  affidato al Dott. Marco Iti l'incarico per la relazione geologica;
•	che con determinazione area tecnica n. 121/2015 è stato  affidato al Geom Fazzini Gabriele  l'incarico per gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008;
•	che con  delibera del Commissario Straordinario  assunti i poteri della  Giunta n. 10/2015 del 26/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare;
•	che con  delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della  Giunta n. 22/2015 del 25/06/2015 è stato approvato il progetto preliminare con QTE rideterminato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo;
•	che con delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della Giunta n. 8 del 08/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo ;
•	che in data 13/04/2017 si è avuto un improvviso distacco di massi, dovuto  alle sollecitazione degli ultimi e ripetuti eventi sismici, che sono precipitati sulla provinciale 43 per Prati di Tivo ed al ridosso di alcune strutture alberghiere;
•	che in data 14/04/2017 prot. 1286 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha provveduto mediante l'istituto della somma urgenza ai primi interventi di rimozione delle maggiori condizioni di pericolo, provvedendo al disgaggio controllato dei massi smossi e al consolidamento mediante reti paramassi delle parti maggiormente instabili, disponendo la esecuzione dell'intervento a favore della ditta  F.lli Persia srl di Teramo;
•	che in data 19/04/2017 prot.  1286 è stata rimessa  alla  Giunta la richiesta di autorizzazione per la somma urgenza con la relativa  annessa perizia  giustificativa per i  conseguenti provvedimenti;
•	che la direzione dei lavori in somma urgenza è stata svolta dall'Ufficio Tecnico con il supporto dell'Ing. Foschi progettista dell'intervento sul pendio di Monte Calvario;
•	che con delibera di GC 29 del  24/04/2017 ha  approvato ed  autorizzato la somma urgenza;
•	che al fine di finanziare l'intervento di somma urgenza la documentazione riguardante la somma urgenza, essendo alcuni dei lavori eseguiti in somma urgenza già ricompresi nel progetto POR-FESR,  la documentazione tecnico amministrativa è stata inoltrata alla Regione Abruzzo Dipartimento OOPP e Governo del Territorio - Servizio Difesa del Suolo DPC027;
•	in data 28/04/2017 è stato eseguito un apposito sopralluogo dal Servizio Tecnico della Difesa del Suolo al fine di verificare lo stato dell'arte;
•	la Regione Abruzzo  Dipartimento OOPP e Governo del Territorio - Servizio Difesa del Suolo DPC027, ha rimesso in data 8/05/2017 prot. 133180/17 l'autorizzazione, con le motivazioni nella stessa nota riportate,  per  l'iscrizione degli interventi eseguiti in somma urgenza nel progetto di che trattasi provvedendo alla conseguente rendicontazione nel rispetto delle modalità dall'Autorità di Gestione  del programma di finanziamento ai fini della loro ammissibilità;
•	che in data 19/10/2017 l'Ing Foschi ha rimesso progetto esecutivo variato come da indicazione della Regione Abruzzo e a seguito dell'intervento di somma urgenza sopra ricordato, approvato con delibera di Giunta Comunale 66/2017  ed a avente il seguente QTE ;

QUADRO TECNICO - ECONOMICO POR FESR 2014-2020 ASSE V - PRIMI INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERVENTO SULLA INSTABILITA DEI PENDII CHE INTERESSA MONTE CALVARIO I° LOTTO
PROGETTO ESECUTIVO CUP D66J15000070001 COD. ReNDiS 13IR822/G1

IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA (AL NETO RIBASSO DEL 20%)	125.982.52			
				
IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	93.097,01			
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	5.269,36			
				
SOMMANO			224.348,89	
				
SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto				
Rilievi topografici	5.054,61 			
Indagini geognostiche	4.500,00 			
Studi geologici geotecnico	6.500,00 			
Imprevisti 10%	-			
Acquisizione aree e immobili e indennizzi	7.300,00			
Spese tecniche  e art 92 Dlgs 163/2006	39.798,98 			
Spese per commissioni giudicatrici	-			
Spese per accertamenti di laboratorio	2.523,69 			
ANAC	-			
Iva  lavori e imprevisti 10%	22.434,89 			
Iva indagini geognostiche 22%	- 			
Cassa previdenza e iva  22% studio geologico geotecnico	2.688.40 			
Spese generali - Cassa previdenza e iva 22%  su spese tecniche e  contributo ANAC	10.850,54			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	101.651,11 		101.651,11	
TOTALE INVESTIMENTO			326.000,00	

•	che con determinazione Area Tecnica 78/2015 è stato affidato all'Ing. Ernesto Foschi  la progettazione  definitiva ed  esecutiva e la ddl dell'intervento di che trattasi CIG  Z5514C7DBC;
•	che con determinazione Area Tecnica 119/2015 è stato affidato al Dott. Marco Iti  l'incarico per la redazione della relazione geologica CIG Z6014C7DD1 ;
•	che con determinazione Area Tecnica 121/2015 è stato affidato al Geom. Gabriele Fazzini  l'incarico per l'attività di cui al DLgs 81/2008  CIG Z081664043 ;
•	che con determinazione Area Tecnica 202/2017 sono state rideterminate le spese tecniche;
•	che il RUP del procedimento è il Responsabile Area Tecnica;
•	che la suddetta opera è finanziata per intero  nell'ambito del POR_FESR 2014/2020 Regione Abruzzo;
•	che con determinazione 173/2017 rettificata dalle determinazioni 50 e 71 del 2018 è stata indetta procedura di evidenza pubblica mediante procedura ristretta  in due fasi e  modalità  di selezione con il  massimo ribasso;
•	che nei tempi previsti sono state ricevute n. 57 richieste  di invito tutte ammesse al sorteggio;
•	che in data 23/04/2018 si è provveduto in seduta pubblica al sorteggio;
•	che a seguito di apposito invito, ed  entro la data prestabilita sono pervenute le offerte richieste;
•	che è stata fissata la data per l'apertura delle offerte per il giorno 19/06/2018;
•	che con determinazione 111/2018 è stato istituito il seggio di gara;
•	che con protocollo 1991 del 12/06/2018 a mezzo PEC,  è stato comunicato  alle ditte la data di svolgimento della seduta di gara;
•	che in data 19/06/2018 si è riunito il seggio di gara dal cui verbale  emerge la proposta di aggiudicazione a favore della ditta F.lli PERSIA COSTRUZIONE srl di Tottea di Crognaleto (TE) con il ribasso del 12,03% seconda in graduatoria la ditta Tenaglia srl con il ribasso del 8,50 %;
•	che con protocollo 2128/a/b/c 2129, 2130, 2131  del 21/06/2018 sono stati attuati i controlli di   veridicità   delle autodichiarazione proposta dalla ditta F.lli Persia ;
•	che in data 28/06/2016 e 02/07/2016 sono pervenute le comunicazione della Agenzia delle Entrate e dell'Ufficio Fallimentare del Tribunale di Teramo, mentre nonostante le sollecitazione del 23/07/2018 e 10/08/2018 non sono state certificazioni inerente i carichi pendenti dei soggetti interessati;
•	che necessita provvedere alla stipula del contratto al fine di evitare la eventuale perenzione delle somme e/o la cancellazione del finanziamento, prendendo atto che comunque i lavori devono essere eseguiti entro la stagione invernale;
•	che in data 09/10/2018 è stato stipulato apposito contratto di appalto;
•	che i lavori sono iniziati in data 16/10/2018 mediante redazione di apposito verbale;
•	che in data 16/11/2018 i lavori sono sospesi in attesa di autorizzazione da apposita variante suppletiva da parte della Regione Abruzzo;
•	che in data 05/12/2018 la DDL ha rimesso la documentazione inerente il primo sal composta da libretto misure, registro contabilità,  sommario, stato di avanzamento attestante lavori correttamente eseguiti al 16/11/2018 per  euro 86.544,99 al netto del ribasso d'asta iva esclusa;

•	Richiamate:
•	la Deliberazione di Consiglio n.  8/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2018-2020 ed è in corso di redazione il bilancio di previsione  2019
•	la delibera C.C. n. 9/2017 con cui è stato approvato  il piano triennale OO.PP. 2017/2019 in cui risulta iscritti l'intervento di che trattasi;
•	la delibera di G.C. 25/2018 di approvazione del PEG e assegnazione delle risorse ai Responsabili delle Macrostrutture dell'Ente  ;

•	Dato atto che non ricorre la necessità di  acquisire  il  parere  preventivo sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria  ai sensi degli artt. 147 b.  e 153 c. 5 del TUEL ;
•	visto l’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
•	Visto il D.Lgs. 50/2016., 
•	Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA
•	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
•	di approvare il primo sal composta da libretto misure, registro contabilità,  sommario, stato di avanzamento attestante lavori correttamente eseguiti al 16/11/2018 per  euro 86.544,99 al netto del ribasso d'asta iva esclusa ;
•	di emettere il primo Certificato di Pagamento per  euro 86.112,00 al netto del ribasso e delle trattenute oltre iva;
•	di dare atto che con successivo atto si provvederà  alla liquidazione dell'importo
•	di dare atto che il CIG è    74671517EF  ed  il codice  CUP  è  D61J15000070001 ;
•	di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’Ente per  quindici giorni;

Il responsabile Area territorio e Ambiente
Arch D. Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

In data ________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Segretario Comunale
[ ] Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

Ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

[ ] La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile del Servizio Finanziario	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09-04-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pietracamela, lì _____________________	
Il responsabile dell’area	
TURLA DOMENICO