COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676	

Reg. generale 38						CIG Z5B1E81112
IMP. N. _________ DEL ______________
Ufficio TECNICO		CAP ____________ [  ]C  [  ]R

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE

Numero  19   Del  12-03-18

Oggetto:	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE V RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AZIONE 5.1.1. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO. PRIMI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO I° LOTTO. MONTE CALVARIO. APPROVAZIONE E IMPEGNO LAVORI IN SOMMA URGENZA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9 del 12/06/2017 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli  effetti dell’art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali  ;

PREMESSO
1.	in data 13/04/2017 si è avuto un distacco di massi dalle pendici di Monte Calvario con caduta degli stessi sulla SP 43 a ridosso del centro abitato di Pietracamela e in prossimità di alcune strutture alberghiere;
2.	che il locale Comando dei Carabinieri in data 13/04/2017 ha rimesso apposito verbale con documentazione fotografica attestante i fatti  (protocollo ingresso 1271/2017);
3.	che il locale Comando Polizia Municipale  in data 13/04/2017 ha rimesso apposito verbale attestante i fatti  (protocollo ingresso 1226/2017);
4.	che il  Comune di Pietracamela ha inserito nella programmazione POR-FESR 2014-2020 per le opere di risanamento idrogeologico per instabilità dei pendii,  un intervento di consolidamento e messa in sicurezza del versante di Monte Calvario  con interessamento delle  infrastrutture stradali di collegamento ed abitazioni – LOTTO I Cod. ReNDiS 13IR822/G1,  per un importo complessivo di €   326.000,00;
5.	con determinazioni Responsabile  Area Tecnica dott.ssa Serena Taglieri n. 9/2015 e  26/2015 è stato incaricato l'ing. Ernesto Foschi quale progettista strutturale  e ambientale  dell'intervento;
6.	con  delibera del Commissario Straordinario  assunti i poteri della  Giunta n. 10/2015 del 26/02/2015 è stato approvato il progetto preliminare;
7.	con delibera del Commissario Prefettizio assunti i poteri della Giunta n. 8 del 08/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo ;
8.	in data 14/04/2017, a seguito degli eventi citati, è stato eseguito un apposito sopralluogo congiuntamente con l'ing. Ernesto Foschi progettista dell'intervento citato, al fine di verificare lo stato dei fatti;
9.	dallo stato dei fatti emerge la necessita assoluta di provvedere ad interventi di somma urgenza al fine di eliminare le condizioni di pericolo per il centro abitato e per la popolazione;
10.	in data 14/04/2017 il Responsabile Area Tecnica Arch. Domenico Turla emetteva un verbale di somma urgenza,  ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50/2016, convocando sul posto la ditta F.lli Persia srl e redigendo la prima stima del lavori ammontante provvisoriamente ad  euro 28.584,12;
11.	in data 14/04/2017 è stato emesso verbale di consegna dei lavori per somma urgenza la cui direzione è stata assunta dall'Ing. E. Foschi;
12.	con protocollo 1286/2017 Il Responsabile Area Tecnica del Comune di Pietracamela ha richiesto al Sindaco l'autorizzazione per la esecuzione della Somma Urgenza;
13.	la Giunta Comunale con atto n. 29 del 27/04/2017 ha  autorizzato detta somma urgenza;
14.	che in data 28/04/2017 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra  Ing. E. Foschi, l'Ufficio Tecnico Comunale  e tecnici della Regione Abruzzo  Servizio Difesa del Suolo al fine di verificare lo stato del fenomeno e verificare gli interventi da realizzarsi in relazioni alle opere inserite nel progetto inscritto nel POR FESR 2014/2020;
15.	che nell'ambito di detto sopralluogo è stato  redatto apposito verbale  ed i tecnici della Regione Abruzzo hanno autorizzato il proseguo dei lavori di messa in sicurezza essendo gli stessi compatibili con il progetto (trattandosi di fatto  degli stessi interventi), presentato all'interno del programma POR FESR 2014-2020;
16.	che in data 09/05/2017 è stato emesso il verbale di ultimazione lavori;
17.	che in data 18/05/2017 loro prot. 133180/17 acquisito in pari data prot. 1568,  la Regione Abruzzo  Servizio Difesa del Suolo ha rimesso nota con cui autorizza l'esecuzione delle opere previste e permette l'iscrizione del costo delle stesse all'interno del progetto finanziato con il POR FESR rimodulando di conseguenza il quadro tecnico economico;
18.	che l'Ing E. Foschi, incaricato della DDL,  ha rimesso la contabilità delle opere eseguite in  Somma Urgenza da cui si evince interventi eseguiti  pari ad  euro 154.428,54, che dedotto il ribasso del 20%   diventano  euro 124.505,17 , oneri di cui DLgs 81/2008 compreso,  oltre iva di legge;
19.	che la contabilità presentata risulta conforme e approvabile;
20.	verificata la regolarita contributiva della ditta F.lli Persia srl;

Richiamate:
21.	la Deliberazione di Consiglio n.  8/2017  con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2018-2020;
22.	la delibera C.C. n. 5/2018   con cui è stato approvato  il piano triennale OO.PP. 2018/2019
23.	la delibera di G.C.  n. 25/2018  di approvazione del PEG e assegnazione delle risorse ai Responsabili delle Macrostrutture dell'Ente  ;

•	Acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria  ai sensi degli artt. 147 b.  e 153 c. 5 del TUEL ;
•	visto l’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
•	Visto il D.Lgs. 50/2016., 
•	Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163” per la parte vigente;
•	Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DETERMINA
•	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
•	di approvare la contabilità dei lavori di somma urgenza  rimessa dalla DDL Ing. E.  Foschi e attestante la corretta esecuzione di lavori per  euro 124.505,17 al netto del ribasso del 20% e compreso gli oneri di cui al DLgs 81/2008 oltre iva;
•	di imputare la somma di euro  136.955,69  sul CAP. 3550/0 Cod. 9.2.2.2.2.9.000 come appresso indicato a favore della ditta F.lli Persia Costruzioni  srl  con sede a Crognaleto in via G. D'Annunzio p. iva  01496220672:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3550/0	POR FESR ABRUZZO 2014-2020 RIDUZIONE RISCHIO  IDROGEOLOGICO. INTERVENTO DI MONTE CALVARIO RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI	9	2	2	2	2	9	000	31/12/2018	136.955,69	
Impegno		CIG	Z5B1E81112	CUP			

•	di dare  atto che si applica lo split payment;
•	di dare atto che il codice CIG dell'intervento è Z5B1E81112,
•	di trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

•	di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’Ente per  quindici giorni.
Il responsabile Area territorio e Ambiente
Arch D. Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

In data ________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Segretario Comunale
[ ] Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

Ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

[ ] La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile del Servizio Finanziario	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05-09-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pietracamela, lì _____________________	
Il responsabile dell’area	
TURLA DOMENICO