COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676	

Reg. generale 135						CIG 72018502A1
IMP. N. _________ DEL ______________
Ufficio TECNICO		CAP ____________ [  ]C  [  ]R

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE

Numero  74   Del  30-07-18

Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIETRACAMELA E REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO SENZA VARIAZIONE DELLA SPESA . REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI E DI FINITURA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9 del 12/06/2017 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli  effetti dell’art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali  ;

PREMESSO
•	che i loculi disponibili per le  tumulazioni presso il cimitero di Pietracamela sono esauriti;
•	che è  necessitato provvedere  a realizzare un nuovo blocco di loculi all'interno del perimetro esistente;
•	che con delibera  di Giunta Comunale n.  63/2017 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo  per un importo complessivo di euro  203.000,00 (di cui lavori a base di gara euro 102.905,48) ed il seguente QTE: 
  COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
  		
	QUADRO TECNICO - ECONOMICO AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIETRACAMELA		
					
A)	FORNITURE E INSTALLAZIONI	 	 		
A.1	LAVORI	 	98.405,48		
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	 	4.500,00		
					
            Importo totale LAVORI E FORNITURE	102.905,48	102.905,48	
B)	SOMME A DISOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	 	 		
B.1	Imprevisti opere  3 %		3.087,16		
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione,  Collaudo e prove tecniche sicurezza e collaudo, competenze De Santis comprese, cassa previdenziale e oneri obbligatori a carico della committenza compresi		28.000,00		
B.2a	Oneri di cui art. 113 DLgs 50/2016		720,34		
B.1	Relazione geologica	 	2.800,00		

B.2	
Indagini rilievi e prove laboratorio		500,00		
B.3	Spese   generali, ANAC e commissione di gara iva e oneri vari compresi se dovuti	 	1.500,00		
B.4	Spese per accatastamento		5.500,00		
B.5	Estumulazione iva compresda		9.500,00		
B.6	Loculi provvisori		14.000,00		
B.7	Indennità accesso aree private		1.500,00		
B.8	Interventi di manutenzione straordinaria edifici esistenti iva compresa		9.211,73		
B.9	IVA su lavori e imprevisti		10.599,26		
B.10	IVA  su spese tecniche e generali	 	13.266,00		
 	   Importo totale somme a disposizione	 	100.184,50	100.184,50	
	 	 	 		
TOTALE INTERVENTO	203.089,98	

•	che con determinazione  Area Tecnica n. 158/2017  del 19/09/2017 è stata indetta la procedura di gara;
•	che con  determinazione Area Tecnica n. 187/2017  sono stati aggiudicati i lavori alla ditta KS Costruzioni srl  con sede in piazza Progresso a Teramo P. iva/cf  01873840670, che ha formulato un ribasso del  13,178 % ovvero per un importo di euro 89.937,61 oltre iva di legge, ed il conseguente   QTE post gara:
  COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
  		
	QUADRO TECNICO - ECONOMICO POST GARA  AMPLIAMENTO CIMITERO DI PIETRACAMELA		
					
A)	FORNITURE E INSTALLAZIONI	 	 		
A.1	LAVORI	 	85.437,61		
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA	 	4.500,00		
					
            Importo totale LAVORI E FORNITURE	89.937,61	89.937,61	
B)	SOMME A DISOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	 	 		
B.1	Imprevisti opere  3 %		3.087,16		
B.2	Spese tecniche relative alla progettazione,  Collaudo e prove tecniche sicurezza e collaudo, competenze De Santis comprese, cassa previdenziale e oneri obbligatori a carico della committenza compresi		28.000,00		
B.2a	Oneri di cui art. 113 DLgs 50/2016		720,34		
B.1	Relazione geologica	 	2.800,00		

B.2	
Indagini rilievi e prove laboratorio		500,00		
B.3	Spese   generali, ANAC e commissione di gara iva e oneri vari compresi se dovuti	 	1.500,00		
B.4	Spese per accatastamento		5.500,00		
B.5	Estumulazione iva compresda		9.500,00		
B.6	Loculi provvisori		14.000,00		
B.7	Indennità accesso aree private		1.500,00		
B.8	Interventi di manutenzione straordinaria edifici esistenti iva compresa		9.211,73		
B.9	IVA su lavori e imprevisti		9.301,48		
B.10	IVA  su spese tecniche e generali	 	13.266,00		
B.11	Ribassi di gara  iva compresa		14.265,66		
 	   Importo totale somme a disposizione	 	113.152,37	113.152,37	
	 	 	 		
TOTALE INTERVENTO	203.089,98	

•	che con determinazione   70/2018 è stato approvato il primo SAL;
•	che con determinazione   102/2018 è stato approvato il secondo SAL;
•	che nel corso dei lavori, anche a seguito di indicazioni date dagli Amministratori e prescrizioni esecutive rimesse dallo scrivente ufficio, si è rilevato la necessità di eseguire lavorazioni non previste e/o modificare alcune lavorazioni in essere, in particolare: ampliamento del marciapiede antistante il blocco di loculi, modifica rivestimento da intonaco a travertino lato sinistro del  blocco, rivestimento in travertino lato posteriore blocco, realizzazione parte di impianto elettrico dal blocco fino alla fornitura Enel compreso scavo, reinterro, cavi, cavidotto e quadro di derivazione, diversa categoria di calcestruzzo adottata in fase di definizione del progetto strutturale;
•	i lavori e le opere in variante al progetto ammontano ad euro 5.783,60, le opere aggiuntive a 2.200,00 per  totali euro 7.983,60;
•	che la DDL ha rimesso il quadro comparativo che si intende allegato alla presente;
•	che detto quadro comparativo è stato rettificato dallo scrivente Ufficio  riducendo le somme complessive da  euro 9.310,69 ad  euro 5.783,60 ritenendo ammissibili solamente alcune voci dando atto che l'appalto è stato espletato a corpo ;
•	che le opere aggiuntive, sopra indicate, ammontano ad  euro  2.200,00 oltre iva;
•	che dette opere verranno eseguite dalla ditta KS Costruzioni di Teramo cha ha già in carico l'appalto principale ;
•	la ditta KS Costruzioni risulta in regola con gli adempimenti contributivi giusto DURC_on line INAIL_12446673  del 16/07/2018;

VISTO:
•	la Deliberazione di Consiglio n.  8/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità   2018/2020;
•	la delibera C.C. n. 9/2017 con cui è stato approvato  il piano triennale OO.PP. 2017/2019;
•	la delibera di G.C. 25/2018 di approvazione del PEG e assegnazione delle risorse ai Responsabili delle Macrostrutture dell'Ente  ;
Acquisito il   parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria  ai sensi degli artt. 147 b.  e 153 c. 5 del TUEL ;
visto l’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
Visto il D.Lgs. 50/2016., 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163” per la parte vigente;
Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
DETERMINA
•	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
•	di approvare la esecuzione dei lavori citati in premessa per un importo complessivo di  euro 7.983,60 oltre iva 10%  per  totali euro 8.781,96 senza  aumento della spesa generale  e recuperando dette somme dai ribassi di gara e dalle altre economie del quadro tecnico economico;
•	di affidare  detti lavori alla ditta  KS Costruzioni di Teramo;
•	di impegnare la somma di euro 8.781,96 sul CAP. 3307/0  Cod.  12.9.2.2.1.9.15  del Bilancio 2018 approvato con delibera di C.C. 8/2018 a favore della ditta KS Costruzione di  Teramo come segue sub impegnando all'impegno 176/2017:  

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
3307/0	Esecuzione lavori	12	9	2	2	1	9	15	31/12/2018	8.781.96	
Impegno	176/2017	CIG	72018502A1	CUP			

•	di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’Ente per  quindici giorni.

Il responsabile Area territorio e Ambiente
Arch D. Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

In data ________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Segretario Comunale
[ ] Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

Ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

[ ] La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile del Servizio Finanziario	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05-09-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pietracamela, lì _____________________	
Il responsabile dell’area	
TURLA DOMENICO