COMUNE DI FANO ADRIANO
Provincia di Teramo
Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)	

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  25   Del  26-06-2018

SERVIZIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Reg. generale 50

Oggetto: 	
	LAVORI DI RSTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEL RUP. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA. PRESA D'ATTO POLIZZA PER IL SALDO CON SVINCOLO GARANZIA PRINCIPALE DELL'APPALTO. ASSESTAMENTO Q.E.	

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III^

PREMESSO CHE:
-	con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato  dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
-	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ha dichiarato lo  stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009; 
-	l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753  ha  definito i  primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009, 
-	l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, ha prodotto  ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009;
-	con  i  Decreti del Commissario Delegato Guido Bertolaso n. 1 e 2 rispettivamente del 9 e del 10 aprile 2009, sono stati  istituiti  i Centri Operativi Misti ed identificati i comuni afferenti a tali Centri ivi incluso il Comune di Fano Adriano;
-	con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, recante “Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” sono stati individuati i Comuni ricompresi nella Provincia di Teramo danneggiati dagli eventi sismici; 
-	con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17.07.2009  è stato integrato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16.04.2009 e nell’elenco dei comuni facenti parte della Provincia di Teramo, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, è stato inserito anche il Comune di Fano Adriano;  
-	con Ordinanza n. 3771 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009 sono stati disposti ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009; 

PRESO ATTO della nota datata 20/06/2013 prot. n. 462/U pervenuta da parte del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere, Dott. Paolo Esposito, di attribuzione in via programmatica di un finanziamento di € 100.000,00 per “Restauro muro monumentale ed opere accessorie in centro storico” giusta Determinazione n. 40 del 19/06/2013;
CONSIDERATO che tale finanziamento rientra tra i trasferimenti di fondi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica nei Comuni del Cratere ai sensi del Decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 24/04/2013;
VISTE le successive note da parte dell’ U.S.R.C. (ultima pervenuta al prot. n. 122 del 14/01/2014) con la quale si sollecita la trasmissione dei progetti definitivi ai fini dell’approvazione puntuale della spesa, nonché si comunica la riprogrammazione di detti finanziamenti con Determinazione n. 1 del 08/01/2014 da parte del Responsabile U.S.R.C.;

CONSIDERATO inoltre che:
-	con propria determinazione n. 106 del 05/08/2013 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed eventuali altre fasi all’Arch. Serena Sorgi (Via Stazio,8 64100 Teramo) iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Teramo con  il n. 651 C.F.: SRG SRN 78P54 L103N;
-	in data 06/08/2013 è stata sottoscritta la convenzione di incarico;
-	con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 03/02/2014 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento per un importo totale di € 100.000,00 di cui € 64.753.22 per lavori netti ed € 35.246,47 per somme in amministrazione;
-	con nota del Sindaco prot. n. 363 del 04/02/2014, tale progetto approvato, è stato trasmesso al titolare dell’U.S.R.C.  con tutta la documentazione, al fine della approvazione definitiva della spesa;
VISTA la nota prot. n. 821 del 25/02/2014 da parte dell’U.S.R.C.  con la quale a seguito di incontro tenutosi presso gli uffici il 24/02/2014, sono state richieste delle integrazioni/chiarimenti/modifiche, da apportare alla redigenda progettazione esecutiva;
VISTA la nota del Responsabile prot. 659 del 03/03/2014, con la quale vengono forniti al progettista indirizzi per la redazione della progettazione esecutiva con le integrazioni richieste dall’U.S.R.C.;
VISTI i seguenti atti:
•	la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 1244 del 23/04/2014, con la quale il tecnico incaricato è stato convocato per la redazione del verbale di verifica del progetto esecutivo;
•	il verbale di verifica del progetto esecutivo datato 28/04/2014, positivo;
•	la nota del Sindaco prot. n. 1287 del 28/04/2014 di trasmissione del progetto esecutivo così come validato al titolare dell’U.S.R.C. ai fini della approvazione della spesa;
•	la nota del Responsabile dell’U.S.R.C. prot. n. 2315 del 13/05/2014, con la quale viene comunicata l’approvabilità del progetto esecutivo, per una spesa totale di € 99.998,65;

PRESO ATTO pertanto del verbale di validazione positivo del progetto esecutivo, in data  20/05/20114 redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 55 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel quale viene proposta l’approvazione dello stesso da parte dell’Organo Comunale competente per una spesa complessiva di € 99.998,65;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 23/05/2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento per un importo totale di € 99.998,65 di cui € 65.480,33 per lavori netti ed € 34.518,32 per somme in amministrazione;

CONSIDERATO inoltre che:
•	Con propria Determinazione n. 43/75 del 29/07/2014 è stata individuata la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
•	con propria nota prot. n. 2514 del 29/07/2014 sono stati trasmessi di tutti gli atti per l’espletamento della stessa alla C.U.C. di Tossicia;
•	con Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 67/755 del 13/12/2014, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Vittorio Di Egidio di Montorio al Vomano TE come segue:

•	successivamente sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti all’art. 79 del Dlgs n. 163/2006;
•	con nota del Responsabile della C.U.C. pervenuta al prot.n. 41 del 08/01/2015 sono stati restituiti tutti gli atti della gara in oggetto;
•	con Rep. n. 170/2015 del 12/02/2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l’impresa esecutrice;
•	in data 23/03/2015 al prot. n. 871 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
•	con nota del Sindaco prot. n. 875 del 23/03/2015, è stata richiesta l’erogazione del 1^ acconto sul finanziamento concesso al titolare dell’U.S.R.C. Cratere, ai sensi dell’art. 2 della Determinazione del Responsabile n. 128 del 30/05/2014;
•	l’U.S.R.C., con nota prot. n. 2016 del 09/04/2015 acquisita al prot. n. 1112 del 10/04/2015, ha richiesto di integrare la documentazione trasmessa, al fine della erogazione, con contestuale rimodulazione del quadro tecnico economico post-gara; 
•	con propria Determinazione n. 19/43 del 20/04/2015 è stato rimodulato il quadro tecnico economico post-gara e trasmessa unitamente alla relativa documentazione giustificativa all’U.S.R.C. con nota prot. n. 1225 del 20/04/2015;
•	in data 15/05/2015 al prot. n. 1568 l’U.S.R.C. ha comunicato l’accredito dei fondi relativi al 1^ acconto relativo al 20% per un importo accreditato pari ad € 19.999,73 (giusta Determinazione USRC n. 197 del 13/05/2015);
•	con proprio Atto di Liquidazione n. 21/49 del 15/07/2015, sono state liquidate le spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva all’Arch. Serena Sorgi, per un importo totale in fattura di € 7.587,61;
•	con propri Atti di Liquidazione n. ri 17/43 del 23/06/2015 e n. 22/55 del 03/08/2015 sono stati liquidate le spese in favore dell’Enel per il distacco dei cavi e l’interramento degli stessi per un importo totale di € 286,36;
VISTO il 1° SAL a tutto il 15/07/2015, trasmesso dalla Direzione dei Lavori dott. Arch. Serena Sorgi in data 16/07/2015 al prot. n. 2486,  nell’importo netto dovuto all’Impresa di € 29.640,39;
VISTO il  certificato di pagamento n. 1  in data 05/08/2015 a firma del Responsabile del Procedimento nell’Importo netto di € 29.492,19 + IVA al 10% per un totale  di credito a favore dell’Impresa pari ad € 32.441,41;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 52/88 del 05/08/2015 di approvazione e liquidazione alla impresa esecutrice del 1^ SAL a tutto il 15/07/2015 per un importo netto di € 29.492,19 oltre IVA;
VISTI i seguenti atti della Direzione dei Lavori:
•	verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 27/03/2015;
•	verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 24/04/2015;
•	ordine di servizio n. 1 del 18/06/2015;
•	ordine di servizio n. 2 del 03/08/2015;
•	verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 05/08/2016 per redazione perizia suppletiva e di variante;

VISTA la perizia di variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Serena Sorgi, pervenuta in data 10/08/2015 al prot. n. 2807 e successivamente integrata con nota prot. n 0556 del 19/02/2016, composta dai seguenti elaborati:
  
1.	EE-V_E01 – ELENCO ELABORATI DI VARIANTE – AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016
2.	GE-V_E00 – ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
3.	GE-V_E01 – ELENCO PREZZI DI VARIANTE
4.	GE-V_E02 – ANALISI PREZZI DI VARIANTE
5.	GE-V_E03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
6.	GE-V_E04 – QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA DI VARIANTE
7.	GE-V_E05 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZADI VARIANTE
8.	GE-V_E06 – QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
9.	GE-V_E07 – QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE
10.	RL-V_E01 – RELAZIONE DI VARIANTE – AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016
11.	RL-V_E02 – RELAZIONE SPECIALISTICA DELLE OPERE STRUTTURALI E CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE DI VARIANTE – AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016
12.	AR-V_E01 – PROGETTO ARCHITETTONICO_PIANTA E PROSPETTI STATO DI PROGETTO E STATO VARIATO AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016
13.	AR-V_E02 – DETTAGLI COSTRUTTIVI STATO DI PROGETTO E STATO VARIATO
14.	AR-V_E03 – STRUTTURA DI CONTENIMENTO DELLA MURATURA – DETTAGLI AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016
15.	AR-V_E04 – 	PROGETTO ILLUMINOTECNICO_PIANTA E PROSPETTI
SCHEMI IMPIANTO ELETTRICO
STATO DI PROGETTO E STATO VARIATO
AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2016

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla Direzione Lavori e dall’Impresa appaltatrice che allegato alla presente ne forma parte integrante  e sostanziale;

CONSIDERATO che inoltre che:
•	Con nota del 03/08/2016 prot. n. 2706 il RP ha posto considerazioni in merito alla redigenda variante su apposite richieste dell’Amministrazione Comunale;
•	con nota del 17/08/2015 prot. n. 2871 il RP ha fatto richiesta all’impresa, per gli adempimenti di cui all’art. 161 comma 13 DPR n. 207/2010;
•	con nota del Sindaco prot. n. 2969 del 27/08/2015 tale perizia è stata trasmessa per l’approvazione all’USRC, che ha finanziato le opere;
•	l’USRC con proprie note agli atti ed a seguito di incontri, ha chiesto chiarimenti e integrazioni in merito;

PRESO ATTO altresì:
•	della nota prot. n. 0611 del 24/02/2016 indirizzata alla locale Soprintendenza per la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del Dlgs n. 42/2004;
•	della nota prot. n. 0610 del 24/02/2016 indirizzata alla locale Soprintendenza per la richiesta di si parere ai sensi dell’artt. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
VISTI i seguenti pareri acquisiti per l’approvazione della perizia:
•	parere vincolante della Soprintendenza prot. n. 1390 del 17/03/2016 ai sensi dell’artt. 146 del Dlgs n. 42/2004;
•	autorizzazione della Soprintendenza con prescrizioni prot. n. 1437 del 17/03/2016 ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs n. 42/2004;
•	Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, rilasciata dal Comune di Fano Adriano prot. n. 1004 del 23/03/2016;
•	Autorizzazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, rilasciata dal Comune di Fano Adriano prot. n. 1005 del 23/03/2016;

CONSIDERATO altresì che il nuovo quadro economico scaturente dalla perizia ammonta ad € 99.998,65, medesimo importo del quadro economico approvato all’atto del progetto definitivo/esecutivo sopra richiamato;
VISTA in particolar modo la relazione tecnica sulle motivazioni che hanno indotto ad addivenire della stessa perizia che ci riconducono all’interno dei contenuti e limiti fissati dall’art. 132 D.Lgs. n.163/2006;
VISTO altresì che il Responsabile del Procedimento ha espresso il proprio parere favorevole relativamente alle motivazioni ed ai contenuti che hanno portato alla redazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 redigendo apposita relazione agli atti in data 11/04/2016;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) “cause impreviste e imprevedibili” del DLgs n. 163/2006 la presente perizia suppletiva e di variante, prevede l’inserimento di n. 7 (SETTE) nuovi prezzi in parte dedotti dal Prezziario Regione Abruzzo ed in parte determinati con apposita analisi, con aumento di spesa pari a € 13.553,94 (€ 68.810,28- € 55.256,34) pari al 24,53%, superiore al quinto d’obbligo di cui all’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, usufruendo parzialmente del ribasso d’asta;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area III^ n. 25/53 del 12/04/2016 di approvazione della suddetta perizia suppletiva e di variante rientrante nei limiti di cui all’originario quadro economico con presa d’atto da parte dell’USRC con Determinazione n. 209 del 11/05/2016;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta approvazione, sono sorte varie problematiche, inerenti la fattibilità delle opere in variante, di seguito riassunte:
•	Con nota dell’impresa esecutrice acquisita al prot. n. 3880 del 26/10/2016, venivano sollecitati la DL e il RUP alla ripresa dei lavori;
•	Il RUP con propria nota prot. n. 3910 del 27/10/2017 inviata via PEC ad Impresa e DL, ordina la immediata ripresa dei lavori con l’emissione del 2^ SAL se dovuto, e relativo stralcio delle lavorazioni ritenute di impedimento alla ripresa;
•	La DL con propria nota acquisita al prot. n. 4016 del 07/11/2016 ha comunque rimesso ulteriore variante alla variante n. 1 con stralcio degli interventi come nota sopra detta del RUP;
•	Nel contesto generale in data 26/10/2016 e 30/10/2016, il territorio comunale è stato fortemente investito dai noti venti sismici dell’Italia centrale;
•	Al fine della risoluzione delle problematiche emerse in cantiere anche a seguito del sisma del 2016 e successivo del gennaio 2017, sono state poste in essere tutte le soluzioni possibili per la risoluzione della problematica, anche attraverso periodici incontri in loco con la Direzione dei Lavori e l’Impresa; 
•	Con nota del RUP prot. n. 3780 del 23/10/2017, a seguito di vari incontri, è si è richiesto ad Impresa e DL, di provvedere a variare la suddetta perizia con eliminazione di ulteriori voci di lavorazione oltre a quelle già segnalate con propria nota prot. n. 3910 del 26/10/2016;
•	La DL con nota acquisita al prot. n. 4031 del 16/11/2017, ha ottemperato a quanto richiesto;
•	Il RUP con propria nota prot. n. 4289 del 06/12/2017, ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 162 comma 2 del DPR n. 207/2010 in quanto applicabile, con contestuale richiesta di rimodulazione dell’atto di sottomissione da sottoscrivere a cura dell’impresa;
•	Con note della DL acquisite ai prott. n.ri 4397 del 15/12/2017 e 4495 del 22/12/2017, è stato rimesso l’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa con scomputati definitivamente i prezzi e le lavorazioni da stralciare rispetto alla perizia n. 1 (approvata con Determinazione n. 25/53 del 12/04/2016) e la seconda mai approvata (nota DL prot. n. 4016 del 07/11/2016);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area III^ n. 55/129 del 28/12/2017 di approvazione della suddetta perizia suppletiva e di variante rientrante nei limiti di cui all’originario quadro economico;
VISTA la nota del Sindaco prot. n. 0075 del 09/01/2018 con la quale è stata trasmessa la suddetta perizia all’U.S.R.C. di Fossa AQ al fine della definitiva presa d’atto da parte dell’Ente finanziatore;
VISTA la nota pervenuta da parte dell’USRC acquisita al prot. n. 814 del 07/03/2018, con la quale si comunica la presa d’atto della suddetta perizia con Determinazione del Titolare dell’USRC n. 128 del 21/02/2018;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 datato 16/01/2018 ed acquisito al prot. n. 0242 del 23/01/2018;
VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori datato 13/02/2018 ed acquisito al prot. n. 1360 del 18/04/2018;

VISTO il 2° SAL a tutto il 12/02/2018, trasmesso dalla Direzione dei Lavori dott. Arch. Serena Sorgi in data 18/04/2018 al prot. n. 1359,  nell’importo netto dovuto all’Impresa di € 31.080,80;
VISTO il  certificato di pagamento n. 2 in data 30/04/2018 a firma del Responsabile del Procedimento nell’Importo netto di € 30.777,94 + IVA al 10% per un totale  di credito a favore dell’Impresa pari ad € 33.855,73;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 21/44 del 31/05/2018 di approvazione e liquidazione alla impresa esecutrice del 2^ ed ultimo SAL a tutto il 12/02/2018 per un importo netto di € 30.777,94 oltre IVA;

RICHIAMATI i seguenti atti di Liquidazione:
•	n. 21/49 del 15/07/2015 di pagamento delle spese tecniche di progettazione, in favore del tecnico incaricato Arch. Serena Sorgi;
•	n. 44/103 del 09/12/2015 di pagamento delle spese tecniche di direzione dei lavori, misure e contabilità in proporzione al 1^ SAL, in favore del tecnico incaricato Arch. Serena Sorgi;

PRESO ATTO altresì del Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum datato 04/04/2018 trasmesso dalla Direzione dei Lavori;

VISTO lo stato finale dei lavori al 09/05/2018, la relazione sul Conto Finale e il CRE trasmessi dalla direzione dei lavori in data 18/05/2018  acquisiti al prot. n. 1687 dal quale risulta un credito dell’impresa pari ad € 302,86 oltre IVA di legge per un totale di € 333,15;
VISTA altresì la dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte datata 31/01/2018, trasmesso dall’appaltatore con nota prot. n. 1358 del 18/04/2018;

VISTA la relazione del Resposabile Unico del Procedimento sul Conto Finale data 08/06/2018 e redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 202 del DPR n. 207/2010 in quanto applicabile;

VISTO il DURC ON-LINE regolare valido sino al 05/09/2018;

VISTA la seguente fattura elettronica rimessa dalla ditta affidataria relative all’importo totale dello Stato Finale dovuto:
•	n. 14/PA del 31/05/2018 nell’importo netto di € 302,86 + IVA di legge per un totale di € 333,15 a saldo;	

 CONSIDERATO che a garanzia del pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 163/2006 comma 9 e art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 (in quanto applicabili), è necessario prestare una fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo;
VISTO che la ditta esecutrice, con nota acquisita al prot. n. 2085 del 22/06/2018 ha trasmesso:
•	Polizza fidejussoria per il saldo dei lavori n. 000/2575/53, rilasciata dalla BCC Basciano agenzia di Basciano TE, in data 19/06/2018 prestata ai sensi dell’art. 141 comma 9 Dlgs n. 163/2006 e art. 235 DPR n. 207/2010;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere a:
•	Svincolare la polizza fidejussoria fornita per l’appalto;
•	Prendere atto della polizza fornita per il saldo dei lavori;
•	alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute come sopra relativamente allo Stato Finale dei lavori per l’importo totale lordo di € 333,15 imputando la spesa al capitolo n. 2834/7 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO” del bilancio c/e 2018 (giusto impegno di spesa n. 110/2013); 
•	di autorizzare l’Ufficio Ragioneria, alla liquidazione e pagamento di quanto sopra procedendo alla prevista anticipazione di cassa in attesa del saldo sul finanziamento da parte dell’U.S.R.C.;
CONSIDERATO che la spesa complessiva al netto delle varianti, trova copertura nel Quadro economico del progetto e che lo stesso debba essere aggiornato ed approvato con la presente;

PRESO ATTO che per l’intervento in oggetto sono stati individuati:
•	CUP N.: H58I13000060001;
•	CIG N.: 5875208703;
VISTI gli artt. 27, 122,57, 81,82,86,87 e 141 del D.Lgs n. 163/2006 in quanto applicabili;
VISTO il dlgs n° 267/2000;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 ed in particolare gli artt. 4 e 5;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 04/2017 del 16/02/2017 di nomina del Responsabile dell’Area III^ ;

DETERMINA

1.	Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi della L. n. 241/90 e s.m. e i.; 

2.	DI APPROVARE la relazione sul conto finale del RUP datata 08/06/2018 e redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 202 del DPR n. 207/2010 in quanto applicabile;

3.	DI APPROVARE ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente, le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e del Conto Finale dei Lavori specificati in oggetto, eseguiti dall'impresa appaltatrice DI EGIDIO srl Zona Artigianale, 257- 64046 Montorio al Vomano TE e redatti dalla Direzione dei Lavori –Dott. Arch. Serena Sorgi per l'importo netto di € 302,86;
4.	DI PRENDERE ATTO della polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. 000/2575/53, rilasciata dalla BCC Basciano agenzia di Basciano TE in data 19/06/2018 prestata ai sensi dell’art. 141 comma 9 Dlgs n. 163/2006 e art. 235 DPR n. 207/2010,  fornita dalla ditta appaltatrice;
5.	DI SVINCOLARE, ai sensi dell’art. 235 comma 1 del DPR n. 207/2010, la polizza fidejussoria n. n. 000/2196/62, rilasciata dalla BCC Basciano agenzia di Basciano TE in data 24/12/2014, prestata per la cauzione definitiva sui lavori a favore dell'impresa appaltatrice;

6.	DI LIQUIDARE E PAGARE il suddetto credito a valere a saldo e tacitazione di igni diritto ad avere, sulla fattura n. 14/PA del 31/05/2018 della impresa DI EGIDIO SRL,  nell’importo netto di € 302,86 oltre l’iva esposta per € 30,29 per un totale di € 333,15, da accantonare per il successivo riversamento nei tempi e nei modi di legge all’Erario attenendosi alla nuova normativa vigente dal 1 gennaio 2015 “scissione dei pagamenti ex art.17- ter del D.P.R. 633/72”, imputando la spesa come segue nel seguente capitolo:

N. Cap. 	

Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	

Scadenza Obbligazione 	

Importo 	

Impegno 	

Sub-impegno	
		Miss.	Prog.	Titolo	LIVELLI					
					2^	3^	4^					
2834/7	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO	10	5	2	2	1	9	30/06/2018	€  333,15	110/2013		
7.	DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria, alla liquidazione e pagamento a valere sulla fattura di cui sopra, al fine della richiesta  di accredito del 4^ acconto da parte dell’U.S.R.C.;

8.	DI PRENDERE ATTO che la presente liquidazione è soggetta all’applicazione dell’iva esposta per € 3.077,79, da accantonare per il successivo riversamento nei tempi e nei modi di legge all’Erario attenendosi alla nuova normativa vigente dal 1 gennaio 2015 “scissione dei pagamenti ex art.17- ter del D.P.R. 633/72”;

9.	DI TRASMETTERE la presente per i successivi adempimenti unitamente a tutti gli atti relativi al finanziamento, presso l’U.S.R.C. di Fossa -AQ- al fine della erogazione del 4^ acconto;

10.	DI PRENDERE ATTO che dagli acconti già erogati da parte dell’U.S.R.C. è stata spesa l’intera somma di € 42.735,01 (totale del primo, secondo e terzo acconto);

11.	DI AGGIORNARE il quadro economico dell’intervento nel modo che segue:

	I M P O R T O   D I   P R O G E T T O 			€	99.998,65	
						
	LAVORI A CORPO			€	0,00	
	LAVORI A MISURA			€	70.233,96	
	LAVORI IN ECONOMIA			€	0,00	
1)	TOTALE   LAVORI DA PROGETTO			€	70.233,96	
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	1.825,72	
3)	Costo Manodopera			€	38.333,31	
4)	TOTALE   LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 32,123% pari a € 9.660,94			€	20.413,96	
A)	TOTALE LAVORI 2)+3)+4)			€	60.572,99	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :					
B 1	Lavori in economia esclusi dall’appalto	2,03%	di A)	€	0,00	
B 2	Allacciamenti ai pubblici servizi			€	286,36	
B 3	Imprevisti	3,13%	di A)	€	0,00	
B 4	Incentivi (D.Lgs. 163/06 Art. 93)	2,00%	di 1)	€	1.404,68	
B 5	Spese tecniche:					
B 5.1	Progettazione , direzione , contabilità			€	10.193,62	
B 5.2	Contributo previdenziale (4%)	4,00%		€	407,74	
B 5.3	IVA su spese tecniche (22% del totale)	22,00%		€	2.332,30	
			tot.	€	12.933,67	
B 6	Spese tecniche di variante :					
B 6.1	Progettazione , direzione , contabilità			€	2.247,23	
B 6.2	Contributo previdenziale (4%)	4,00%		€	89,89	
B 6.3	IVA su spese tecniche (22% del totale)	22,00%		€	514,17	
			tot.	€	2.851,29	
B 7	Spese per redazione Consuntivo Scientifico (art. 250 DPR 207/2010)					
B 7.1	Onorari e spese			€	1.000,00	
B 7.2	Contributo previdenziale (4%)	4,00%		€	40,00	
B 7.3	IVA su Consuntivo Scientifico (22% del totale)	22,00%		€	228,80	
			tot.	€	1.268,80	
B 8	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi 					
B 8.1	Spese			€	0,00	
B 8.2	Onorario			€	0,00	
B 8.3	Contributo previdenziale (4%)	4,00%		€	0,00	
B 8.4	IVA su spese di collaudo (22% del totale)	22,00%		€	0,00	
			tot.	€	0,00	
B 9	I.V.A sui lavori :					
B 9.1	IVA per lavori in appalto	10,00%		€	6.057,30	
B 9.2	IVA per lavori in economia	10,00%		€	0,00	
B10	Economie lorde generali			€	14.623,56	
			tot.	€	14.623,56	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 			€	39.425,66	
						
	T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)			€	99.998,65	

12.	PRENDERE ATTO che dalla esecuzione dei suddetti lavori scaturiscono economie pari ad € 14.623,56 delle quali se ne chiederà l’utilizzo presso l’USRC Fossa AQ, al fine di effettuare lavori di completamento al progetto principale;

La presente determinazione esecutiva di precedenti atti, sarà pubblicata all’albo pretorio ON LINE ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D.Lgs  n. 267/2000;
La presente unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.     

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA III^	
f.to  GEOM. QUARANTA GIANPIERO	

_______________________________________________________________
	
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato impegno.

26-06-2018	                  IL RESPONSABILE DELL'AREA II^ 
                       f.to: Di Giacinto Romina							 ___________________________________________________________

La presente determinazione composta:
	da n.______ foglio/i  di cui si  occupano  n.______ facciate;
	da n. ______allegato/i di cui si occupano n.______  pagine;
	(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li _________			Il Responsabile del Servizio

						_____________________

_______________________________________________________________

Pubblicazione Albo Pretorio On-line

Registrata al n. ___________ Registro delle Pubblicazioni.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi  dal _________________ al __________________.

						 L’Incaricata

						______________________
_______________________________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno	n.	del 	Il Ragioniere ________	
Liquidazione	n.	del.	Il Ragioniere ________	
Mandato	n.	del. 	Il Ragioniere ________