COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 88 del 04-07-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN C.DA CARSODUCCI (F.8 - M.4) - APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO E AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di luglio nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;
PREMESSO che
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTO il D.L n. 189 del 18 ottobre 2016, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
VISTO che i suddetti fenomeni hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private dell'intero territorio comunale, mettendo in grave pericolo la pubblica incolumità;
VISTO altresì che al fine di garantire la sicurezza di edifici privati che insistono su pubblica via, che a causa delle gravi condizioni di danneggiamento possono determinare pericolo per la pubblica incolumità, occorre provvedere alla loro messa in sicurezza con rimborso delle spese a valere sui fondi assegnati per l’emergenza “Sisma 2016”;
VISTO che con Delibera di Giunta n. 207 del 29/11/2018 è stato approvato il progetto di messa in sicurezza redatto dal Geom. Alessio De Angelis, iscritto al Collegio dei Geometri di Macerata al n. 1227 – P.IVA 01613640430, dell’edificio sito nel Comune di Sarnano in Contrada Carsoducci, identificato catastalmente al Foglio 4 Particella 8 danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e dunque recante pericolo sulla pubblica via, di importo complessivo pari ad € 31.057,32 avente il seguente quadro economico:
LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	24.112,84	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.205,64	
Tot. lavori	€	25.318,48	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori (10%)	€	2.411,28	
IVA oneri per la sicurezza (10%)	€	120,56	
Spese tecniche	€	1.205,64	
IVA Spese tecniche (22%)	€	265,24	
CNPAIA (4%)	€	48,22	
Imprevisti (5% di “a”)	€	1.205,64	
Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% dell’importo lavori)	€	482,26	
	Tot. somme a disposizione	€	5.738,84	
COSTO TOTALE DELL’OPERA	€	31.057,32	

DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 17 del 20/02/2019 sono stati affidati i lavori all'Impresa Edil Sibillini s.n.c. con sede a Sarnano (MC) in C.da Carsoducci n. 267 - P.IVA 01417840434, la quale ha offerto un ribasso del 3,5% sull’importo dei lavori pari a € 843,95, quindi per un totale di € 23.268,89 oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 1.205,64 quindi per un totale netto da contratto di € 24.474,53 oltre ad IVA al 10%;
RILEVATO che durante i lavori di demolizione parziale dell’edificio in oggetto, si sono verificati ulteriori crolli della porzione oggetto di opere provvisionali, nonché è stata constatata la presenza di soluzioni strutturali impreviste e pertanto è stato necessaria la redazione di un progetto di variante non sostanziale;
CONSIDERATO che in conseguenza di quanto rilevato durante le fasi lavorative è stata richiesta la ridefinizione delle unità strutturali dell’edificio con conseguente produzione delle relative schede AeDES redatte dai tecnici incaricati della Prot. Civile (pervenuta con nota prot. n. 6294 del 06-05-2019) da cui si evince l’esito E – Edificio inagibile con le seguenti indicazioni “l’unico intervento possibile è la demolizione e ricostruzione. L’unità abitativa comprende porzione dell’edificio adiacente, e anche su tale porzione si deve intervenire.” (Protocollo protezione civile n. 30150 del 06/05/2019);
VISTA pertanto la Variante non sostanziale prodotta dal Professionista incaricato Geom. Alessio De Angelis e presentata presso gli Uffici comunali (nota prot. n. 9252 del 27/06/2019) e costituita dai seguenti elaborati: 
-	Relazione Generale;
-	Elaborato Grafico - particolari costruttivi,
-	Elenco Prezzi;
-	Computo metrico;
-	Quadro economico;
-	Cronoprogramma;
VISTO il nuovo quadro economico così ripartito:
LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	24.973,08	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.275,89	
Tot. lavori	€	26.248,97	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori (10%)	€	2.624,90	
Spese tecniche	€	1.275,89	
IVA Spese tecniche (22%)	€	280,69	
CNPAIA (4%)	€	51,04	
Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% dell’importo lavori)	€	510,35	
	Tot. somme a disposizione	€	4.742,87	
COSTO TOTALE DELL’OPERA	€	30.991,84	

da cui si deduce il seguente Quadro di raffronto:
		Importo lavori		OO. sicurezza	Ribasso		TOTALE	
Progetto approvato	€	24.112,84	€	1.205,64	-	€	25.318,48	
Progetto aggiudicato	€	23.268,89	€	1.205,64	3,50 %	€	24.474,53	
Progetto variante	€	24.973,08	€	1.275,89	-	€	26.248,97	
Progetto variante con ribasso	€	24.099,02	€	1.275,89	3,50 %	€	25.374,91	

VISTO l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1, il quale indica che i contratti di appalto possono non essere modificati senza nuova procedura qualora:
-	lett.c), la necessità sia determinata da cause impreviste ed imprevedibili ove la modifica non alteri la natura generale del contratto;
-	lett e), le modifiche non sono sostanziali secondo quanto disposto dal comma 4;
-	comma 2 lett.b), definisce la modifica dei contratti senza nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
DATO ATTO pertanto che la variante si è resa necessaria per cause impreviste e imprevedibili dovute al crollo di parti degli edifici oggetto di messa in sicurezza;
VISTO inoltre che la variante in oggetto comporta un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di € 900,38 compresi oneri per la sicurezza, con una percentuale di incremento dei lavori pari al 3,68 %, quindi inferiore al 15% come da D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO per tutto ciò che tale variante rientra nei dettami del sopra citato art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-	di recepire quale parte integrate e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
-	di approvare il progetto di Variante non stanziale dei lavori di messa in sicurezza dell’importo totale di € 30.991,84 costituito  dalla documentazione prodotta dal  Progettista / Direttore dei lavori incaricato:
•	Relazione Generale;
•	Elaborato Grafico - particolari costruttivi;
•	Elenco Prezzi;
•	Computo metrico;
•	Cronoprogramma;
•	Quadro economico:

LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	24.973,08	
Importo ribasso	€	874,06	
Importo lavori ribassato	€	24.099,02	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.275,89	
Tot. lavori	€	25.374,91	
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori (10%)	€	2.537,49	
Spese tecniche	€	1.275,89	
IVA Spese tecniche (22%)	€	280,69	
CNPAIA (4%)	€	51,04	
Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% dell’importo lavori)	€	510,35	
Imprevisti e somme su fattura (IVA compresa)	€	1.026,95	
	Tot. somme a disposizione	€	5.682,41	
COSTO TOTALE DELL’OPERA	€	31.057,32	

-	di dare atto che tale variante comporta un aumento dell’importo di contratto pari al 3,6% ma non altera la natura del contratto, per cui ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non vi è necessità di una nuova procedura, e pertanto l’importo da corrispondere alla ditta con il ribasso è di € 25.374,91 di cui € 1.275,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari a € 2.537,49, per un totale di € 27.912,40;
-	di riconoscere al Geom. Alessio De Angelis il maggiore importo per le spese tecniche, autorizzate precedentemente con Det. n. 186 del 15/11/2018, per la somma complessiva di € 1.275,89 oltre CAPAIA 4% ed IVA 22% per un totale di € 1.607,62;
-	di dare atto che la maggior somma dovuta alla Variante del lavori trova copertura all’interno del quadro economico di variante tra le somme a disposizione, mediante il reimpiego del ribasso d’asta ed attraverso l’utilizzo degli imprevisti e dunque a valere sul capitolo di Bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021);
-	di trasmettere alla regione Marche, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istituzioni all’uopo impartite, la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 05-07-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 05-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI