COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 121 del 10-09-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RAMPA PEDONALE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA LIBERTA', SCUOLE COMUNALI E PARCO URBANO. APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE ED ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016  - CIG: 78897202E9 - CUP: C71B19000100004.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di settembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
VISTO l’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che:
-	L’Amministrazione comunale ha espresso la necessità di completare il tratto della rampa pedonale che collega P.zza della Libertà con il Parco Urbano e le nuove Scuole Comunali ricostruite a seguito del sisma del 2016;
-	Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale di Sarnano ha redatto il Progetto Definitivo e la documentazione finanziaria per determinare l’importo dell’opera denominata: “Rampa Pedonale per il collegamento P.zza della Libertà con l’area attrezzata delle nuove scuole”;
-	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 27/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori della Rampa Pedonale per il collegamento di P.zza della Libertà con il Parco Urbano e le nuove Scuole Comunali, dell’importo complessivo di € 98.000,00;
-	Che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28/03/2019 è stato aggiornato il Quadro Economico per l’inserimento delle competenze professionali specialistiche in materia di sicurezza e collaudo e pertanto, il Quadro Economico per la realizzazione dell’opera è risultato essere il seguente:

DATO ATTO che con la medesima delibera di G.C. n. 56/2019 è stato stabilito inoltre:
-	di nominare Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 - la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, quale Responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
-	di prendere atto che la copertura finanziaria dell’intervento è prevista mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti, specificatamente da imputare al Capitolo di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap 18020) del B.P. 2018;
DATO ATTO che l'opera viene finanziata con fondi propri di bilancio;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n. 57 del 20/05/2019 le opere suddette sono state affidate all’impresa BEANI Annibale s.r.l., con sede a Comunanza (AP) 63087 in Via Trieste 122, - P.Iva 01721960449 -, che ha offerto un ribasso sull’importo posto a base d’asta del 18,25%, per l’importo netto contrattuale di € 67.314,36, compresi oo.ss. per € 2.681,80, oltre IVA;
VISTO che, è stato acquisito il CIG (Simog): 78897202E9;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 22/05/2019;
DATO ATTO che, con atto Rep. n. 3172 del 05/09/2019, è stato stipulato con l’impresa BEANI Annibale s.r.l. il contratto d’appalto dei lavori per la realizzazione della Rampa Pedonale per il collegamento P.zza della Libertà con il Parco Urbano e le nuove Scuole Comunali, per l’importo netto di € 67.314,36, compresi per oo.ss., oltre IVA;
ATTESO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è resa necessaria la redazione di apposita perizia di variante agli stessi, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che non altera la natura dell’opera, per le seguenti motivazioni:
•	imprevisti verificatisi durante il corso dei lavori non desumibili in fase di rilievo, sondaggio, o al momento della progettazione (cause impreviste ed imprevedibili) e per opere di miglioramento per cui si è reso necessario mettere in atto/modificare alcune lavorazioni volte a ricreare condizioni strutturalmente più favorevoli per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, in relazione alle esigenze della Stazione Appaltante. In particolare ciò verrà conseguito aumentando lo spessore della soletta della rampa e dei muri di contenimento, e modificando lievemente il tracciato della stessa, anche per seguire in maniera ottimale e vantaggiosa l’acclività del terreno,
•	aggiornamenti, in corso d’opera, delle quantità in aumento o in diminuzione per una più puntuale individuazione dell’intervento ed inserimento di nuove lavorazioni necessarie per il conseguimento di una condizione migliorativa dell’opera, sia dal punto di vista strutturale che della fruibilità;

il tutto come meglio descritto nella relazione tecnico illustrativa allegata alla perizia, conservata in atti dell’Ente;
VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori - Ing. Sabrina Tidei – ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che si compone dei seguenti elaborati:
•	RELAZIONE DI PERIZIA DEL DIRETTORE LAVORI,
•	ELENCO PREZZI,
•	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE,
•	STIMA INCIDENZA SICUREZZA,
•	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO,
•	ELABORATI GRAFICI,
VISTO il quadro tecnico economico di confronto che di seguito si riporta:  
QUADRO ECONOMICO 	
	
A	A. IMPORTO LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	
	A.1	Importo dei lavori 	 	€ 79.061,24	€ 79.061,24	€ 87.688,52	
 	 		 	 	 	 	
B	B. ONERI PER LA SICUREZZA	 	 	 	
	B.1	Incidenza della sicurezza	 	€ 1.436,68	€ 1.436,68	 	
	B.2	Oneri Sicurezza Aggiuntiva	 	€ 1.245,12	€ 1.245,12	 	
 	 	Totale oneri per la sicurezza	 	€ 2.681,80	€ 2.681,80	€ 2.227,35	
	 	 	 	 	 	 	
	 	Sommano A+B	 	81.743,04 €	81.743,04 €	€ 89.915,87	
	 	Ribasso d'asta	18,250%	 	€ 14.428,68	€ 16.003,15	
	 	Importo netto esclusi O.SS	 	 	€ 64.632,56	€ 71.685,37	
	 	Importo netto da contratto	 	 	€ 67.314,36	€ 73.912,72	
 	 	Aumento importo da contratto (9.80%)	 	 	 	 € 6.598,35 	
 				 	 	 	
SOMME A DISPOSIZIONE	
C	D. ONERI PER LA PROGETTAZIONE	
	C.1	Incentivo art.113 del D.lgs 50/2016 pari al 2%	2,000%	€ 1.634,86	€ 1.634,86	€ 1.634,86	
	C.2	Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione	 	€ 3.000,00	€ 3.994,85	€ 3.994,85	
	C.3	Collaudo Statico	 	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	C.4	CNAAP - (Architetti - Ingegneri)	4% di C.2 + C.3	€ 200,00	€ 199,79	€ 199,79	
	 	 	 	€ 6.834,86	€ 6.829,50	€ 6.829,50	
 	 	 	 	 	 	 	
D	 D.  I.V.A.	
	D.1	I.V.A. su Lavori  (A)	10%	€ 8.174,30	€ 6.731,44	€ 7.391,27	
	D.2	I.V.A. Coordinatore sicurezza	22%	€ 660,00	€ 878,87	€ 878,87	
	D.3	I.V.A. Collaudo	22%	€ 440,00	€ 220,00	€ 220,00	
	D.4	I.V.A. CNAAP	22%	€ 44,00	€ 43,95	€ 43,95	
 	 	Somma IVA	€ 9.318,30	€ 7.874,26	€ 8.534,09	
 	 	E. Imprevisti e somme su fattura	
 	E.1	Allacci utenze e Somme su fattura compresa IVA 	 	€ 2.103,62	€ 2.103,62	€ 268,01	
 	E.2	Totale somme su fattura compresa IVA (10%)	 	 	€ 15.878,07	€ 10.455,50	

 	 	Totale Somme a disposizione 	 	€ 18.256,78	€ 32.685,45	€ 26.087,11	
 	 	 	 	 	 	 	
TOTALE COMPLESSIVO 	 	€ 99.999,82	€ 99.999,82	€ 99.999,82	

PRECISATO che, a seguito della suddetta Perizia di variante non sostanziale, l’importo dei lavori principali viene ad aumentare di € 6.598,35 -  inclusi oneri sicurezza, oltre IVA - per una percentuale di 9,80% sull’importo da contratto rep. n. 3172 del 05/09/2019 e che le suddette maggiori somme trovano copertura all’interno del quadro tecnico economico del progetto, pertanto, trattasi di variante n aumento al di sotto della soglia del 15%, ai sensi dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che l’ing. Sabrina Tidei, titolare di P.O. e responsabile dell’Ufficio Tecnico di questo comune è anche Responsabile Unico del Procedimento per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO CHE la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della spesa derivante dall’adozione del presente atto;
ATTESO CHE fa capo a questa Posizione Organizzativa ogni atto gestionale inerente i lavori in argomento, in particolare le procedure riguardanti l’affidamento e lo svolgimento dei lavori;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, il relativo regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. 50/2016 oltre alle successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1)	La premessa narrativa viene qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)	DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni), la Variante non sostanziale n. 1 dei lavori di “Realizzazione Rampa pedonale di collegamento tra P.zza Libertà - Parco Urbano e nuove scuole comunali”, redatta dall’Ufficio tecnico comunale a seguito di necessità sopravvenute non prevedibili in sede di redazione del progetto principale, per le motivazioni già descritte in premessa, che si compone dei seguenti elaborati:
•	RELAZIONE DI PERIZIA DEL DIRETTORE LAVORI,
•	ELENCO PREZZI,
•	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE,
•	STIMA INCIDENZA SICUREZZA,
•	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO,
•	ELABORATI GRAFICI,
il cui quadro economico generale non determina variazione dell’importo complessivo dell’opera, come di seguito individuato:
QUADRO ECONOMICO 	
	
A	A. IMPORTO LAVORI	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE	
	A.1	Importo dei lavori 	 	€ 79.061,24	€ 79.061,24	€ 87.688,52	
 	 		 	 	 	 	
B	B. ONERI PER LA SICUREZZA	 	 	 	
	B.1	Incidenza della sicurezza	 	€ 1.436,68	€ 1.436,68	 	
	B.2	Oneri Sicurezza Aggiuntiva	 	€ 1.245,12	€ 1.245,12	 	
 	 	Totale oneri per la sicurezza	 	€ 2.681,80	€ 2.681,80	€ 2.227,35	
	 	 	 	 	 	 	
	 	Sommano A+B	 	81.743,04 €	81.743,04 €	89.915,87 €	
	 	Ribasso d'asta	18,250%	 	€ 14.428,68	16.003,15 €	
	 	Importo netto esclusi O.SS	 	 	€ 64.632,56	71.685,37 €	
	 	Importo da contratto	 	 	€ 67.314,36	€ 73.912,72	
 	 	Aumento importo da contratto (9.80%)	 	 	 	6.598,35 €	
 				 	 	 	
SOMME A DISPOSIZIONE	
C	D. ONERI PER LA PROGETTAZIONE	
	C.1	Incentivo art.113 del D.lgs 50/2016 pari al 2%	2,000%	€ 1.634,86	€ 1.634,86	€ 1.634,86	
	C.2	Coordiantore in fase di progettazione ed esecuzione	 	€ 3.000,00	€ 3.994,85	€ 3.994,85	
	C.3	Collaudo Statico	 	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	C.4	CNAAP - (Architetti - Ingegneri)	4% di C.2 + C.3	€ 200,00	€ 199,79	€ 199,79	
	 	 	 	€ 6.834,86	€ 6.829,50	€ 6.829,50	
 	 	 	 	 	 	 	
D	 D.  I.V.A.	
	D.1	I.V.A. su Lavori  (A)	10%	€ 8.174,30	€ 6.731,44	€ 7.391,27	
	D.2	I.V.A. Coordinatore sicurezza	22%	€ 660,00	€ 878,87	€ 878,87	
	D.3	I.V.A. Collaudo	22%	€ 440,00	€ 220,00	€ 220,00	
	D.4	I.V.A. CNAAP	22%	€ 44,00	€ 43,95	€ 43,95	
 	 	Somma IVA	€ 9.318,30	€ 7.874,26	€ 8.534,09	
 	 	E. Imprevisti e somme su fattura	
 	E.1	Allacci utenze e Somme su fattura compresa IVA 	 	€ 2.103,62	€ 2.103,62	€ 268,01	
 	E.2	Totale somme su fattura compresa IVA (10%)	 	 	€ 15.878,07	€ 10.455,50	

 	 	Totale Somme a disposizione 	 	€ 18.256,78	€ 32.685,45	€ 26.087,11	
 	 	 	 	 	 	 	
TOTALE COMPLESSIVO 	 	€ 99.999,82	€ 99.999,82	€ 99.999,82	

3)	DI DARE ATTO che la variante comporta un aumento dei lavori principali pari a € 6.598,35 - compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA  -, pari al 9,80% dell’importo contrattuale originario (dunque contenuto entro il 15%) e che l’importo trova copertura finanziaria all’interno del quadro tecnico economico generale;
4)	DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 99.999,82, trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti, specificatamente da imputare al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap 18020) del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 23-10-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 23-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI