COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 99 del 31-07-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVI PREZZI E VARIANTE NON SOSTANZIALE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN C.DA GABELLA NUOVA IDENTIFICATO CATASTALEMENTE AL FG. 9 M. 11 - CIG: ZCA2834CF4	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di luglio nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che:
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTO il D.L n. 189 del 18 ottobre 2016, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
VISTO che i suddetti fenomeni hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private dell'intero territorio comunale, determinando un grave pericolo la pubblica incolumità;
VISTO altresì che al fine di garantire la sicurezza di edifici privati che insistono su pubblica via, che a causa delle gravi condizioni di danneggiamento possono determinare pericolo per la pubblica incolumità nonché potrebbero interdire il transito della Strada Statale 78 e della Strada Comunale per S. Cassiano, occorre provvedere alla loro messa in sicurezza con rimborso delle spese a valere sui fondi assegnati per l’emergenza “Sisma 2016”;
VISTO che con Delibera di Giunta n. 55 del 28/03/2019 è stato approvato il progetto di messa in sicurezza dell’edificio privato sito in C.da Gabella Nuova, riportato al catasto urbano al Foglio 9 Particella 11, di importo pari ad € 32.000,00 avente il seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN C.DA GABELLA NUOVA
FOGLIO N.9 PARTICELLA N.11	
			
LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	18 784,52	
Importo oneri sicurezza	€	7 792,72	
Importo totale lavori	€	26 577,24	
 		 	
SOMME A DISPOSIZIONE		 	
IVA (10%)	€	2 657,72	
Imprevisti e somme su fattura (iva incl.)	€	2 233,49	
Incentivo art 113 dl 50/2016 (2%)	€	531,54	
Totale Somme a Disposizione	€	5 422,76	
 		 	
TOTALE LAVORO	€	32 000,00	

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato sono stati affidati i lavori con Det. n. 46 del 30/04/2019 all’Impresa Marco Imperatori Movimento Terra con sede a Caldarola (MC) in C.da Pittura del Grillo n. 3, P.IVA 01633200439, la quale ha offerto l’1,80 % di ribasso dell’importo dei lavori, quindi per un importo di contratto al netto del ribasso d’asta di € 18.446,40 di cui € 7.792,72 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 26.239,12, oltre IVA al 10%;
RILEVATO che durante i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, si sono verificate condizioni impreviste ed imprevedibili che hanno comportato il venir meno delle condizioni di sicurezza per gli operai nonché la sospensione dei lavori stessi;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’annullamento della rete di servizi gas è stata contattata telefonicamente la ditta ITALGAS RETI S.p.A. la quale ha verbalmente comunicato che l’importo del menzionato lavoro ammonta a circa 500,00 € oltre IVA e che tale cifra trova copertura nel QTE nella voce imprevisti e somme su fattura;
VISTA pertanto la Variante non sostanziale prodotta ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, dall’UT - Ing. Alessandro Cesetti, costituita dai seguenti elaborati: 
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico e Quadro economico di variante;
DATO ATTO del nuovo quadro economico di raffronto così ripartito:

MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN C.DA GABELLA NUOVA
FOGLIO N.9 PARTICELLA N.11	
									
	PROGETTO		CONTRATTO		VARIANTE	
LAVORI									
Importo lavori	€	18 784.52		€	18 446.40		€	20 748.14	
Ribasso		-			1.80 %			1.80 %	
Importo ribassato	€	18 784.52		€	18 114.36		€	20 374.67	
Oneri per la sicurezza	€	7 792.72		€	7 792.72		€	5 829.10	
IMPORTO TOTALE LAVORI RIBASSATO	€	26 577.24		€	26 239.12		€	26 203.77	
									
SOMME A DISPOSIZIONE									
IVA (10%)	€	2 657.72 		€	2 623.91		€	2 620.38	
Imprevisti e somme su fattura	€	2 233.49 		€	2 605.43		€	1 920.85	
Annullamento servizi (IVA incl.)	€	-		€	-		€	723.46	
Incentivo art. 113 DL 50/2016	€	531.54 		€	531.54		€	531.54	
TOTALE SOMME SU FATTURA	€	5 422.76		€	5 760.88		€	5 796.23	
									
IMPORTO TOTALE	€	32 000.00 		€	32 000.00		€	32 000.00	

VISTO l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1, il quale indica che i contratti di appalto possono non essere modificati senza nuova procedura qualora:
-	lett. c), la necessità sia determinata da cause impreviste ed imprevedibili, ove la modifica non alteri la natura generale del contratto;
-	lett. e), le modifiche non sono sostanziali secondo quanto disposto dal comma 4;
inoltre ai sensi del comma 2 lett. b), la modifica dei contratti senza nuova procedura è ammessa anche se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
VISTO che la variante in oggetto comporta una diminuzione dell’importo contrattuale dei lavori pari a 35,35 € compresi oneri per la sicurezza, con una percentuale di diminuzione pari al 0,13%, quindi inferiore al 15% come da D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che ricorrono tutte le situazioni di cui al precedente capoverso e che pertanto la variante è tale da non dover modificare il contratto originario;
DATO ATTO che per tali interventi il Resp. Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. Sabrina Tidei in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Sarnano;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
-	di recepire quale parte integrate e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
-	di approvare il progetto di variante non stanziale dei lavori di messa in sicurezza dell’importo contrattuale di € 26.203,77 costituito dalla documentazione prodotta dal Progettista/Direttore dei lavori incaricato:
•	Elenco Prezzi;
•	Computo metrico e Quadro economico di variante;
•	Relazione di variante;
•	Verbale di concordamento nuovi prezzi;
ed avente il seguente QTE:

MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN C.DA GABELLA NUOVA
FOGLIO N.9 PARTICELLA N.11	
									
	PROGETTO		CONTRATTO		VARIANTE	
LAVORI									
Importo lavori	€	18 784.52 		€	18 446.40 		€	20 748.14 	
Ribasso		-			1.80 %			1.80 %	
Importo ribassato	€	18 784.52		€	18 114.36		€	20 374.67	
Oneri per la sicurezza	€	7 792.72 		€	7 792.72 		€	5 829.10 	
IMPORTO TOTALE LAVORI RIBASSATO	€	26 577.24		€	26 239.12 		€	26 203.77	
									
SOMME A DISPOSIZIONE									
IVA (10%)	€	2 657.72 		€	2 623.91 		€	2 620.38 	
Imprevisti e somme su fattura	€	2 233.49 		€	2 605.43 		€	2 644.31	
Incentivo art. 113 DL 50/2016	€	531.54 		€	531.54 		€	531.54 	
TOTALE SOMME SU FATTURA	€	5 422.76 		€	5 760.88 		€	5 796.23	
									
IMPORTO TOTALE	€	32 000.00 		€	32 000.00 		€	32 000.00 	

-	di impegnare la somma presunta di € 500,00 per la liquidazione delle competenze di Italgas S.p.A. per l’annullamento della fornitura, dando mandato del pagamento al Responsabile del Servizio Finanziario previa approvazione dell’UT per la regolarità tecnica;
-	di dare atto che la somma dovuta alla Variante del lavori, trova copertura all’interno delle somme a disposizione e dunque a valere sul capitolo di Bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021);
-	di trasmettere alla regione Marche, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istituzioni all’uopo impartite, la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 08-10-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 08-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI