COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 49 del 21-03-2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN PRISTINO DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. LOTTO 1 - STRADA DI BISIO E LOTTO 2 - STRADA DI CARDAGNANO, STRADA DI BRILLI, STRADA DI TERRO. APPROVAZIONE VARIANTE N.1.	

L'anno  duemiladiciannove il  ventuno del mese di marzo alle ore 18:00, in Sarnano nella solita 

sala delle adunanze del Comune,  si sono riuniti, a  seguito di regolare invito, i componenti della 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CEREGIOLI FRANCO	SINDACO	P	
CENSORI STEFANO	VICE SINDACO	A	
PIERGENTILI LUCA	ASSESSORE	A	
INNAMORATI STEFANIA	ASSESSORE	P	
PESCI FLORIANA	ASSESS.  ESTERNO	P	

Presenti N.    3								Assenti N.    2

Assiste la  Dr.ssa GIULIANA SERAFINI con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il SINDACO constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

__________________________________________________________________________

ART.49 COMMA 1^ D.LGS   18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarità tecnica

Visto con parere Favorevole

					                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO								            F.to SABRINA TIDEI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 - il responsabile dell’ufficio tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria;

CHE, altresì, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa i suddetti responsabili dei servizi hanno espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 169 del 20-9-2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori  di manutenzione e messa in pristino delle strade comunali esterne al centro abitato  - Lotto 1: Bisio e Lotto 2: Cardagnano, Terro e Brilli nell’importo complessivo di € 182.657,44 così suddiviso:
Lotto 1 (comprendente la strada di Bisio e consistente in interventi di depolverizzazione, previa fresatura, di un tratto della medesima):

LAVORI	
Importo lavori	€  59.176,58	
Di cui per oneri per la sicurezza	€     1.622,54	
		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	(22%)	€   13.018,85	
Spese Tecniche	(compr. C.I. 4% - IVA esente)	€   10.324,00	
Incentivo ex art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2018 (0,3%)	€        177,53	
Contributo ANAC	€          30,00	
Totale somme a disposizione	€  23.550,38	
TOTALE INTERVENTO  LOTTO 1	€  82.726,96	

Lotto 2 (comprendente le strade di Cardagnano e Cardagnano-Pesci, di Terro e di Brilli - strada in direzione Camping - e consistente in interventi di depolverizzazione, previa fresatura, di  tratti delle medesime):

LAVORI	
Importo lavori	€   79.891,65	
Di cui per oneri per la sicurezza	€        494,81	
		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	(22%)	€    17.576,16	
Spese Tecniche	(compr. C.I. 4% - IVA esente)	€      2.193,00	
Incentivo ex art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2018 (0,3%)	€        239,67	
Contributo ANAC	€           30,00	
Totale somme a disposizione	€   20.038,83	
TOTALE INTERVENTO  LOTTO 2	€  99.930,48	

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 191 del 21-11-2018, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, i lavori di cui trattasi sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta CIUCALONI UNIPERSONALE srl di Massa fermana (FM), Partita IVA 01920630047, che in sede indi gara ha offerto il ribasso del 27,010% e, quindi, per l’importo netto contrattuale di € 102.077,80 (compresi € 2.117,35 per oo.ss.);
RAVVISATA la necessità di provvedere all’impiego delle risorse derivanti dal ribasso d’asta al fine di eseguire interventi migliorativi e di potenziamento di alcune lavorazioni stradali sui tratti di strade comunali individuate, che, in quanto fortemente dissestate e quindi particolarmente pericolose per il transito veicolare con conseguenti potenziali gravi responsabilità del Comune, possano fornire maggiori garanzie di sicurezza nella percorribilità e ottimizzare la durabilità nel tempo, quali ad esempio un maggiore spessore della fresatura per un migliore costipamento del fondo sul quale verrà fatta la depolverizzazione, estensione dell’intervento di realizzazione di soletta stradale in cemento armato con rete elettrosaldata per la strada a forte pendenza denominata “Cardagnano-Pesci”, realizzazione di alcuni tratti in asfalto a caldo con posa di tappetino spessore 4 cm intervento questo da impiegare nelle somme a disposizione dell’Amministrazione tra le somme su fattura;
DATO ATTO che, a tal fine, il Direttore dei lavori Geom. Scopetta Roberto ha redatto gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante n. 1 che prevede il seguente nuovo quadro economico:
Lotto 1 – Lavori 				€   66.090,96
Lotto 2 – Lavori 				€   91.833,03
Totale lordo lavori 				€ 157.923,99
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso:
Lotto 1 – oo.ss. 		€ 1.821,22
Lotto 2 – oo.ss. 		€ 2.501,44
Totale oo.ss. 			€ 4.322,66
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta:	€ 153.601,33
Ribasso d’asta (27,010%)			€   41.487,72
Importo netto lavori esclusi oo.ss.		€ 112.113,61
oo.ss.						€     4.322,66
Importo netto lavori compresi oo.ss.	€  116.436,27
Importo netto contrattuale di aggiudicazione €  102.077,80
Importo variante (atto di sottomissione)	€   14.358,47 (pari al 14,07% dell’importo contrattuale)
Altre somme a disposizione della S.A.:
-	Spese tecniche				€  12.517,00
-	Spese per attività di programmazione	€       349,31
-	IVA					€  25.615,98
-	Lavori su fattura (asfalti)		€  27.409,44
-	Altri lavori/forniture su fattura	€       329,44
Totale somme a disposizione della S.A.	€    66.62117
Totale Generale				€ 182.657,44

ATTESO che la spesa complessiva resta quella del progetto approvato con la sopra richiamata delibera di G.C. n. 169/2018 e che, pertanto, la copertura finanziaria dell’intervento è prevista al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap. 18020) del B.P. 2018, utilizzando l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti.

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

-	Di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

-	Di approvare la VARIANTE n° 1 dei lavori di manutenzione e messa in pristino delle strade comunali esterne al centro abitato - Lotto 1: Bisio e Lotto 2: Cardagnano, Terro e Brilli, avente il seguente quadro economico:

Lotto 1 – Lavori 				€   66.090,96
Lotto 2 – Lavori 				€   91.833,03
Totale lordo lavori 				€ 157.923,99
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso:
Lotto 1 – oo.ss. 		€ 1.821,22
Lotto 2 – oo.ss. 		€ 2.501,44
Totale oo.ss. 			€ 4.322,66

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta:	€ 153.601,33
Ribasso d’asta (27,010%)			€   41.487,72
Importo netto lavori esclusi oo.ss.		€ 112.113,61
oo.ss.						€     4.322,66
Importo netto lavori compresi oo.ss.	€  116.436,27
Importo netto contrattuale di aggiudicazione €  102.077,80
Importo variante (atto di sottomissione)	€ 14.358,47 (pari al 14,07% dell’importo contrattuale)

Altre somme a disposizione della S.A.:
-	Spese tecniche				€  12.517,00
-	Spese per attività di programmazione	€       349,31
-	IVA					€  25.615,98
-	Lavori su fattura (asfalti)		€  27.409,44
-	Altri lavori/forniture su fattura	€       329,44
Totale somme a disposizione della S.A.	€   66.62117

Totale generale				€  182.656,65

Totale Generale				€  182.657,44

-	Di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione, da redigere  mediante scrittura privata;

-	Di dare atto che la copertura finanziaria degli interventi è prevista al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap. 18020) del B.P. 2018, utilizzando l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti;

-	Di confermare che Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 – è l’Ing. Sabrina Tidei, quale Responsabile dell’ufficio tecnico comunale;

-Di provvedere alla comunicazione dell’adozione del presente atto, mediante la trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo, secondo quanto stabilito dall’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano
D E L I B E R A
-	Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE
Regione Marche 
Provincia di Macerata
Comune di Sarnano
Stazione appaltante: COMUNE DI SARNANO 
Lavori di: MANUTENZIONI E MESSA IN PRISTINO DI STRADE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO ABITATO Lotto 1: Bisio e Lotto 2: Cardagnano, Terro e Brilli.
Impresa: CIUCALONI SRL UNIPERSONALE – Massa Fermana – P. IVA n. 01920630447
Contratto in data ...............................  n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. .......
Importo contrattuale: € 102.077,80, compresi per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA al 22% esclusa), calcolato al netto del ribasso oltre iva
Codice identificativo gara:  7666825024
ATTO DI SOTTOMISSIONE
art.22 comma 4 D.M. 49/2018
             L’anno duemiladiciannove il giorno ………… del mese di aprile in Sarnano
PREMESSO:
- che con contratto n.………… di rep. del ………… registrato in ………… il …………, al n. …………, Mod.………… Vol.…………, l'impresa ………… ha assunto l'esecuzione dei lavori  di MANUTENZIONI E MESSA IN PRISTINO DI STRADE COMUNALI ESTERNE AL CENTRO ABITATO Lotto 1: Bisio e Lotto 2: Cardagnano, Terro e Brilli per l'importo di € 102.077,80, al netto del ribasso d'asta del 27,010%, di cui € 99.960,45 per lavori e  € 2.117,35  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, data la necessità di provvedere all’impiego delle risorse derivanti dal ribasso d’asta al fine di eseguire interventi migliorativi e di potenziamento di alcune lavorazioni stradali sui tratti di strade comunali individuate, che possano fornire maggiori garanzie di sicurezza nella percorribilità e ottimizzare la durabilità nel tempo, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell’importo complessivo per lavori a corpo e a misura di €  112.113,61 al netto del ribasso d’asta del 27,010 %, di cui Є ………… per lavori a corpo e Є ………… per lavori a misura oltre a € 4.322,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-che tale variante trova copertura finanziaria nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
il sig. ……………, nella qualità di titolare dell’Impresa ………… con sede in ……………, presa visione della predetta perizia di variante,
DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:
Art.  1
l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Sarnano e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante in questione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. … di rep. del …………… e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l’importo complessivo dei lavori a misura di € ………… al netto del ribasso del %…………, di cui € ………… per lavori – comprensivi di € ………… per maggiori lavori – e  € ………… per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € ………… per maggiori oneri di sicurezza – rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.
Art. 2
I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste nel contratto principale.
Art. 3
I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette Є ………… rispetto a quelli contrattuali, di cui Є …………… per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del …% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.
Art. 4
Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di gg. …… … (……). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0,3‰ così come stabilito nel contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori.
Art. 5
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.
Art. 6
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. … del contratto principale, non sono stati introdotti nuovi prezzi.
De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.
Sarnano lì ......
L’Esecutore CIUCALONI SRL UNIPERSONALE …………………………………….

Il Direttore dei Lavori GEOM. ROBERTO SCOPETTA ……………………………….

Il Responsabile del procedimento ING. SABRINA TIDEI ……………………………..

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto: 

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to FRANCO CEREGIOLI	F.to Dr.ssa GIULIANA SERAFINI	

	
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 334

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE	
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI	
Lì, 15-04-2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
    La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 15-04-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE	
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI	

Per copia conforme all’originale.

Lì, 15-04-2019                                          
                
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE	
*F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI	

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.