COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 39 del 09-04-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN C.DA SAN CASSIANO F.7 M.289 COSTITUENTE PERICOLOSO PER LA PUBBLICA SICUREZZA	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di aprile nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che:
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il D.L n. 189 del 18 ottobre 2016, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO che i suddetti fenomeni hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private dell'intero territorio comunale, determinando un grave pericolo la pubblica incolumità;

VISTO altresì che al fine di garantire la sicurezza di edifici privati che insistono su pubblica via, che a causa delle gravi condizioni di danneggiamento possono determinare pericolo per la pubblica incolumità, occorre provvedere alla loro messa in sicurezza con rimborso delle spese a valere sui fondi assegnati per l’emergenza “Sisma 2016”;

VISTO che con Delibera di Giunta n. 41 del 14/03/2019 è stato approvato il progetto di messa in sicurezza dell’edificio privato sito in C.da San Cassiano 291/b, riportato al catasto urbano al Foglio 7 Particella 289, di importo pari ad € 24.913,56 avente il seguente quadro economico:

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato sono stati affidati i lavori con Det. n° 29 del 19/03/2019 all’Impresa edile Ponik Shpresim con sede a Comunanza (AP) in Viale Dante n°44 P.IVA 01874540444, che ha offerto il 14% di ribasso dell’importo dei lavori, quindi per un importo al netto del ribasso d’asta di € 16.317,38 di cui € 1.224,80 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 17.542,18,oltre IVA al 10%;

VISTA la Consegna dei lavori in data 29/03/2019;

RILEVATO che durante i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, sono avvenuti degli importanti crolli interni, tali da indurre la direzione lavori a non proseguire con l’intervento, dato il venir meno delle condizioni di sicurezza per gli operai;

DATO ATTO che a seguito del crollo, le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità sono aumentate e, pertanto, la Direzione Lavori ha ritenuto l’inefficacia dell’intervento con opere provvisionali di messa in sicurezza, nei confronti delle garanzie di sicurezza;

VISTO inoltre il verbale del Direttore dei Lavori incaricato Ing. Magrini Gabriele, con prot. 03/04/2019 con cui chiede la sospensione dei lavori al fine di redigere il progetto di Variante;
VISTA pertanto la Variante non sostanziale prodotta ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, dal professionista incaricato, Ing. Gabriele Magrini nato a Jesi il 12.06.1975, con studio tecnico a Jesi in Via San Giuseppe n°18 e Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona al n° 2187, costituita dai seguenti elaborati: 
- Inquadramento;
- Relazione Tecnica di variante;
- Elaborato Grafico - particolari costruttivi;
- Elenco Prezzi;
- Piano di Sicurezza;
- Computo metrico e Quadro economico di variante;

DATO ATTO dal nuovo quadro economico di raffronto così ripartito:

VISTO l’art. 106 del D.lgs. n°50/2016 comma 1, il quale indica che i contratti di appalto possono non essere modificati senza nuova procedura qualora:
- lett.c), la necessità sia determinata da cause impreviste ed imprevedibili, ove la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- lett e), le modifiche non sono sostanziali secondo quanto disposto dal comma 4;
inoltre ai sensi del comma 2 lett.b), la modifica dei contratti senza nuova procedura è ammessa anche se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

VISTO che la Variante in oggetto comporta un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di               € 1.458,02 compresi oneri per la sicurezza, con una percentuale di incremento pari al 8,323%, quindi inferiore al 15% come da D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i;

DATO ATTO che ricorrono tutte le situazioni di cui al precedente capoverso e che pertanto la variante è tale da non dover modificare il contratto originario;

CONSIDERATO, per quanto sopra descritto, che occorre corrispondere all’Ing. Magrini Gabriele un maggiore compenso per le spese tecniche, quantificate in complessivi € 1.102,63 oltre CNPAIA pari al 4% e IVA 22% per un totale di € 1.399,01;

DATO ATTO che per tali interventi il Resp. Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. Sabrina Tidei in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Sarnano;

Visto il D.lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
-	di recepire quale parte integrate e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
-	di approvare il progetto di Variante non stanziale dei lavori di messa in sicurezza dell’importo contrattuale di € 19.002,20 costituito  dalla documentazione prodotta dal  Progettista / Direttore dei lavori incaricato:
- Inquadramento;
- Relazione Tecnica di variante;
- Elaborato Grafico - particolari costruttivi;
- Elenco Prezzi;
- Piano di Sicurezza;
- Computo metrico e Quadro economico di variante;

- di riconoscere all’Ing. Magrini Gabriele il maggiore importo per le spese tecniche, autorizzate precedentemente con Det. n°14 del 05/02/2019, per la somma complessiva di € 1.102,63 oltre CNPAIA 4% di € 44,11 ed IVA 22% di € 252,28 per un totale di € 1.399,01

- di dare atto che la maggior somma dovuta alla Variante del lavori ed al compenso per le spese tecniche, trova copertura all’interno delle somme a disposizione, mediante il reimpiego del ribasso d’asta e dunque a valere sul capitolo di Bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021);

- di trasmettere alla regione Marche, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istituzioni all’uopo impartite, la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 06-05-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 06-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI