COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 35 del 26-03-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN PRISTINO DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. LOTTO 1 - STRADA DI BISIO E LOTTO 2 - STRADA DI CARDAGNANO, STRADA DI BRILLI, STRADA DI TERRO. AFFIDAMENTO LAVORI RICOMPRESI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE - CIG: Z0128EB09E.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di marzo nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 169 del 20-9-2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori  di manutenzione e messa in pristino delle strade comunali esterne al centro abitato  - Lotto 1: Bisio e Lotto 2: Cardagnano, Terro e Brilli nell’importo complessivo di € 182.657,44 così suddiviso:
Lotto 1 (comprendente la strada di Bisio e consistente in interventi di depolverizzazione, previa fresatura, di un tratto della medesima):

LAVORI	
Importo lavori	€  59.176,58	
Di cui per oneri per la sicurezza	€     1.622,54	
		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	(22%)	€   13.018,85	
Spese Tecniche	(compr. C.I. 4% - IVA esente)	€   10.324,00	
Incentivo ex art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2018 (0,3%)	€        177,53	
Contributo ANAC	€          30,00	
Totale somme a disposizione	€  23.550,38	
TOTALE INTERVENTO  LOTTO 1	€  82.726,96	

Lotto 2 (comprendente le strade di Cardagnano e Cardagnano-Pesci, di Terro e di Brilli - strada in direzione Camping - e consistente in interventi di depolverizzazione, previa fresatura, di  tratti delle medesime):

LAVORI	
Importo lavori	€   79.891,65	
Di cui per oneri per la sicurezza	€        494,81	
		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori	(22%)	€    17.576,16	
Spese Tecniche	(compr. C.I. 4% - IVA esente)	€      2.193,00	
Incentivo ex art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2018 (0,3%)	€        239,67	
Contributo ANAC	€           30,00	
Totale somme a disposizione	€   20.038,83	
TOTALE INTERVENTO  LOTTO 2	€  99.930,48	

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 191 del 21-11-2018, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, i lavori di cui trattasi sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta CIUCALONI UNIPERSONALE srl di Massa fermana (FM), Partita IVA 01920630047, che in sede indi gara ha offerto il ribasso del 27,010% e, quindi, per l’importo netto contrattuale di € 102.077,80 (compresi € 2.117,35 per oo.ss.);
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 49 del 21/03/2019 di approvazione della variante n. 1 al progetto di che trattasi, resasi necessaria al fine di eseguire interventi migliorativi e di potenziamento di alcune lavorazioni stradali sui tratti di strade comunali individuate, che, in quanto fortemente dissestate, quali maggiore spessore della fresatura per un migliore costipamento del fondo sul quale verrà fatta la depolverizzazione, estensione dell’intervento di realizzazione di soletta stradale in cemento armato con rete elettrosaldata per la strada a forte pendenza denominata “Cardagnano-Pesci”, realizzazione di alcuni tratti in asfalto a caldo con posa di tappetino spessore 4 cm intervento sia impiegando le risorse derivanti dal ribasso d’asta, sia quelle previste nelle somme a disposizione dell’Amministrazione tra le somme su fattura;
DATO ATTO che, a tal fine, il Direttore dei lavori Geom. Scopetta Roberto ha redatto gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante n. 1 che prevede il seguente nuovo quadro economico:
Lotto 1 – Lavori 				€   66.090,96
Lotto 2 – Lavori 				€   91.833,03
Totale lordo lavori 				€ 157.923,99
di cui per oo.ss. non soggetti a ribasso:
Lotto 1 – oo.ss. 		€ 1.821,22
Lotto 2 – oo.ss. 		€ 2.501,44
Totale oo.ss. 			€ 4.322,66
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta:		€ 153.601,33
Ribasso d’asta (27,010%)			€   41.487,72
Importo netto lavori esclusi oo.ss.		€ 112.113,61
oo.ss.						€     4.322,66
Importo netto lavori compresi oo.ss.		€  116.436,27
Importo netto contrattuale di aggiudicazione 	€  102.077,80
Importo variante (atto di sottomissione)	€    14.358,47 (pari al 14,07% dell’importo contrattuale)
Altre somme a disposizione della S.A.:
-	Spese tecniche				€    12.517,00
-	Spese per attività di programmazione	€         349,31
-	IVA					€    25.615,98
-	Lavori su fattura (asfalti)		€    27.409,44
-	Altri lavori/forniture su fattura		€         329,44
Totale somme a disposizione della S.A.	€    66.621,17
Totale Generale				€  182.657,44

DATO ATTO che si ritiene indispensabile ed urgente affidare i lavori ricompresi tra le somme su fattura, per l’esecuzione a stretto giro e compatibilmente con le condizioni meteo del periodo, dell’asfaltatura a caldo della strada di Brilli che conduce al Camping e di porzione della strada di Bisio nel tratto ricompreso tra l’innesto con via Romani ed il ponte sul torrente Tennacola, comprendendo nell’incarico anche la modesta somma di cui alla voce “Altri lavori/forniture su fattura;

RITENUTO per ragioni di economicità, efficacia e di urgenza di affidare le suddette lavorazioni alla ditta CIUCALONI SRL UNIPERSONALE – Massa Fermana (FM) – P. IVA 01920630447, già affidataria  dell’intervento principale e presente sul posto con macchinari e mezzi pronti per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, per una somma complessiva di € 22.736,79, oltre IVA al 22% per € 6.102,55 e dunque per un totale di € 27.738,88;

VISTO l’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n.50, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO inoltre l’art. 37 comma 1, del succitato D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.i che dà la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, senza l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenza;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2013 di approvazione del regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, nel quale all’Art. 15 - Adeguamenti normativi, si prevede che qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel suddetto regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara n.  Z0128EB09E;
ATTESO che la spesa complessiva resta quella del progetto approvato con la sopra richiamata delibera di G.C. n. 169/2018 e che, pertanto, la copertura finanziaria dell’intervento è prevista al Codice di Bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap. 18020) del B.P. 2019, utilizzando l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti;

VISTI il D.Lgs.50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
•	le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta CIUCALONI SRL UNIPERSONALE – Massa Fermana (FM) – P. IVA 01920630447 gli interventi di lavori ricompresi tra le somme su fattura, per l’esecuzione a stretto giro e compatibilmente con le condizioni meteo del periodo, dell’asfaltatura a caldo della strada di Brilli che conduce al Camping e di porzione della strada di Bisio nel tratto ricompreso tra l’innesto con via Romani ed il ponte sul torrente Tennacola, comprendendo nell’incarico anche la modesta somma di cui alla voce “Altri lavori/forniture su fattura, per l’importo di € 22.736,79, oltre IVA al 22% per € 6.102,55 e dunque per un totale di € 27.738,88 (Z0128EB09E);

•	di imputare la spesa di € 27.738,88 al codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap. 18020) del B.P. 2019, utilizzando l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2017 – parte destinata per investimenti e dando mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere al pagamento dei lavori sulla base della documentazione fiscale vistata per regolarità da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 21-06-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 21-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI