COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 63 del 23-04-2018

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CORRIDONI N°94/F, FOGLIO 21 PARTICELLA 246.  AFFIDAMENTO INTERVENTI RICOMPRESI TRA LE SOMME PER IMPREVISTI (CIG : Z6321DB0CF).	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di aprile nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il D.L n. 189 del 18 ottobre 2016, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO che i suddetti fenomeni hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private dell'intero territorio comunale, mettendo in grave pericolo la pubblica incolumità;

VISTO altresì che, al fine di garantire la sicurezza di edifici privati che insistono sulla pubblica via, che a causa delle gravi condizioni di danneggiamento possono determinare pericolo per la pubblica incolumità, occorre provvedere alla loro messa in sicurezza con rimborso delle spese a valere sui fondi assegnati per l’emergenza “Sisma 2016”;

DATO ATTO che l’edificio privato sito in Via Corridoni 94/F, riportato al catasto urbano al Foglio 21 Particella 24, è risultato costituire un potenziale pericolo sulla pubblica via, nonché nei confronti di un’abitazione adiacente, altrimenti agibile, e pertanto, necessita di interventi provvisionali al fine di sanare tale situazione;

VISTA la propria determinazione n. 4 del 16/01/2018 con cui è stato affidato l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento di messa in sicurezza dell’edificio suddetto all’Ing. Emanuele Polucci, con studio tecnico a Sarnano in  Via Fontemarta n. 406 e Iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Macerata N° B39 - Sez. B Settore: Civile Ambientale, per un importo presunto pari ad € 1.500,00, oltre oneri contributivi e previdenziali al 4% per € 60,00 e IVA al 22% per € 330,0 e quindi per un totale di € 1.890,00, ma comunque per un importo non superiore al 5% dell’importo dei lavori desunto a seguito di redazione del progetto;

VISTO che con protocollo n. 827 del 18/01/2018 è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza dell’edificio privato di Via Corridoni n. 94/F, redatto dall’ing. Emanuele Polucci, di importo complessivo pari ad € 19.676,09, come da seguente quadro economico:
LAVORI		
IMPORTO LAVORI DEMOLIZIONE SOGGETTO A RIBASSO	 €                    13.798,16 	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	 €                      1.652,97	
TOTALE LAVORI	 €                  15.451,13 	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI (10%)	 €                      1.545,11 	
IMPREVISTI (10%)	 €                      1.545,11 	
IVA IMPREVISTI (10%)	 €                         154,51	
SPESE TECNICHE (pari al 5%)	 €                         772,56	
IVA SPESE TECNICHE (pari al 22%)	 €                         176,76	
CASSA PREVIDENZIALE SPESE TECNICHE (pari al 4%)	 €                           30,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 €                   4.224,96	
COSTO TOTALE DELL'OPERA	 €                   19.676,09 	

VISTA la Delibera di giunta Comunale n. 9 del 18/01/2018 con cui è stato approvato il progetto degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio in questione;

VISTA la propria determina di affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio in esame n° 15 .del 05/02/2018, ai sensi del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” e degli artt. n. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Edilizia Azzacconi srl con sede a  San Ginesio (MC) in Via Alvaneto n. 35 e C.F. 00379100431, per un importo offerto pari ad € 11.947,00 di cui € 1.652,97 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% e quindi per un totale di € 13.141,70;

DATO ATTO che in corso d’opera, grazie ad una più puntuale valutazione resa possibile disponendo di cestello elevatore, è emersa la necessità di effettuare delle modeste lavorazioni impreviste ed imprevedibili la cui realizzazione può essere ricompresa tra le somme su fattura, consistenti nella ripassatura di una porzione del manto di copertura al fine di evitare cadute di materiale sulla via sottostante ed infiltrazioni meteoriche, nonché la sostituzione di un discendente ammalorato per evitare nel tempo la fuoriuscita delle acque piovane sulla parete muraria e il suo conseguente ulteriore deterioramento, tali interventi sono stati computati dal D.L. per un importo di € 1.491,41 oltre IVA al 10%;

VISTI 
-	l’articolo 5 del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013, per gli affidamenti diretti dei lavori di importo inferiore a 40.000,00 
-	l’articolo 37 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 senza ricorrere a una centrale di committenza ovvero all’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la qualifica di cui all’articolo 38 del suddetto Decreto Legislativo;
-	l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per cui è possibile procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

RITENUTO per motivi di economicità e rapidità di esecuzione dell’intervento di affidare alla ditta Edilizia Azzacconi srl, C.F. e P.IVA 00379100431, già presente sul cantiere seppure in fase di smobilizzo dello stesso, tali ulteriori lavorazioni impreviste e ricomprese tra le somme su fattura per l’importo di € 1.491,41, oltre IVA al 10% per € 149,14 e dunque per un complessivo di € 1.640,55;

DATO ATTO che è stato assunto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara Z6321DB0CF;

VISTI:
-	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-	l’Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;
-	il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

-	di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo presente atto;

-	di affidare, ai sensi del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” e degli artt. n. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016 i lavori di messa in sicurezza dell’edificio sito in Via Corridoni n°94/F, alla ditta Edilizia Azzacconi srl con sede a  San Ginesio (MC) in Via Alvaneto n. 35 e C.F. 00379100431, per un importo pari ad € 1.491,41, oltre IVA al 10% per € 149,14 e dunque per un complessivo di € 1.640,55;

-	di impegnare l’importo totale di progetto di € 1.640,55, al codice di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021) del bilancio di previsione 2018;

-	di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

-	di trasmettere la presente determinazione al Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma 2016 e alla Regione Marche Ufficio speciale per la ricostruzione corredata dalla documentazione prevista al fine della rendicontazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17-10-2018                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 17-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI