COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 165 del 10-10-2018

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN C.DA COLLECICCANGELO (F.30 - M.262-269-270) - APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO  E AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di ottobre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il D.L n. 189 del 18 ottobre 2016, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO che i suddetti fenomeni hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private dell'intero territorio comunale, mettendo in grave pericolo la pubblica incolumità;

VISTO altresì che al fine di garantire la sicurezza di edifici privati che insistono su pubblica via, che a causa delle gravi condizioni di danneggiamento possono determinare pericolo per la pubblica incolumità, occorre provvedere alla loro messa in sicurezza con rimborso delle spese a valere sui fondi assegnati per l’emergenza “Sisma 2016”;

VISTO che con Delibera di Giunta n. 123 del 21/06/2018 è stato approvato il progetto di messa in sicurezza redatto dall’Arch. Peluso Rocco nato a Sesto Campano 18//12/1960, con studio tecnico a Isernia in Corso Garibaldi n. 133 e Iscritto all’Ordine degli Architetti di Isernia al n° 55 - P.IVA 00312640949, dell’edificio sito nel Comune di Sarnano in Contrada Colleciccangelo (MC), identificato catastalmente al Foglio 30 Particelle 262-269-270, di importo complessivo pari ad                          € 42.316,81 avente il seguente quadro economico:

LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€ 32.753,33	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.618,82	
TOTALE LAVORI	€ 36.372,15	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI (10%)	€ 3.275,33	
IVA ONERI PER LA SICUREZZA (10%)	€ 361,88	
SPESE TECNICHE (pari al 5%)	€ 1.818,61	
IVA SPESE TECNICHE (pari al 22%)	€ 416,10	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (pari al 4%)	€ 72,74	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.944,66	
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 42.316,81	

DATO ATTO che sono stati affidati i lavori all’impresa GRIMALDI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in P.zza E. Mattei n°7 Partita IVA: 00684020431, che ha offerto l’importo pari ad € 32.262,03 oltre oneri per la sicurezza per € 3.618,82, oltre IVA al 10% pari a € 3.588,08 quindi per un totale di € 39.468,93;

VISTA la Consegna dei lavori in data 06/08/2018;

RILEVATO che durante i lavori di demolizione parziale dell’edificio in oggetto, si sono verificati ulteriori crolli della porzione oggetto di opere provvisionali, vista la carenza statica della porzione l’ufficio tecnico del Comune di Sarnano è intervenuto inoltrando un Verbale di sospensione dei lavori prot. n° 9881 del 08/08/2018 - per dare la possibilità di impostare un progetto di Variante non sostanziale;

VISTA pertanto la Variante non sostanziale prodotta dal Professionista incaricato dall’Arch. Peluso Rocco e presentata presso gli Uffici comunali la Variante progettuale non sostanziale con i seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnica di variante non sostanziale;
- Elaborato Grafico - particolari costruttivi,
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico e Quadro economico;

DATO ATTO dal nuovo quadro economico così ripartito:

LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€ 34.922,44	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.071,21	
TOTALE LAVORI	€ 39.993,65	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI (10%)	€ 3.999,37	
SPESE TECNICHE (pari al 5%)	€ 1.999,68	
IVA SPESE TECNICHE (pari al 22%)	€ 457,53	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (pari al 4%)	€ 79,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.536,56	
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 46.530,21	

da cui si deduce il seguente Quadro di raffronto:

 	IMPORTO 
LAVORI	ONERI 
PER LA SICUREZZA	Ribasso %	TOTALE	
Progetto Approvato	               32.753,33 € 	                             3.618,82 € 	 	                 36.372,15 € 	
 	
Progetto Aggiudicato (con ribasso)	                 32.262,03 € 	                             3.618,82 € 	1,50%	                 35.880,85 € 	
 	
Progetto Variante	                 34.922,44 € 	                             5.071,21 € 	 	                 39.993,65 € 	
 	
Progetto Variante (con ribasso)	                 34.398,60 € 	                             5.071,21 € 	1,50%	                 39.469,81 € 	

VISTO l’art. 106 del D.lgs. n°50/2016 comma 1, il quale indica che i contratti di appalto possono non essere modificati senza nuova procedura qualora;
- lett.c), la necessità sia determinata da cause impreviste ed imprevedibili ove la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- lett e), le modifiche non sono sostanziali secondo quanto disposto dal comma 4;
comma 2 lett.b), definisce la modifica dei contratti senza nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

DATO ATTO che la variante si è resa necessaria per cause impreviste e imprevedibili dovute al crollo di parti degli edifici oggetto di messa in sicurezza;

VISTO che la Variante in oggetto comporta un aumento dell’importo contrattuale dei lavori di               € 3.588,96 compresi oneri per la sicurezza, con una percentuale di incremento dei lavori pari al 9,09%, quindi inferiore al 15% come da D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i;

RITENUTO tutto ciò applicabile per tale variante;

CONSIDERATO per quanto sopra descritto è necessario affidre all’Arch. Peluso Rocco un maggiore compenso per le spese tecniche;

Visto il D.lgs. n° 267/2000;

DETERMINA
-	di recepire quale parte integrate e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

-	di approvare il progetto di Variante non stanziale dei lavori di messa in sicurezza dell’importo totale di € 46.530,21 costituito  dalla documentazione prodotta dal  Progettista / Direttore dei lavori incaricato:
- Relazione Tecnica di variante non sostanziale;
- Elaborato Grafico - particolari costruttivi,
- Elenco Prezzi;
- Computo metrico e Quadro economico seguente:

LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€ 34.922,44	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 5.071,21	
TOTALE LAVORI	€ 39.993,65	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI (10%)	€ 3.999,37	
SPESE TECNICHE (pari al 5%)	€ 1.999,68	
IVA SPESE TECNICHE (pari al 22%)	€ 457,53	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (pari al 4%)	€ 79,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.536,56	
COSTO TOTALE DELL'OPERA	€ 46.530,21	

- di dare atto che tale variante comporta un aumento dell’importo dei lavori pari al 9,09% ma non altera la natura del contratto, per cui ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i non vi è necessità di una nuova procedura, e pertanto l’importo da corrispondere alla ditta con il ribasso è di € 39.469,81 di cui € 5.071,21 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

- di riconoscere all’Arch. Peluso Rocco il maggiore importo per le spese tecniche, autorizzate precedentemente con Det. n°70 del 15.05.2018, per la somma complessiva di € 1.999,68 oltre CAP 4% ed IVA 22% per un totale di € 2.537,20;

- di dare atto che la somma della variante pari ad € 4.213,40 trova copertura al capitolo di Bilancio                n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021);

- di trasmettere alla regione Marche, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istituzioni all’uopo impartite, la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14-02-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 14-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI