COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 122 del 06-12-2017

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ULTERIORI OPERE MIGLIORATIVE DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BAMBINOPOLI E RELATIVA PRESA D'ATTO DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO.	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di dicembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n. 115 del 12/10/2017 con cui è stato approvato il progetto di riqualificazione dell’area verde adibita a bambinopoli di via B. Costa e adiacente alla nuova scuola per l’infanzia in l.go Crivelli, redatto dall’ufficio tecnico e di importo complessivo pari ad € 35.000,00, avente il seguente quadro economico:
LAVORI		
IMPORTO LAVORI DEMOLIZIONE SOGGETTO A RIBASSO	 €          24.483,01 	
 DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA   	 €               538,25 	
	 €          25.021,26 	
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA LAVORI (22%)	 €            5.504,68 	
INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016	 €               500,43 	
IMPIANTO ILLUMINAZIONE, IMPREVISTI, SOMME SU FATTURA	 €            3.973,64 	
	 €            9.978,74 	
COSTO TOTALE DELL'OPERA	 €          35.000,00 	

VISTA la propria determina n. 99 del 25/10/2017 con cui, in relazione all’intervento in premessa, sono state affidate seguenti lavorazioni:
1)	alla ditta Calvani Luciano, con sede in c.da Callarella n. 361, C.F. CLVLCN51A09I436W, P. IVA n. 01443580434, per un importo pari ad € 11.500,00, oltre IVA al 22%, i lavori di rimozione delle piazzole dell’ex minigolf e sistemazione dell’area con terreno vegetale, rimozione della gancia delle bocce con successivo scotico del terreno superficiale, riporto in quota della superficie mediante realizzazione di un fondo con riciclato di cantiere e soprastante strato di breccione lavato per una spessore di circa 5 cm, livellamento dei piani dell’area interessata dalla pista, contenimento laterale del piano tramite posa in opera di blocchi di cemento a bicchiere del tipo per il contenimento delle scarpate verdi, posa di rete elettrosaldata sull’area delimitata della piattaforma e predisposizione per la realizzazione dell’impianto di illuminazione tramite posa di corrugati e pozzetti;
2)	alla ditta LIM di Fortuni e Trovellini snc, con sede a Montefortino (FM) in loc. Ponti e P. IVA 00134870443, per la fornitura di calcestruzzo per un importo pari € 9.100,00, oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che in corso d’opera è stato reputato necessario sistemare anche gli spazi circostanti la pista polivalente mediante livellamento e posa di ghiaia lavata con finitura in pietrischetto per le zone di passaggio per il pubblico, nonché per la zona retrostante la pista ove poter collocare eventuali palchi per spettacoli vari o altra strumentazione, nonché incrementare e migliorare le linee dell’impianto elettriche prevedendo ulteriori corrugati da mettere in opera in caso di necessità future di potenziamento impianto illuminazione zona ex minigolf e bambinopoli;

VISTO che per la realizzazione delle opere come sopra indicate la stima dell’intervento complessivo di cui al punto 1) è pari ad € 17.028,77 e che, pertanto il nuovo quadro economico è il seguente:

VISTO che per ragioni di economicità e speditezza, onde procedere immediatamente con i lavori e dare una ottimale fruibilità dell’area, sentita la ditta Calvani, già operante sul cantiere, la medesima ha dato la propria disponibilità ad effettuare le ulteriori opere per un costo totale complessivo scontato di € 15.440,00;

VALUTATO che contabilmente tali opere rientrano all’interno del quadro economico ed in particolare all’interno dell’importo lavori relativi alla tipologia 1) opere edili di demolizione e sistemazione delle aree, e che dunque non vi è variazione dell’importo dell’opera;

VISTO che si deve procedere all’ulteriore affidamento alla ditta Calvani Luciano di Sarnano, dei lavori di cui al punto 1) per un importo aggiuntivo di € 3.940,00, oltre IVA al 22% per € 866,80 e quindi per € 4.806,80;

RICHIAMATO il CIG ZB8207467C in riferimento ai lavori di cui al punto 1);

RITENUTO pertanto di poter affidare gli ulteriori lavori come sopra indicati alla summenzionata ditta per la quale è stata verificata la regolarità del DURC on line;

DATO ATTO che la spesa ulteriore di € 4.806,80 trova copertura a valere sui fondi ricavati dalle donazioni solidali effettuate da cittadini a favore del Comune di Sarnano a seguito degli eventi sismici del 2016 e disponibili al codice di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex cap. 2021) del bilancio di previsione 2017;

VISTI il D.Lgs 267/2000, la Legge 241/90, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

SALVO acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura da parte del responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

-	di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo presente atto;

-	di prendere atto ed approvare il quadro tecnico economico derivante dell’esigenza di apportare opere migliorative all’intervento originario mediante sistemazione delle aree antistanti la pista polifunzionale, come di seguito indicato:

-	di affidare, ai sensi del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” e degli artt. n. 36-37 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione delle ulteriori opere di sistemazione dell’area bambinopoli di via B. Costa, adiacente alla nuova scuola per l’infanzia in L.go Crivelli, come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 12/10/2017 alla ditta Calvani Luciano, con sede in c.da Callarella n. 361, C.F. CLVLCN51A09I436W, P. IVA n. 01443580434, per un importo pari ad € 3.940,00, oltre IVA al 22% per € 866,80 e quindi per € 4.806,80 (CIG: ZB8207467C);

-	di impegnare l’importo complessivo di € 4.806,80 a valere sui fondi ricavati dalle donazioni solidali effettuate da cittadini a favore del Comune di Sarnano a seguito degli eventi sismici del 2016 e disponibili al codice di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex cap. 2021) del bilancio di previsione 2017;

-	di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere al pagamento delle suddette prestazioni, sulla base della documentazione fiscale, vistata per regolarità da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 29-09-2018                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 29-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI