COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 55 del 08-03-2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA PALESTRA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI PER CONTO DELLA  "ANDREA BOCELLI FOUNDATION" E DELLA "ONLY THE BRAVE FOUNDATION". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA	

L'anno  duemiladiciotto il  otto del mese di marzo alle ore 19:00, in Sarnano nella solita 

sala delle adunanze del Comune,  si sono riuniti, a  seguito di regolare invito, i componenti della 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CEREGIOLI FRANCO	SINDACO	P	
CENSORI STEFANO	VICE SINDACO	A	
PIERGENTILI LUCA	ASSESSORE	P	
INNAMORATI STEFANIA	ASSESSORE	P	
PESCI FLORIANA	ASSESS.  ESTERNO	P	

Presenti N.    4								Assenti N.    1

Assiste  Dr. GIULIANA SERAFINI con funzioni di Segretario verbalizzante. 

Il Sindaco constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

________________________________________________________________________________

ART.49 COMMA 1^ D.LGS   18.08.2000 N.267
_______________________________________________________________________________
PARERE DI Regolarità tecnica

Visto con parere Favorevole
							IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
								F.to SABRINA TIDEI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-	a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale a partire dal 24 agosto 2016 la scuola secondaria di primo grado G. Leopardi sita in largo Crivelli e la relativa palestra sono risultate inagibili come da scheda Aedes n. 001 del 05/11/2016 id 29800 e n. 002 del 05/11/2016 id 29857;
-	con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/06/2017 è stato approvato lo schema di convenzione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con cui i soggetti privati individuati nelle fondazioni donanti, “Andrea Bocelli Foundation” e “Only The Brave Foundation”, si impegnano alla realizzazione, a loro totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, della nuova scuola e della palestra da realizzarsi sull’area di sedime degli edifici scolastici da demolire;
-	tra le suddette fondazioni e il Comune di Sarnano è stata stipulata la convenzione prot. n. 7464 del 23/06/2017 per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado in largo Crivelli e relativa palestra, a cura e spese del soggetto privato (Fondazione) ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 02/11/2017 è stato approvato il progetto di “Ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado e palestra previa demolizione degli edifici esistenti - Largo Crivelli” redatto dall’arch. Massimo Pegoraro, iscritto all’albo degli Architetti di Roma con n. 23943, in qualità di tecnico progettista incaricato dalla fondazione;

VISTO che con prot. n. 2130 del 18/02/2018, il direttore dei lavori dell’opera, arch. Massimo Pegoraro, ha trasmesso la variante in corso d’opera dei lavori in oggetto consistente in alcune modifiche riguardanti la palestra e i suoi accessi, tra cui la variazione nell’altezza interna, l’apertura di una nuova finestra a nastro, l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto, l’installazione di una linea vita sul colmo alto, la modifica della scala esterna, la realizzazione di una piazzola per installazione della pompa di calore e macchine del condizionamento e la realizzazione di un ulteriore scala esterna;

VISTO che con prot. n. 2797 del 06/03/2018 è stato acquisito agli atti il parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, inerente la variante al progetto;

VISTO che con prot. n. 2870 del 07/03/2018 è stato acquisito agli atti, in merito alla variante al progetto, il parere igienico sanitario favorevole dell’A.S.U.R. – Area Vasta 3;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla presa d’atto della variante in corso d’opera acquisita con prot. n. 2130 del 19/12/2018 per la costruzione della scuola secondaria di primo grado G. Leopardi e della relativa palestra, autorizzandone l’esecuzione;

VISTE le Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto  2016 n. 14 del 16 gennaio 2017, la successiva che integra la medesima, n. 18 del 3 aprile 2017 e da ultimo la n. 33 del 11 luglio 2017 con la quale sono state apportate modifiche alle ordinanze precedenti;

VISTO il D.L n. 189 del 18 ottobre 2016, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, reso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

-	di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

-	di prendere atto ed approvare la variante in corso d’opera dei lavori di “Ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado e palestra previa demolizione degli edifici esistenti - Largo Crivelli”, acquisita con protocollo n. 2130 del 18/02/2018 e consistente in alcune modifiche riguardanti la palestra e i suoi accessi, tra cui la variazione nell’altezza interna, l’apertura di una nuova finestra a nastro, l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto, l’installazione di una linea vita sul colmo alto, la modifica della scala esterna, la realizzazione di una piazzola per installazione della pompa di calore e macchine del condizionamento e la realizzazione di un ulteriore scala esterna;

-	di dare atto che l’intervento verrà realizzato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a totale cura e spese delle fondazioni donatrici dell’opera, “Andrea Bocelli Foundation” e “Only The Brave Foundation” e che, pertanto, l’approvazione del presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente;

-	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

-	di provvedere alla comunicazione dell’adozione del presente atto, mediante la trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo, secondo  quanto stabilito dall’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto: 

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to Avv. FRANCO CEREGIOLI	F.to Dr. GIULIANA SERAFINI	

	
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 231

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE	
F.to Dr. ANNA MARINOZZI	
Lì, 20-03-2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 20-03-2018

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE	
F.to Dr. ANNA MARINOZZI	

Per copia conforme all’originale.

Lì, 20-03-2018                                          
                
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE	
*F.to Dr. ANNA MARINOZZI	

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.