COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 143   DEL  18-09-2018

Oggetto:	LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIEN=
		TAMENTO  ENERGETICO  PALESTRA SCOLASTICA. PROGETTO
		DEFINITIVO-ESECUTIVO DI VARIANTE N. 2.

L'anno  duemiladiciotto addì  diciotto del mese di settembre alle ore 15:30, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori: 

   Catalini Ilenia	Sindaco	P	
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P	
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P	

ne risultano presenti n.   3 e assenti    0

Partecipa il  Segretario comunale Sig. Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Catalini Ilenia in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

 

DOCUMENTI ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE

PREMESSO che il comune di Loro Piceno sta realizzando lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della palestra scolastica situata in Via Papa Giovanni XXIII n. 18 (foglio n. 23 particella n. 157), intervento inserito nella programmazione politico amministrativa che si sta predisponendo per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme edilizie vigenti e soprattutto alla maggiore richiesta dell’utenza in termini di confort, spazio e servizio, oltre al contenimento dei costi di gestione;	

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 98 del 23.06.2017 di approvazione del progetto definitivo esecutivo per la “lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palestra scolastica”, redatto dal Geom. Rossano Paoloni con studio in Loro Piceno(MC) in Via Santi Pietro e Paolo n. 25 (P.iva n. 01274970431) inscritto all’Albo dei Geometri di Macerata al n. 904, incaricato allo scopo con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 34 del 11.04.2017;

CONSTATATO che il costo delle opere come da preventivo di spesa approvato con Deliberazione di cui sopra ammontava ad € 88.824,19, così distinto:
A	Importo lavori	 €           71.278,17 	
	A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi	 €             1.425,56  	
	Importo soggetto a ribasso	 €           69.852,61 	
	Totale importo	 €           71.278,17  	
B	Somme a disposizione:		
	-i.v.a. sui lavori al 10%	 €             7.127,82 	
	-imprevisti e lavori in economia (5%)	 €             3.500,00 	
	-spese tecniche compresi oneri previdenziali (5%) e IVA (22%) 	 €             6.405,00	
	-oneri art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (1,8%)	 €                513,20	
	Totale somme a disposizione	 €            17.546,02 	
	TOTALE DI PROGETTO	 €            88.824,19	

DATO ATTO che:
-	i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 234 del 18/12/2017, alla ditta LORIS COSTRUZIONI di Florio Loris con sede legale a Basciano (TE), Via Salaria n. 40/B, –  P.I. 01574840672, che ha offerto un ribasso del 25,441%, determinando l’importo netto dei lavori in € 53.506,97 oltre iva;
-	i lavori sono stati consegnati il giorno 12/03/2018 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;
-	In fase di esecuzione si è reso necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere;

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 98 del 23.06.2017 di approvazione del progetto in variante relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palestra scolastica”, redatto in data 26.04.2018 dal Geom. Rossano Paoloni per un importo complessivo invariato di € 88.824,19 così ripartita:
A	Importo lavori	 €           80.110,17 	
	A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi	 €             1.602,20  	
	Importo soggetto a ribasso	 €           78.507,97 	
	Ribasso d’asta (25,441%)	 €           19.973,21	
	Importo lavori ribassato	 €           58.534,76	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	 €             1.602,20  	
	Totale importo	 €           60.136,96  	
B	Somme a disposizione:		
	-i.v.a. sui lavori al 10%	 €             6.013,70 	
	-lavori in economia 	 €            15.114,83 	
	-spese tecniche compresi oneri previdenziali (5%) e IVA (22%) 	 €             7.045,50	
	-oneri art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016(1,8%)	 €                513,20	
	Totale somme a disposizione	 €            28.687,23 	
	TOTALE DI PROGETTO	 €            88.824,19	

RAVVISATA la necessità di redigere un ulteriore progetto di variante al fine di rimodulare il quadro economico e adeguare i costi alle effettive necessità ed evenienze riscontrate;

VISTO il progetto in variante n. 2 relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palestra scolastica”, redatto in data 07.09.2018 dal Geom. Rossano Paoloni, composto dai seguenti elaborati:
A.	Relazione Tecnica Generale;
B.	Computo Metrico Estimativo di Variante n. 2 e Quadro Economico;
C.	Quadro di Raffronto;
e dal quale si evince che “le variazioni rispetto al progetto esecutivo ed alla variante suppletiva sono le seguenti:
•	Aumento dei correnti in legno sulle pareti di fondo;
•	Diminuzione di superficie del polistirolo sulle pareti di fondo;
•	Aumento della superficie del rivestimento delle pareti di fondo;
•	Diminuzione di superficie degli infissi a taglio termico;
•	Diminuzione di superficie delle vetrate termo-acustiche isolanti;
Le variazioni di cui sopra determinano la diminuzione dell’importo dei lavori appaltati;
Con la presente variante n. 2 viene anche rimodulato il Quadro Economico di progetto al fine di inserire, tra le somme a disposizione, le nuove spese tecniche che si sono rese necessarie […];

DATO ATTO che la presente variante n. 2 al progetto defitivo/esecutivo: 
-	non prevede l’esecuzione di nuove lavorazioni;
-	non comporta aumento di spesa per la stazione appaltante e rientra nelle fattispecie consentite dall’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/201);
-	non comporta variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

VISTO il progetto definitivo - esecutivo in variante n. 2 a firma del Geom. Rossano Paoloni, sopra richiamato, nel quale vengono riportate le argomentazioni che giustificano l’intervento e quantificano la spesa in € 93.300,00 così ripartita:
A	Importo lavori	€ 77.914,75	
 	A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi	€ 1.558,30	
 	Importo soggetto a ribasso	€ 76.356,45	
 	Ribasso d’asta (25,441%)	€ 19.425,84	
 	Importo lavori ribassato	€ 56.930,61	
 	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.558,30	
 	Totale importo	€ 58.488,91	
B	Somme a disposizione:	 	
 	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 5.848,89	
 	lavori in economia in progetto esclusi dall’appalto	€ 17.990,22	
 	spese tecniche prog. e direz. compresi cap e iva	€ 7.045,50	
 	spese tecniche coord. sicur. compresi cap e iva	€ 2.080,00	
 	spese tecniche prest. Special. compresi cap e iva	€ 761,28	
 	spese tecniche supporto al RUP compresi cap e iva	€ 542,00	
 	spese per ANAC	€ 30,00	
 	oneri art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016(1,8%)	€ 513,20	
 	Totale somme a disposizione	€ 34.811,09	
 	TOTALE DI PROGETTO	€ 93.300,00	

ATTESO CHE:
-	il costo dell’opera pari ad € 93.300,00 sarà finanziato con mutuo a tasso zero contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo, con imputazione al capitolo 2792 art. 2 del Bilancio di Previsione 2018/2020;  
-	il progetto è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;
-	i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1978 N. 384, che approva il “Regolamento di attuazione dell’art. 27, della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.”;
-	in generale le opere saranno realizzate in conformità alle disposizioni tese al superamento delle barriere architettoniche garantendo il livello di accessibilità così come definito all’art. 2 lett. G. del D. M. 14/06/1989 n° 236;
-	il progetto è conforme alle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del vigente Statuto comunale;

Richiamati  i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell’ufficio tecnico comunale;

                                              PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.	DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo in variante n. 2 relativo alla rimodulazione del quadro economico dei “lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico palestra scolastica”, redatto in data 07/09/2018 dal Geom. Rossano Paoloni;
3.	DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’opera in variante ammonta ad € 93.300,00 così ripartita:
A	Importo lavori	€ 77.914,75	
 	A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi	€ 1.558,30	
 	Importo soggetto a ribasso	€ 76.356,45	
 	Ribasso d’asta (25,441%)	€ 19.425,84	
 	Importo lavori ribassato	€ 56.930,61	
 	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.558,30	
 	Totale importo	€ 58.488,91	
B	Somme a disposizione:	 	
 	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 5.848,89	
 	lavori in economia in progetto esclusi dall’appalto	€ 17.990,22	
 	spese tecniche prog. e direz. compresi cap e iva	€ 7.045,50	
 	spese tecniche coord. sicur. compresi cap e iva	€ 2.080,00	
 	spese tecniche prest. Special. compresi cap e iva	€ 761,28	
 	spese tecniche supporto al RUP compresi cap e iva	€ 542,00	
 	spese per ANAC	€ 30,00	
 	oneri art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016(1,8%)	€ 513,20	
 	Totale somme a disposizione	€ 34.811,09	
 	TOTALE DI PROGETTO	€ 93.300,00	
4.	DI DARE ATTO che il costo dell’opera pari ad € 93.300,00 sarà finanziato con mutuo a tasso zero contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo, con imputazione al capitolo 2792 art. 2 del Bilancio di Previsione 2018/2020;  
5.	DI INCARICARE il Responsabile del servizio LL.PP. Geom. Luchetti Silvano degli adempimenti connessi all’autorizzazione, esecuzione e rendicontazione dell’intervento;
6.	DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luchetti Silvano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE                                       
Ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e sotto il profilo della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE del III Settore
(Dott. ssa Federica Paoloni)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA                                         
Ai sensi dell'art. 49 ,1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.  
IL RESPONSABILE del II Settore
(Luchetti Geom. Silvano)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;
Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto Comunale;
CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

PROPOSTA APPROVATA

INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;
CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del Tuel approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

          IL PRESIDENTE						IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Catalini Ilenia 			     F.to Cesetti Alberto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 27-09-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all’albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………..perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il ……………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)
Loro Piceno, li …………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, lì …………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                               		                      Cesetti Alberto