COMUNE DI FIUMINATA
Provincia di Macerata

COPIA  DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.86     DEL 30-04-19

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTANTINI"  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di aprile, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-	Che il Comune di Fiuminata da anni sta portando avanti un programma di sistemazione e miglioramento della qualità architettonica degli spazi pubblici comunali e delle reti viarie di interesse locale al fine di assicurare più facili e sicuri spostamenti alle popolazioni residenti nonché di adeguare i tracciati alle esigenze di transito;

-	Che l’Amministrazione comunale ha intenzione in questa di fase di riqualificare Piazza Costantini in quanto posta all’interno del centro urbano e da sempre importante centro di aggregazione in occasione di varie manifestazioni;

-	Che l’intervento in oggetto riveste carattere di urgenza in quanto il fondo stradale è particolarmente deteriorato e pertanto necessita provvedere in merito al fine della tutela della pubblica incolumità;

-	Che su indicazione dell’Amministrazione, in data Ottobre 2018 l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata nella persona dell'Ing. Massacci Lorenzo ha predisposto un  progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza Costantini che comporta una spesa complessiva di Euro 45.000,00 di cui Euro 38.724,57 + Iva 10% per lavori compresi Euro 1.019,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 6.275,43 per somme a disposizione come di seguito specificato:

       QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A)	TOTALE OPERE A BASE D'ASTA   			€   37.704,63
      Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€     1.019,94 
                                                                                                                        -----------------
                   Importo totale dei lavori a misura      €   38.724,57

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) IVA 10% su opere in appalto				  	€     3.872,46 
2) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs 50/16			€        774,49
3) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa         		€     1.628,48
                                                                                                                        -----------------                                      
        Totale somme a disposizione		€     6.275,43
                                                                                                                       ==========
TOTALE GENERALE DI PROGETTO         		€   45.000,00

Allegati:
-	Relazione tecnico illustrativa, quadro economico e cronoprogramma;
-	Documentazione fotografica;
-	Elaorati grafici;
-	Capitolato speciale d’appalto;
-	Schema di Contratto d’appalto;
-	Elenco Prezzi;
-	Analisi Prezzi;
-	Computo Metrico Estimativo;
-	Stima dei costi della sicurezza.

-	Che non risulta necessaria l’acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte di Enti sovraordinati in quanto le categorie dei lavori previste riguardano la sistemazione di strutture preesistenti con opere esclusivamente volte al ripristino delle condizioni di usabilità senza significative modifiche esteriori;

-	Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 5456 del 25.10.2018) da parte del Geom. Frattali Fabio dell’Ufficio Tecnico comunale;

-	Che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 25.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTANTINI" per un importo complessivo di €. 45.000,00 come sopra specificato;

-	Che il Consiglio Comunale nella seduta del 22.11.2018 ha provveduto a ratificare la variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 disposta con l’atto di giunta suddetto al fine di individuare il finanziamento dell’opera;

Considerato:

-	Che in data 09.11.2018 (prot. n. 57288) venivano invitate alla gara informale espletata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all’appalto dei lavori di “RESTAURO PIAZZA COSTANTINI”  n. 5 ditte per un importo a base d’asta di €. 37.704,63 oltre €. 1.019,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, fissando per il giorno 28.11.2018 alle ore 13,00 il termine per la presentazione delle offerte:

-	Che a seguito della gara informale esperita, con determina di settore tecnico n. 228 del28.12.2019 è stata affidata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta “Stella Edo di Bellucci Maria & C. snc” con sede legale in Via Flaminia n. 8 – 62025 Fiuminata (MC) - partita Iva 00101080430, la realizzazione dei lavori di “RESTAURO PIAZZA COSTANTINI” per un importo pari ad Euro €. 32.646,58 (Euro trentaduemilaseicentoquarantasei/58) + Iva 10% al netto del ribasso d’asta offerto del 16,12% (sedicivirgoladodici%) e comprensivo di €. 1.019,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CIG. n. Z02265E9D6 e CUP. n. I45F18000670004;

            QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A)	IMPORTO LORDO LAVORI					€   38.724,57
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 16,12%	€   32.646,58
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€     1.019,94

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) IVA 10% su opere in appalto				  	€     3.264,66 
2) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs 50/16			€        774,49
3) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa         		€     7.460,28
                                                                                                                 	-----------------                                      
        Totale somme a disposizione		€   12.353,42
                                                                                                                	=========
TOTALE GENERALE DI PROGETTO         		€   45.000,00

-	Che con nota prot. n. 6416 del 18.12.2018, è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto suddetto a tutte le Ditte partecipanti alla procedura di gara relativa ai lavori di “RESTAURO PIAZZA COSTANTINI”;

-	Che detto appalto è stato formalizzato mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Ditta Stella Edo snc di Fiuminata (MC), Sig. Paolo Stella del contratto Rep. n. 6 de10.01.2019;

-	Che in data 31.01.2019 il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo, ha provveduto alla consegna dei lavori di "Restauro Piazza Costantini" alla Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e figli snc di Fiuminata (MC) – giusto verbale registrato al protocollo comunale al n. 504 del 31.01.2019;

-	Che con determina di settore tecnico n. 57 del 13.03.2019 è stata autorizzata la Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e figli snc con sede in via Flaminia n. 8 di Fiuminata (MC), appaltatrice dei lavori di "Restauro Piazza Costantini", al subappalto del 29,10% dei lavori (posa in opera asfalto) a favore Ditta FERRETTI SRL srl con sede in Castelraimondo (MC) in Via Tagliamento n. 18, P. Iva 01223000439 per un importo di €. 9.500,00 + Iva;

Visto:

-	Che in merito ai lavori di ““RESTAURO PIAZZA COSTANTINI” si rende necessario, per il verificarsi in corso d’opera di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni su cui si interviene, nonché per la realizzazione di alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate alla salvaguardia dei beni sui quali si interviene oltre a migliorare la qualità, la funzionalità e l’utilizzo dell’opera, apportare alcune modifiche alle opere;

-	Che in merito il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Direttore dei Lavori ha predisposto apposita perizia di variante;

-	Che la perizia di Variante e Suppletiva n. 1 all’uopo predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo non comporta una spesa aggiuntiva in quanto i maggiori lavori trovano copertura nelle voci delle economie del QTE di aggiudicazione:

            QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

IMPORTO LORDO LAVORI					€   47.412,50
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 16,12%	€   39.963,90
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€     1.205,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) IVA 10% su opere in appalto				  	€     3.996,39 
2) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs 50/16			€        948,25
3) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa         		€          91,46
                                                                                                                 	-----------------                                      
        Totale somme a disposizione		€     5.036,10
                                                                                                                	==========
TOTALE GENERALE DI PROGETTO         		€   45.000,00

-	Che detta perizia:

•	comporta maggiori lavori per €. 7.317,32 + Iva;
•	che per effetto della perizia l’importo contrattuale viene rideterminato in €. 39.963,90 + Iva al netto del ribasso d’asta del 16,12% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 1.205,29;
•	che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;
•	che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
o	Relazione Tecnico descrittiva di Variante e Quadro tecnico economico di variante e comparativi; 
o	Computo Metrico Estimativo;
o	Computo metrico incidenza sicurezza;
o	Quadro di raffronto;
o	Elaborato grafico di variante;
o	Elenco nuovi prezzi.

-	Che le modifiche da apportare al progetto approvato rientrano nell’ambito dell’art. 106 comma 1 lettera “c” del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

-	Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

-	Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

-	Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-	Visto il CIG. n. Z02265E9D6 ed il CUP. n. I45F18000670004 indicanti l’appalto dei lavori in oggetto;

-	Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A
-	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-	Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva V1 dei lavori di "Restauro Piazza Costantini" a firma del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Massacci Lorenzo (MC);

-	Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di variante risulta essere il seguente:

            QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE:

IMPORTO LORDO LAVORI					€   47.412,50
IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO DEL 16,12%	€   39.963,90
Di cui Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€     1.205,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1) IVA 10% su opere in appalto				  	€     3.996,39 
2) Spese gen. di prog. 2%, Art. 113 D.Lgs 50/16			€        948,25
3) Arrotondamenti ed imprevisti IVA compresa         		€          91,46
                                                                                                                 	-----------------                                      
        Totale somme a disposizione		€     5.036,10
                                                                                                                	==========
TOTALE GENERALE DI PROGETTO         		€   45.000,00

-	Di dare che detta Perizia di Variante V1:
•	comporta maggiori lavori per €. 7.317,32 + Iva;
•	che per effetto della perizia l’importo contrattuale viene rideterminato in €. 39.963,90 + Iva al netto del ribasso d’asta del 16,12% e comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad €. 1.205,29;
•	che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato senza aumento di costi;
•	che la perizia è composta dai seguenti elaborati:
o	Relazione Tecnico descrittiva di Variante e Quadro tecnico economico di variante e comparativi; 
o	Computo Metrico Estimativo;
o	Computo metrico incidenza sicurezza;
o	Quadro di raffronto;
o	Elaborato grafico di variante;
o	Elenco nuovi prezzi.

-	Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni; 

-	Di approvare l’elenco dei nuovi prezzi n.1 debitamente accettati e sottoscritti dalla ditta applatatrice che si intendono qui integralmente riportati;

-	Di dare atto che la presente determinazione non comporta varizione di impegno di spesa.

-	Di dare atto che a fronte dei suddetti lavori aggiuntivi in variante viene concessa alla Ditta esecutrice una proroga per la conclusione degli stessi di 10 giorni.

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

 					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                             
                                                                F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

					        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
					        F.to MASSACCI LORENZO
	
Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
                                                                 F.to AURELI SABATINO
Li, 30-04-19     

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 gg. consecutivi.
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 30-04-2019                                      F.toMASSACCI LORENZO 

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30-04-019 al 15-05-019

Li 16-05-19 				           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                             F.to  MASSACCI LORENZO

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                        MASSACCI LORENZO
Li 30-04-2019