COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.359

DETERMINAZIONE  NUMERO  152 DEL  21-09-2018

OGGETTO:	SISMA 2016 - Lavori di messa in sicurezza del Palazzo Paparelli Camillo e altri siti nel Comune di Muccia in Via Varano contraddistinti catastalmente al Foglio 7 Particelle 218-220-223-224-225-228 - Approvazione della perizia suppletiva di variante	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	nelle date del 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l’intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
-	tali fenomeni hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale;

Visto l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio “Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni”;

Preso atto del sopralluogo GTS e della scheda di valutazione n. B del 26.01.2017, CCR 1104 nella quale gli edifici privati censiti catastalmente al Foglio 7 Particelle 218-220-223-224-225-228 sono stati valutati come interventi di messa in sicurezza P2 media importanza

Preso atto del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche assunto al protocollo comunale n.1028 del 02.02.2018 con il quale veniva rilasciato il nulla osta agli interventi previsti in progetto con prescrizioni;

Richiamate 
-	la propria determinazione n.93 del 25.07.2017 con la quale veniva affidato allo Studio Tecnico Associato AB COMPUTER Ingegneria e Architettura l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza relativi al Palazzo Paparelli Camillo più privati contraddistinti al Foglio 7 Particelle 218-220-223-224-225-228;
-	la propria determinazione n.9 del 19.01.2018 con la quale venivano affidati i lavori di messa in sicurezza relativi al Palazzo Paparelli Camillo più privati censiti catastalmente al Fg.7 P.lle 218-220-223-224-225-228 alla ditta Pipponzi S.r.l., per l’importo netto contrattuale di €.73.620,58 oltre IVA di legge, sottoscritta dall’impresa affidataria come accettazione dell’incarico;

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:
	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	
A.	Lavori			
Importo Lavori	€.104.324,84	€.104.324,84	
Di cui oneri per la sicurezza	€.6.259,49	€.6.259,49	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.98.065,35	€.98.065,35	
Ribasso 31,31%	---	-€.30.704,26	
Sommano	€.98.065,35	€.67.361,09	
oneri per sicurezza	€.6.259,49	€.6.259,49	
Sommano	€.104.324,84	€.73.620,58	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne			
IVA sui Lavori 10%	€.10.432,48	€.7.362,06	
Spese Tecniche	€.5.216,24	€.5.216,24	
CNPAIA 4%	€.208,65	€.208,65	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.193,48	€.1.193,48	
Imprevisti 5% (iva inclusa)	€.5.737,86	€.5.737,86	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.086,50	€.2.086,50	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 31,31% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.33.774,68	
Sommano	€.24.875,21	€.21.804,79	
TOTALE	€.129.200,05	€.129.200,05	

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 12.03.2018;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 10.04.2018 a seguito della nuova sequenza sismica ed in particolare della scossa di magnitudo 4.7 registrata in pari data;

Visto il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 19.04.2018;

Preso atto della richiesta di proroga ai tempi contrattuali di 30 giorni avanzata dall’impresa affidataria Pipponzi S.r.l.;

Visto il 2^verbale di sospensione dei lavori redatto in data 18.05.2018, necessaria per la redazione di una perizia di variante suppletiva al progetto, a seguito della sopraggiunta necessità e opportunità di tutelare maggiormente il bene monumentale soggetto a vincolo, identificato nella cappellina privata situata al piano primo del fabbricato;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità e possibilità di poter eseguire alcune varianti e/o migliorie al progetto esecutivo che consistono sinteticamente:
-	Predisposizione di un ponteggio per l’evacuazione di emergenza dei lavoratori impegnati all’interno dei fabbricati;
-	Sostituzione delle perforazioni di diam. fino a 35 mm. sulle murature con tagli a sezione obbligata per il passaggio delle tirantature in funi di acciaio con diam. fino a 65 mm.;
-	Eliminazione del trattamento protettivo del legname per sbadacchiature e travi a supporto delle tirantature;
-	Opere di salvaguardia aggiuntive sulla porzione d’angolo occupata dalla Chiesa interna all’edificio;
-	Rimozione di 2 comignoli pericolanti sulla copertura;
-	Modifica al sistema di tesatura dei cavi di acciaio con aumento dei pesi degli elementi in acciaio;

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Mario Montecchiari, che eleva l’importo contrattuale a €.96.629,26 (IVA esclusa e al netto del ribasso d’asta del 31,31%), con un incremento di €.23.008,68 pari al 31,25% dell’importo iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell’ufficio:
-	Elenco allegati Perizia di Variante;
-	Relazione tecnico illustrativa Variante;
-	Elenco dei Nuovi Prezzi Unitari;
-	Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante;
-	Quadro Tecnico Economico;
-	Quadro comparativo di Raffronto;
-	Opere provvisionali per la messa in sicurezza del palazzo Paparelli Camillo ed altri sito in Via Varano – Pianta Piano Terra;
-	Opere provvisionali per la messa in sicurezza del palazzo Paparelli Camillo ed altri sito in Via Varano – Pianta Piano Secondo;
-	Opere provvisionali per la messa in sicurezza del palazzo Paparelli Camillo ed altri sito in Via Varano – Prospetto Nord Prospetto Est Sezione E-E;

Accertato che:
-	le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-	ai sensi del comma 7 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “…l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”, essendo la variazione in aumento pari a circa il 31,25%

Preso atto che:
-	il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
-	l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l’impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo del progetto esecutivo approvato con nulla osta dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche prot.n. 20148/21/12/2017/MARCHEUSR/USR/P;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentate Legale dall’impresa affidataria PIPPONZI S.r.l., dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n.7 Nuovi Prezzi e una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all’ultimazione dei lavori;

Dato atto:
-	che le maggiori spese per lavori a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell’ambito del quadro economico dell’opera così come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	Q.T.E. VARIANTE	
A.	Lavori				
Importo Lavori	€.104.324,84	€.104.324,84	€.136.929,54	
Di cui oneri per la sicurezza	€.6.259,49	€.6.259,49	€.8.215,77	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.98.065,35	€.98.065,35	€.128.713,77	
Ribasso 31,31%	---	-€.30.704,26	-€.40.300,28	
Sommano	€.98.065,35	€.67.361,09	€.88.413,49	
oneri per sicurezza	€.6.259,49	€.6.259,49	€.8.215,77	
Sommano	€.98.065,35	€.73.620,58	€.96.629,26	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne				
IVA sui Lavori 10%	€.10.432,48	€.7.362,06	€.9.662,93	
Spese Tecniche	€.5.216,24	€.5.216,24	€.6.846,48	
CNPAIA 4%	€.208,65	€.208,65	€.273,86	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.193,48	€.1.193,48	€.1.566,47	
Imprevisti 5% (iva inclusa)	€.5.737,86	€.5.737,86	€.5.737,86	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.086,50	€.2.086,50	€.2.738,59	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 31,31% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.33.774,68	€.5.744,59	
Sommano	€.24.875,21	€.21.804,79	€.26.826,19	
TOTALE	€.129.200,05	€.129.200,05	€.129.200,05	

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:
-	Codice CIG: 7352733338

Visti:
-	l’art. 106 del D. Lgs. n°50/2016;

-	lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità

-	il D. Lgs. n° 267/2000;

Accertato che l’impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n.9 del 19.01.2018 offre idonea copertura finanziaria anche per la realizzazione dei lavori di variante;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di approvare:
-	la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di messa in sicurezza del Palazzo Paparelli Camillo più privati censiti catastalmente al Fg.7 P.lle 218-220-223-224-225-228, così come descritti negli elaborati progettuali di variante, dell’importo complessivo di €.136.929,54 per lavori e oneri della sicurezza;
-	l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n.7 prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
-	il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra dell’importo totale di €.129.200,05;
3.	Di affidare all’impresa PIPPONZI S.r.l. con sede a Civitanova Marche (MC), Via Giuseppe Saragat n.21, C.F./P.IVA: 00910740430, l’esecuzione dei lavori di perizia per l’importo complessivo di €.23.008,68 oltre IVA di legge agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n.7 Nuovi Prezzi e concedendo una proroga di 15 (quindici) giorni al termine di ultimazione dei lavori;
4.	Di dare atto che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
5.	Di dare atto che alla liquidazione dei lavori di cui all’oggetto si provvederà con successivo e separato atto previa verifica della contabilità finale dei lavori, l’approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e di adeguata fatturazione elettronica;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 21-09-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
(Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 21-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della  presente  deliberazione   viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente   nel   sito web   istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     21-09-2018                  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
 SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 21-09-2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)