COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.150

DETERMINAZIONE  NUMERO  66 DEL  08-04-2019

OGGETTO:	SISMA 2016 - Approvazione perizia suppletiva e di variante, verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione dei lavori di messa in sicurezza degli edifici privati censiti catastalmente al Fg. 7 P.lle 126-127-128-129-132-305 siti nel Comune di Muccia	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	nelle date del 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l’intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
-	tali fenomeni hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale;

Visto l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio “Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni”;

Preso atto del sopralluogo GTS e della scheda di valutazione n. 06 del 23.02.2017, CCR 2137 nella quale gli edifici privati censiti catastalmente al Foglio 7 Particelle 126-127-128 sono stati valutati come interventi di messa in sicurezza P3 “interventi rilevanti”;

Preso atto del successivo sopralluogo “Ex GTS” svolto congiuntamente da tecnici in rappresentanza del Comune di Muccia, Vigili del Fuoco e Mibact, nel quale per gli edifici contraddistinti catastalmente al Fg. 7 P.lle 126-127 veniva prescritta la demolizione lasciando in situ, per un’altezza di c.a. 1 mt., le murature d’ambito dell’impalcato del piano terra;

Viste le Ordinanze Sindacali n.54 e n.55 del 17.09.2018 con le quali veniva ordinato tra l’altro la demolizione degli edifici censiti catastalmente al Fg.7 P.lle 126-127 secondo le modalità previste dal progetto redatto dall’Ing. Attilio Mogianesi;

Richiamate 
-	la propria determinazione n.6 del 16.01.2018 con la quale veniva affidato all’Ing. Attilio Mogianesi l’incarico di progettazione e direzione dei lavori della messa in sicurezza con opere provvisionali e/o demolizione degli edifici di proprietà di privati contraddistinti catastalmente al Foglio 7 Particelle 136-138-139-140-117-116-126-127-128-129-133;
-	la propria determinazione n.155 del 02.10.2018 con la quale venivano affidati i lavori di messa in sicurezza e/o smontaggio controllato degli edifici privati siti nel Comune di Muccia censiti catastalmente al Fg.7 P.lle 126-127-128-129-133-305 alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di Muccia, per l’importo netto contrattuale di €.98.304,66 oltre IVA di legge, per un totale di €.108.135,13, sottoscritta dall’impresa affidataria come accettazione dell’incarico;

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	
A.	Lavori			
Importo Lavori	€.135.698,38	€.135.698,38	
Di cui oneri per la sicurezza	€.11.052,65	€.11.052,65	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.124.645,73	€.124.645,73	
Ribasso 30,00%	---	-€.37.393,72	
Sommano	€.124.645,73	€.87.252,01	
oneri per sicurezza	€.11.052,65	€.11.052,65	
Sommano	€.135.698,38	€.98.304,66	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne			
IVA sui Lavori 10%	€.13.569,84	€.9.830,47	
Spese Tecniche	€.6.784,92	€.6.784,92	
CNPAIA 4%	€.271,40	€.271,40	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.552,39	€.1.552,39	
Imprevisti 5% (iva inclusa)	€.8.277,60	€.8.277,60	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.713,97	€.2.713,97	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 30,00% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.41.133,07	
Sommano	€.33.170,11	€.70.563,84	
TOTALE	€.168.868,48	€.168.868,48	

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 05.11.2018;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 21.12.2018, redatto a seguito della demolizione dell’edificio censito alla particella 127, in quanto il muro di confine con l’edificio attiguo (particella 128) è risultato particolarmente danneggiato, di spessore molto limitato e caratterizzato dalla presenza di numerose nicchie e camini che ne compromettono la stabilità;

Visto il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot.n. 5257 del 11.03.2019 assunto al protocollo comunale n.1831 del 12.03.2019, nel quale si ritiene possibile prevedere lo smontaggio del piano secondo dell’edificio censito al Fg.7 P.lla 128, posto al di sopra di una nicchia decorata con un immagine sacra, previa messa in sicurezza preliminare della decorazione, attraverso la “fermatura dei bordi e protezione della superficie con velature di tessuto”;

Considerato appunto che durante l’esecuzione dei lavori, a seguito degli imprevisti sopraggiunti descritti precedentemente, si è ravvisata la necessità eseguire alcune varianti e/o migliorie al progetto esecutivo che consistono sinteticamente in:
-	Messa in sicurezza decorazione sacra contenuta nella nicchia della facciata dell’edificio Fg.7 P.lla 128;
-	Smontaggio controllato della copertura, del solaio di piano secondo e delle murature del piano secondo (lasciando inalterata la muratura con la nicchia) dell’edificio Fg. 7 P.lla 128;
-	Demolizione controllata a mano di tutto l’edificio censito catastalmente al Fg. 7 P.lla 305;

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Attilio Mogianesi, che eleva l’importo contrattuale a €.123.073,93 (IVA esclusa e al netto del ribasso d’asta del 30,00%), con un incremento di €.24.769,27 pari al 25,2% dell’importo iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell’ufficio:
-	Av_Relazione tecnica;
-	Bv_Elenco nuovi prezzi;
-	Cv_Computo metrico estimativo;
-	Dv_Quadro economico di variante;
-	Ev_Quadro comparativo variante;
-	Tav.1v_Stato di Progetto;
-	Tav.2v_Stato di Progetto;
-	Tav.3v_Stato in Variante;

Accertato che:
-	le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-	ai sensi del comma 7 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “…l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”, essendo la variazione in aumento pari a circa il 25,2%;

Preso atto che:
-	il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
-	l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l’impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo del progetto esecutivo approvato con nulla osta del Servizio Protezione Civile della Regione Marche assunto al protocollo comunale n. 5566 del 06.07.2018;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentate Legale dall’impresa affidataria EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n.1 Nuovi Prezzi e una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi all’ultimazione dei lavori;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 06 del 08/04/2019 con le quale veniva ordinato tra l’altro la demolizione/smontaggio controllato parziale dell’edificio censito catastalmente al Fg.7 P.lle 128;

Dato atto:
-	che le maggiori spese per lavori a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell’ambito del quadro economico dell’opera così come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	Q.T.E. VARIANTE	
A.	Lavori				
Importo Lavori	€.135.698,38	€.135.698,38	€.163.742,85	
Di cui oneri per la sicurezza	€.11.052,65	€.11.052,65	€.28.179,77	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.124.645,73	€.124.645,73	€.135.563,08	
Ribasso 30,00%	-----	-€.37.393,72	-€.40.668,92	
Sommano	€.124.645,73	€.87.252,01	€.94.894,16	
oneri per sicurezza	€.11.052,65	€.11.052,65	€.28.179,77	
Sommano	€.124.645,73	€.98.304,66	€.123.073,93	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne				
IVA sui Lavori 10%	€.13.569,84	€.9.830,47	€.12.307,39	
Spese Tecniche 5% + 3%	€.6.784,92	€.6.784,92	€.13.099,43	
CNPAIA 4%	€.271,40	€.271,40	€.523,98	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.552,39	€.1.552,39	€.2.997,15	
Imprevisti 5% (iva inclusa)	€.8.277,60	€.8.277,60	€.8.187,14	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.713,97	€.2.713,97	€.2.713,97	
Intervento restauratore nicchia affrescata	-----	-------	€.2.800,00	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 30,00% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.41.133,07	€.3.165,49	
Sommano	€.33.170,11	€.70.563,84	€.45.794,55	
TOTALE	€.168.868,48	€.168.868,48	€.168.868,48	

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:
-	Codice CIG: 7622748AA3

Visti:
-	l’art. 106 del D. Lgs. n°50/2016;

-	lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità

-	il D. Lgs. n° 267/2000;

Accertato che l’impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n.155 del 02.10.2018 offre idonea copertura finanziaria anche per la realizzazione dei lavori di variante;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di approvare:
-	la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di messa in sicurezza degli edifici privati siti in Via Roma censiti catastalmente al Fg.7 P.lle 126-127-128-129-132-305, così come descritti negli elaborati progettuali di variante, dell’importo complessivo di €.163.742,85 per lavori e oneri della sicurezza;
-	l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n.1 prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
-	il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra dell’importo totale di €.168.868,48;
3.	Di affidare all’impresa EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede a Muccia (MC), Via Spinabello n.46, C.F./P.IVA: 01882260431, l’esecuzione dei lavori di perizia per l’importo complessivo di €.24.769,27 oltre IVA di legge agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n.1 Nuovi Prezzi e concedendo una proroga di 20 (venti) giorni al termine di ultimazione dei lavori;
4.	Di dare atto che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
5.	Di dare atto che alla liquidazione dei lavori di cui all’oggetto si provvederà con successivo e separato atto previa verifica della contabilità finale dei lavori, l’approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e di adeguata fatturazione elettronica;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 08-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to (Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 08-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to (Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     09-04-2019            per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to  SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 08-04-2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)