COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.523

DETERMINAZIONE  NUMERO  227 DEL  31-12-2018

OGGETTO:	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE FONTICELLE. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE325C071A	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Giunta n. 82 del 14.11.2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti della strada comunale Fonticelle per l’importo di € 36.477,26 per lavori ed € 10.522,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
	Visto che con propria determinazione n. 184 del 15.11.2018, a seguito di espletamento della gara di appalto, sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta Cagnini Costruzioni s.r.l. con un ribasso pari al 16,50% rimodulando il quadro tecnico economico come appresso specificato:

Voce	Importo (euro)	
Importo lavori soggetti a ribasso	35.612,87	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	864,39	
Totale lavori a base d’asta	36.477,26	
Importo lavori al netto del ribasso del 16,50%	29.736,75	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	864,39	
Totale lavori in appalto	30.601,14	
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	6.732,25	
Per RUP 2%	729,55	
Imprevisti e lavori su fattura	1.768,19	
Totale somme a disposizione	9.229,99	
Totale 	39.831,13	

	Visto che durante l’esecuzione dei lavori si è ritenuto necessario procedere a delle modifiche del progetto originario, di opere non previste, consistenti nelle seguenti lavorazioni:
-	allargamento in alcuni tratti, della sede stradale, in quanto nel corso degli anni causa lo scorrimento del terreno delle scarpate, la stessa risultava di modeste dimensioni;
-	prolungamento dell’asfaltatura di un ulteriore tratto pari a ml. 90,00, che a seguito delle copiose piogge risulta deteriorato tale da pregiudicare pericolo alla circolazione;

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori che eleva l’importo contrattuale ad €.35.096,04 (IVA esclusa e al netto del ribasso d’asta del 16,50%), con un aumento di €.4.494,90 pari a circa il 14,69% dell’importo contrattuale iniziale e costituita dei seguenti elaborati:
-	Computo metrico estimativo di variante;
-	Quadro di raffronto;
-	Quadro Tecnico Economico di variante;
-	Schema dell’atto di sottomissione;

Accertato che:
-	le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che:
-	il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra espresso, procedere alla redazione della variante al progetto originario, recuperando il ribasso d’asta per la copertura dei maggiori lavori non previsti, rimodulando il quadro tecnico economico come appresso specificato:
Voce	Importo (euro)	
Importo lavori soggetti a ribasso	41.835,29	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	911,36	
Totale lavori a base d’asta	40.843,93	
Ribasso d’asta 16,50%	6.739,25	
Importo lavori al netto del ribasso del 16,50%	34.104,68	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	911,36	
Totale lavori in appalto	35.096,04	
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	7.721,13	
Per RUP 2%	701,92	
Imprevisti e lavori su fattura	----	
Totale somme a disposizione	8.423,05	
Totale variante	43.519,09	

Visto che con propria determinazione n. 184 del 15.11.2018 è stata impegnata la somma di € 39.831,13 al capitolo 2008/0 per € 20.831,13 ed al capitolo 2008/1 per € 19.000,00 del bilancio corrente;

	Visto che a seguito di perizia di variante e suppletiva l’importo totale del progetto è aumento di € 3.327,96, pur rientrando nelle somme autorizzate del progetto esecutivo;

	Visto che la maggiore somma di € 3.327,96 può trovare copertura finanziaria al capitolo 2008/1 con adeguamento dell’impegno 327 del bilancio di previsione 2018 gestione competenza;

Visto:
 	l'art. 36 del D. Lgs. n°50/2016;
	l'art. 163 del D. Lgs. n°50/2016;
 	l'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
 	lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità
 	il D. Lgs. n° 267/2000;
 	il CIG ZE325C071A per affidamento dei lavori;

DETERMINA

Di richiamare le premesse sopra citate quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Di approvare:
-	la perizia e di variante relativa ai lavori di rifacimento del manto stradale di alcuni tratti della strada comunale Fonticelle, come meglio descritto nel computo metrico estimativo di variante, dell’importo complessivo di €.41.835,29 al lordo del ribasso d’asta;
-	l’atto di sottomissione relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, sottoscritto dall’impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
-	il nuovo Quadro Tecnico Economico della spesa, sotto riportato, dell’importo totale di €.43.519,09, venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra;

Voce	Importo (euro)	
Importo lavori soggetti a ribasso	41.835,29	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	911,36	
Totale lavori a base d’asta	40.843,93	
Ribasso d’asta 16,50%	6.739,25	
Importo lavori al netto del ribasso del 16,50%	34.104,68	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	911,36	
Totale lavori in appalto	35.096,04	
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA 22% sui lavori	7.721,13	
Per RUP 2%	701,92	
Imprevisti e lavori su fattura	----	
Totale somme a disposizione	8.423,05	
Totale variante	43.519,09	

Di affidare all’impresa appaltatrice Cagnini Costruzioni S.r.l., l’esecuzione dei lavori di perizia per l’importo complessivo di €.35.096,04 oltre IVA di legge agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Di dare atto che il perfezionamento contrattuale dei lavori di perizia sarà attuato mediante l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;

Di integrare per €.3.687,96 il precedente impegno assunto con propria determinazione n. 184 del 15.11.2018 per la somma di € 39.831,13;

Di impegnare la somma di € 3.687,96 al capitolo 2008/1 con adeguamento dell’impegno 327 del bilancio di previsione 2018 gestione e competenza;

Di dare atto che:
- la liquidazione dei lavori di cui in oggetto, si provvederà con successivo e separato atto previa verifica della contabilità finale dei lavori e di adeguata fatturazione elettronica;
- le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 31-12-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
(Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 31-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della  presente  deliberazione   viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente   nel   sito web   istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     30-01-2019                  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
 SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 31-12-2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)