COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.420

DETERMINAZIONE  NUMERO  176 DEL  26-10-2018

OGGETTO:	SISMA 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - "Lavori messa in sicurezza tramite  demolizione/smontaggio controllato degli immobili contraddistinti catastalmente al Foglio n.9 Mappali 183-627 e Foglio n.6 Mappale 109 siti nel Comune di Muccia"	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	A seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre dell’anno 2016 e del 10 Aprile 2018, grande parte degli immobili pubblici e privati, siti nel territorio comunale, risultavano interessati da danneggiamenti e crolli, rendendo di fatto la maggior parte di essi inutilizzabili. 
-	Alcuni fabbricati insistono su pubblica via e rappresentano pertanto un pericolo per l’incolumità pubblica e privata e che sussiste quindi la necessità di garantire le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;
-	L’attività sismica è ancora in atto e che si rende necessario porre in essere, in termini d’urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione nonché l’integrità della vita;

Visto il Decreto n.4 del 06.06.2016 con il quali il Geom. Marco Piccioni è stato nominato responsabile del Servizio “Lavori Pubblici, Gestione e Manutenzione dei Beni”;

	Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

	Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

	Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

Vista l’ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24/08/2016”;

Vista Il D.L. 189/2016, convertito in Legge n.229/2016 e ss.mm.ii., e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri CG/TERAG16/0072035 inerente la procedura per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni);

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. n. UC/TERAG16/0044298 DEL 03/06/2016, dai quali si evince che “le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività” indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:
I. Soccorso e prima assistenza alla popolazione
II. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza
III. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza
IV. Trasporti pubblici e privati
V. Sistemazioni alloggiative alternative
VI. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi
VII. Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta
VIII. Contributi autonoma sistemazione
IX. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista;

Visto:
-	l’art. 107 del D.lgs.267 del 18 agosto 2000;
-	gli art. 36 comma 2 e 125 comma 1 lett.d del D.Lgs. n.50/2016;
-	D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti ancora in vigore;

Premesso che a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 20.12.2017 gli immobili censiti catastalmente al Foglio 9 Mappali 183 e 627 e Foglio 6 Mappale 109, risultavano gravemente danneggiati creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità su via pubblica;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 17, 18 e 19 del 20.02.2018 con le quali si ordinava rispettivamente il transennamento e la demolizione degli immobili contraddistinti catastalmente al Foglio 6 Mappale 109, Foglio 9 Mappale 183 e lo smontaggio controllato e messa in sicurezza dell’immobile censito catastalmente al Foglio 9 Mappale 627;

Preso atto del nulla osta agli interventi progettuali dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche assunto al protocollo comunale n. 1042 del 02.02.2018 e n. 1453 del 16.02.2018;

Richiamati integralmente i seguenti atti:
-	Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 del 15.01.2018 con la quale è stato affidato l’incarico di Progettazione, Direzione Lavori, C.R.E. e perizie relative al livello di danno all’Arch. Enrico Frezzi e Direzione Lavori, C.R.E. ed il Coordinamento della Sicurezza all’Arch. Andrea Pierigè per la somma presunta di €.7.400,00 CNPAIA 4% e IVA 22% inclusi (CIG: Z862189579);

-	Determinazione del Responsabile del Servizio n.25 del 12.03.2018 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta EDILASFALTI S.r.l. con sede a Camerino (MC), per l’importo di €.40.034,34 oltre IVA del 10% per un totale di €.44.037,77;

Atteso che:
-	I lavori eseguiti sono relativi alla demolizione controllata di edifici privati e pubblici contraddistinti catastalmente al Foglio 6 Mappale 109 e Foglio 9 Mappale 183 e tramite smontaggio controllato dell’edificio privato individuato catastalmente al Foglio 9 Mappale 627, siti nel Comune di Muccia;
-	Che la sottoscrizione da parte del Professionista della Determina del Responsabile del Servizio n.5 del 15.01.2018, ha valore contrattuale;
-	Che la sottoscrizione da parte dell’impresa affidataria della Determina del Responsabile del Servizio n.25 del 12.03.2018, ha valore contrattuale;
-	In data 26.03.2018 sono iniziati i lavori come risulta da apposito Certificato;
-	I lavori sono stati ultimati in data 05.06.2018 come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori;
-	Il Direttore dei Lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:
1.	Comunicazione nuovo prezzo per lavorazioni da non eseguire;
2.	Certificato di pagamento lavori n.1;
3.	Certificato di pagamento spese tecniche n.1;
4.	Certificato di pagamento spese tecniche n.2;
5.	Certificato di regolare esecuzione;
6.	Relazione sul conto finale;
7.	Verbale di ultimazione dei lavori;
8.	Libretto delle misure fabbricato Fg.9 P.lla 183;
9.	Registro di contabilità Fg.9 P.lla 183;
10.	Stato finale dei lavori Fg.9 P.lla 183;
11.	Libretto delle misure Fg.9 P.lla 627;
12.	Registro di contabilità Fg.9 P.lla 627;
13.	Stato finale dei lavori Fg.9 P.lla 627;
14.	Libretto delle misure Fg.6 P.lla 109;
15.	Registro di contabilità Fg.6 P.lla 109;
16.	Stato finale dei lavori Fg.6 P.lla 109;
17.	Q.T.E. finale;

da cui si evince che:
-	I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 70,13%, e che pertanto risulta il credito dell’Impresa pari ad €.37.709,75 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €.41.480,73 per i lavori eseguiti;
-	Che l’importo da riconoscere al professionista incaricato per i servizi di progettazione, direzione lavori, C.R.E. e perizie relative al livello di danno, Arch. Enrico Frezzi è pari ad €.4.122,37 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per complessivi €.5.230,46;
-	Che l’importo da riconoscere al professionista incaricato per i servizi di Coordinatore per la sicurezza, Arch. Andrea Pierigè è pari ad €.1.374,12 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per complessivi €.1.743,48;

-	Che l’Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;

-	Che non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa esecutrice;

Precisato che a seguito dell’aggiudicazione e dell’ultimazione dei lavori, il Quadro Tecnico Economico risulta rimodulato come di seguito specificato:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. dopo l’APPALTO	Q.T.E. FINALE	
A.	Lavori				
Importo Lavori	€.117.477,88	€.117.477,88	€.109.869,73	
Di cui oneri per la sicurezza	€.7.049,34	€.7.049,34	€.6.975,14	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.110.428,54	€.110.428,54	€.102.894,59	
Ribasso 70,13%	---	-€.77.443,54	-€.72.159,98	
Sommano	---	€.32.985,00	€.30.734,61	
di cui oneri per sicurezza	---	€.7.049,34	€.6.975,14	
Sommano	€.117.477,88	€.40.034,34	€.37.709,75	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne				
IVA sui Lavori 10%	€.11.747,79	€.4.003,43	€.3.770,98	
Spese Tecniche	€.5.873,89	€.5.873,89	€.5.493,49	
CNPAIA 4%	€.234,96	€.234,96	€.219,74	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.343,95	€.1.343,95	€.1.256,91	
Imprevisti	€.5.873,89	€.5.873,89	-----------	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.349,56	€.2.349,56	€.2.197,39	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 70,13% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.85.187,90	€.94.253,66	
Sommano	€.27.424,04	€.104.867,58	€.107.192,17	
TOTALE	€.144.901,92	€.144.901,92	€.144.901,92	

-	Che la ditta EDILASFALTI S.r.l. ha presentato regolare Fattura n. 36 del 25.10.2018 dell’importo di €.37.709,75 oltre I.V.A. del 10% per un totale di €.41.480,73 relativa alle opere di Contratto;

-	Che l’Arch. Enrico FREZZI, progettista e direttore dei lavori incaricato ha presentato regolare Fattura n. 4/E del 25.10.2018 dell’importo di €.4.122,37 oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22% per un totale di €.5.230,46 relativa ai servizi svolti;

-	Che l’Arch. Andrea PIERIGE’, coordinatore della sicurezza incarica ha presentato regolare Fattura n. 4/E del 23.10.2018 dell’importo di €.1.374,12 oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22% per un totale di €.1.743,48 relativa ai servizi svolti;

Visto 
-	gli art.li 36, 125 del D.lgs. 50/2016;
-	il D.P.R. 207/210 per le parti ancora in vigore;
-	Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e ss.mm.ii.;
-	La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n.388/2016, 394/2016 e n.408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG:
-	Per la progettazione: Z862189579;
-	Per i lavori: 7401935DFB;

DETERMINA

1.	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto per l’importo netto di €.37.709,75 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €.41.480,73 in favore dell’impresa esecutrice e per i servizi di progettazione e direzione lavori per l’importo di €.5.493,49 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale di €.6.970,14;

3.	Di assestare il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE	
A.	Lavori		
Importo Lavori	€.109.869,73	
Di cui oneri per la sicurezza	€.6.975,14	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.102.894,59	
Ribasso 70,13%	-€.72.159,98	
Sommano	€.30.734,61	
di cui oneri per sicurezza	€.6.975,14	
Sommano	€.37.709,75	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne		
IVA sui Lavori 10%	€.3.770,98	
Spese Tecniche	€.5.493,49	
CNPAIA 4%	€.219,74	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.256,91	
Imprevisti 5%	----------	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€.2.197,39	
Sommano	€.12.938,51	
TOTALE	€.50.648,26	

4.	Di dare atto che alla liquidazione delle fatture indicate in premessa si procederà con successivi atti ad avvenuta approvazione della pratica di rendicontazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile Regione Marche;

5.	Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

6.	Di rendicontare la spesa come da indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n.388/2016, attraverso il Portale COHESIONWORKPA;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 26-10-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
(Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 26-10-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della  presente  deliberazione   viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente   nel   sito web   istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     27-10-2018                  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
 SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 26-10-2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)