COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.324

DETERMINAZIONE  NUMERO  134 DEL  13-07-2019

OGGETTO:	Lavori per la realizzazione di un "Marciapiede lungo la SS. 77, lato sinistro, dal Km. 46+500 al Km. 46+670". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. [CIG: 7907410927]	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	nelle date del 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l’intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
-	tali fenomeni hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale;

Visto l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio “Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni”;

Premesso che il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 6040 del 12.01.2019, assunta al protocollo comunale n. 272 del 12.01.2019, ha comunicato che era in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’avviso relativo al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriale del 10.01.2019 concernente “assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019.” In tale comunicazione veniva inoltre indicato che per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti veniva assegnato un contributo pari a €.40.000,00;

Preso atto della volontà espressa dall’Amministrazione di destinare il contributo sopracitato alla realizzazione di un tratto di marciapiede lungo al SS.77, in maniera tale da consentire un collegamento pedonale sicuro tra il centro abitato e l’area delle attività commerciali provvisorie, dando mandato all’Ufficio Tecnico comunale di redigere un apposito progetto;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 13.05.2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la SS.77, lato fiume, dal Km. 46+500 al Km. 46+670 nel Comune di Muccia” dell’importo complessivo di €.40.000,00 di cui €.32.054,63 per lavori compresi oneri della sicurezza e €.7.945,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Richiamata la Determinazione del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 93 del 14.05.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), sono stati affidati i lavori di cui trattasi all’impresa IMPERATORI MARCO con sede in Caldarola (MC), C.da Pittura del Grillo n.3 – P.IVA: 01633200439, che ha offerto un ribasso del 4,50%, ovvero per l’importo di €.30.645,44 oltre IVA di legge;

Premesso che:
-	in data 15 maggio 2019 il Direttore dei Lavori Geom. Marco Piccioni effettuava la consegna dei lavori come risulta da apposito verbale; il termine per l’ultimazione degli stessi era fissato a tutto il 15 agosto 2019;
-	i lavori non subirono nessuna sospensione e non vennero concesse proroghe al termine di ultimazione contrattuale;

	Dato atto che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune piccole modifiche al progetto, come meglio descritte e dettagliate nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Piccioni, circa la realizzazione di alcune opere resesi necessarie a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori che eleva l’importo contrattuale a €.35.716,87 (IVA esclusa e al netto del ribasso d’asta del 4,50%), con un aumento di €.5.071,43 pari a circa il 16,5% dell’importo contrattuale iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell’ufficio:
00)	Elenco elaborati
01)	Relazione illustrativa – Variante “Luglio 2019”
02)	Computo metrico estimativo – Variante “Luglio 2019”
03)	Elenco prezzi – Variante “Luglio 2019”
04)	Quadro tecnico economico – Variante “Luglio 2019”
05)	Schema atto di sottomissione – Variante “Luglio 2019”

Accertato che:
-	le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-	ai sensi del comma 7 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “…l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”, essendo la variazione in aumento pari al 16,5%

Preso atto che:
-	il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
-	l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l’impegno di ulteriori risorse economiche, rispetto al costo complessivo ammesso a finanziamento con Fondi del Ministero dell’Interno, Decreto del 10.01.2019;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dal titolare dell’impresa affidataria IMPERATORI MARCO e dal Sindaco pro-tempore del Comune di Muccia, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n.2 Nuovi Prezzi;

Dato atto:
-	che le maggiori spese per lavori a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell’ambito del quadro economico dell’opera così come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	Q.T.E. VARIANTE	
A.	Lavori				
Importo Lavori	€.32.054,63	€.32.054,63	€.37.369,66	
Di cui oneri per la sicurezza	€.739,33	€.739,33	€.641,09	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.31.315,30	€.31.315,30	€.36.728,57	
Ribasso 4,50%	---	-€.1.409,19	-€.1.652,79	
Sommano	€.31.315,30	€.29.906,11	€.35.075,78	
oneri per sicurezza	€.739,33	€.739,33	€.641,09	
Sommano	€.32.054,63	€.30.645,44	€.35.716,87	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne				
IVA sui Lavori 10%	€.3.205,46	€.3.065,54	€.3.571,69	
Imprevisti	€.4.098,82	€.4.098,82	-----------	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.641.09	€.641,09	€.711,44	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 4,50% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.1.549,11	----------	
Sommano	€.7.945,37	€.9.354,56	€.4.283,13	
TOTALE	€.40.000,00	€.40.000,00	€.40.000,00	

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:
-	Codice Unico di Progetto (CUP): E13J19000110001;
-	Codice CIG: 7907410927

Visti:
-	l’art. 106 del D. Lgs. n°50/2016;

-	lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità

-	il D. Lgs. n° 267/2000;

Accertato che l’impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 del 14.05.2019 offre idonea copertura finanziaria anche per la realizzazione dei lavori della perizia suppletiva e di variante;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di approvare:
-	la perizia di variante e suppletiva denominata “Luglio 2019” relativa ai lavori di “Realizzazione di un marciapiede lungo la SS.77, lato fiume, dal Km. 46+500 al Km. 46+670” nel Comune di Muccia, consistenti nella realizzazione di un parapetto/staccionata in legno con apposizione della rete elettrosaldata nel tratto iniziale del marciapiede, realizzazione di una rampa di collegamento, a norma disabili, alla fine del marciapiede e adeguamento delle tubazioni di scolo delle acque meteoriche, come meglio descritto negli elaborati progettuali di variante, dell’importo complessivo di €.37.369,66 per lavori e oneri della sicurezza;
-	l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n.2 prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’impresa appaltatrice e dal Sindaco pro-tempore;
-	il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra dell’importo totale di €.40.000,00;
3.	Di affidare all’impresa IMPERATORI MARCO con sede in Caldarola (MC), C.da Pittura del Grillo n.3, C.F./P.IVA: 01633200439, l’esecuzione dei lavori di variante per l’importo complessivo netto di €.5.071,43 oltre IVA di legge agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n.2 Nuovi Prezzi;
4.	Di dare atto che il perfezionamento contrattuale dei lavori supplementari sarà attuato mediante l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
5.	Di dare atto che alla liquidazione dei lavori di cui all’oggetto si provvederà con successivo e separato atto previa verifica della contabilità finale dei lavori, l’approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e di adeguata fatturazione elettronica;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 13-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to (Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 13-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to (Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     10-08-2019            per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to  SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 13-07-2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)