COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.238

DETERMINAZIONE  NUMERO  89 DEL  19-06-2018

OGGETTO:	SISMA 2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO SITO NEL COMUNE DI MUCCIA CENSITO CATASTALMENTE AL FG. 9 P.LLA 118 - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE [CUP: E14F17000000001 CIG: 7254954170]	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	nelle date del 24.08.2016, 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l’intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
-	tali fenomeni hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale;

Visto l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio “Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni”;

Preso atto che con nota della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0047429 è stata comunicata l’interruzione dei GTS (Gruppi Tecnici di Sostegno) a seguito delle sospensioni delle risorse straordinarie;

Visto il sopralluogo effettuato dal personale dell’U.T.C. presso l’immobile di proprietà privata (Fg.9 P.lla 118) situato nel Comune di Muccia prospicente la S.S. 77, dal quale è emerso che lo stesso si presenta notevolmente danneggiato a seguito degli eventi sismici e che arreca pericolo per la pubblica incolumità;

Richiamate 
-	la nota prot.6254 del 19.06.2017 con la quale questo Comune chiedeva alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, di esprimere un parere in merito agli interventi di messa in sicurezza (demolizione o puntellamenti) dell’immobile “Ex consorzio agrario”, in quanto ricadente nella fascia di rispetto fluviale e soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
-	nota pervenuta al protocollo comunale n. 7816 del 17.08.2017 con la quale la Soprintendenza escludeva la demolizione del fabbricato e ne prescriveva la messa in sicurezza atta a garantire la pubblica incolumità e la salvaguardia del bene;
-	la propria determinazione n.108 del 17.08.2017 con la quale veniva affidato all’Ing. Alessandra Carbonari l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di messa in sicurezza del corpo principale e la demolizione dei corpi di fabbrica secondari già in parte crollati;
-	la propria determinazione n.149 del 11.114.2017 con la quale venivano affidati i lavori di messa in sicurezza e demolizione dell’edificio di proprietà privata censito catastalmente al Fg.9 P.lla 118 denominato “Ex Consorzio Agrario” alla ditta Eugeni Pericle S.r.l., per l’importo netto contrattuale di €.107.151,13 oltre IVA di legge, sottoscritta dall’impresa affidataria come accettazione dell’incarico;

Richiamato il seguente Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	
A.	Lavori			
Importo Lavori	€.132.843,43	€.132.843,43	
Di cui oneri per la sicurezza	€.49.231,40	€.49.231,40	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.83.612,03	€.83.612,03	
Ribasso 30,728%	---	-€.25.692,30	
Sommano	€.83.612,03	€.57.919,73	
oneri per sicurezza	€.49.231,40	€.49.231,40	
Sommano	€.132.843,43	€.107.151,13	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne			
IVA sui Lavori 10%	€.13.284,34	€.10.715,11	
Spese Tecniche	€.6.642,17	€.6.642,17	
CNPAIA 4%	€.265,69	€.265,69	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.519,73	€.1.519,73	
Imprevisti 5%	€.6.642,17	€.6.642,17	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.656,87	€.2.656,87	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 30,728% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.28.261,53	
Sommano	€.31.010,97	€.56.703,27	
TOTALE	€.163.854,40	€.163.854,40	

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge redatto in data 13.11.2017;

Visto l’ulteriore parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot.n.22203 del 13.12.2017 assunto al protocollo comunale n.11588 del 14.12.2017 con il quale la stessa, prendendo atto dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del corpo principale, escludeva la demolizione degli annessi storici come previsto dal progetto esecutivo e ne prescriveva la messa in sicurezza;

Considerato che a seguito del parere sopracitato si è reso necessario procedere alla redazione di una Perizia di Variante che recepisse le prescrizioni espresse dalla Soprintendenza e conseguentemente alla sospensione dei lavori in oggetto;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandra Carbonari in data 14.12.2017;

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori che eleva l’importo contrattuale a €.133.122,82 (IVA esclusa e al netto del ribasso d’asta del 30,728%), con un aumento di €.25.971,69 pari a circa il 24,2% dell’importo contrattuale iniziale e costituita dai seguenti elaborati progettuali depositati agli atti dell’ufficio:
00)	Schema dell’atto di sottomissione;
01)	Relazione tecnica illustrativa di variante;
02)	Computo metrico estimativo di variante;
03)	Quadro di raffronto tra C.M.E. di progetto e C.M.E. di variante;
04)	Quadro tecnico economico di variante;
05)	Analisi dei costi nuovi prezzi;
06)	Piano di manutenzione_agg_1;
07)	Tav_3 Opere provvisionali – Particolari costruttivi – Delimitazione area di intervento – Punti di Presa Fotografica viste interne.

Accertato che:
-	le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-	ai sensi del comma 7 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “…l’aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale”, essendo la variazione in aumento pari a circa il 24%

Preso atto che:
-	il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Piccioni ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
-	l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere l’impegno di ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo ammesso a finanziamento del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche con nota prot.20147/21/12/2017/MARCHEUSR/USR del 21.12.2017;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dall’amministratore unico dall’impresa affidataria EUGENI PERICLE S.r.l., dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accertato il concordamento di n.18 Nuovi Prezzi e una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all’ultimazione dei lavori;

Dato atto:
-	che le maggiori spese per lavori a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell’ambito del quadro economico dell’opera così come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

Visto il nuovo quadro economico assestato della spesa è così suddiviso:

	Q.T.E. PROGETTO	Q.T.E. AGGIUDICAZIONE	Q.T.E. VARIANTE	
A.	Lavori				
Importo Lavori	€.132.843,43	€.132.843,43	€.164.770,10	
Di cui oneri per la sicurezza	€.49.231,40	€.49.231,40	€.61.778,43	
Importo Lavori soggetto a ribasso	€.83.612,03	€.83.612,03	€.102.991,67	
Ribasso 30,728%	---	-€.25.692,30	-€.31.647,28	
Sommano	€.83.612,03	€.57.919,73	€.71.344,39	
oneri per sicurezza	€.49.231,40	€.49.231,40	€.61.778,43	
Sommano	€.132.843,43	€.107.151,13	€.133.122,82	
B. Somme a Disposizione dell’Amm./ne				
IVA sui Lavori 10%	€.13.284,34	€.10.715,11	€.13.312,28	
Spese Tecniche	€.49.231,40	€.49.231,40	€.8.238,51	
CNPAIA 4%	€.265,69	€.265,69	€.329,54	
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA 22%	€.1.519,73	€.1.519,73	€.1.884,97	
Imprevisti 5%	€.6.642,17	€.6.642,17	-----------	
Accantonamento art.113 del D.Lgs. 50/2016 2%	€.2.656,87	€.2.656,87	€.3.295,40	
Economie derivanti dal Ribasso d’asta del 30,728% e dai lavori (iva inclusa)	---	€.28.261,53	€.3.670,88	
Sommano	€.31.010,97	€.56.703,27	€.30.731,58	
TOTALE	€.163.854,40	€.163.854,40	€.163.854,40	

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:
-	Codice Unico di Progetto (CUP): E14F17000000001;
-	Codice CIG: 7254954170

Visti:
-	l’art. 106 del D. Lgs. n°50/2016;

-	lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità

-	il D. Lgs. n° 267/2000;

Accertato che l’impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio n.149 del 11.11.2017 offre idonea copertura finanziaria anche per la realizzazione dei lavori di variante;

DETERMINA

1.	La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.	Di approvare:
-	la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di messa in sicurezza dei corpi secondari dell’ex-consorzio agrario Fg.9 P.lla 118, prospicente la S.S. 77, secondo quanto previsto nella nota della Soprintendenza del 13.12.2017, come meglio descritto negli elaborati progettuali di variante, dell’importo complessivo di €.164.770,10 per lavori e oneri della sicurezza;
-	l’atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n.18 prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall’impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal RUP;
-	il nuovo quadro tecnico economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra dell’importo totale di €.163.854,40;
3.	Di affidare all’impresa EUGENI PERICLE S.r.l. con sede a Matelica (MC), Piazza E. Mattei n.7, C.F./P.IVA: 013616360435, l’esecuzione dei lavori di perizia per l’importo complessivo di €.25.971,69 oltre IVA di legge agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n.18 Nuovi Prezzi e concedendo una proroga di 15 (quindici) giorni al termine di ultimazione dei lavori;
4.	Di dare atto che il perfezionamento contrattuale dei lavori supplementari sarà attuato mediante l’ordinazione degli stessi da parte del Direttore dei Lavori;
5.	Di dare atto che alla liquidazione dei lavori di cui all’oggetto si provvederà con successivo e separato atto previa verifica della contabilità finale dei lavori, l’approvazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e di adeguata fatturazione elettronica;

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 19-06-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
(Marco Piccioni)	

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 19-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(Mario Baroni)	

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della  presente  deliberazione   viene   pubblicata all’Albo Pretorio presente   nel   sito web   istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal     19-06-2018                  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

	F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
 SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 19-06-2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Marco Piccioni)