COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

***********

N. REG. GEN. 470

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

Numero  143   Del  27-09-18

0RIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA AVELLINO - APPROVA= 
ZIONE  SAL  N.1  E  LIQUIDAZIONE  FATTURA  -   CUP
	J73D17001050004 - CIG 7313251DA1

----------------------------------------------------------------------

Folignano (AP), lì 27-09-018

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA    

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
PREMESSO:
- che che con Delibera di G.M. 171 del 07/12/2017 è stato approvato il progetto DEFINITIVO, redatto dall'arch. Elisa Scalabroni unitamente all'arch. Marco Marozzi e all'ing. Jessica Ionni quali collaboratori,  tutti dipendenti dell'ufficio tecnico comunale, relativo al "Rifacimento dei marciapedi in via Avellino - Villa Pigna",  per l'importo totale di € 135.000,00 di cui   € 99´415,00  per lavori ed € 35´585,00 come da quadro economico di progetto;
- che con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 137 del 12/12/2017 REG GEN 459 è stata approvata la progettazione esecutiva e determinato a contrarre;
- che con Determinazione n.9 del 08/02/2018 (REG GEN 54) i lavori, a seguito di procedura negoziata,   sono stati  aggiudicati  all'Impresa EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via E. Montale n.12 -  P.IVA 01752240448, per il ribasso offerto del 25,000% e quindi per netti euro 75.097,43 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 2.144,71) oltre l'IVA (22%);
- che i lavori sono stati consegnati in data 26/03/2018 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n.108 del 09/07/2018 con la quale, per la sopravvenuta necessità di creare un parcheggio sulla porzione ad ovest di via Avellino per rispondere alle  esigenze dei cittadini della zona di aumentare le aree a parcheggio anche a servizio della adiacente area verde di cui i parcheggi ne sono una pertinenza, è stata approvata una perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016;

DATO ATTO :
- che a seguito della succitata modifica contrattuale l'importo totale del progetto è passato da € 135.000,00 ad € 155.000,00;
- che la somma necessaria alla copertura della variante è stata prevista all'interno del CAP. 2835/28 con apposita variazione di bilancio;
- che l'importo contrattuale (con applicazione del ribasso offerto in sede di gara e pari al 25,00%) è passato da € 75.097,43 ad € 107.859,34 con una differenza di € 32.761,91 contenuta nel 50% dell'importo originario ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lvo 50/2016;
- che per la somma dei lavori in variante è stato acquisito CIG aggiuntivo: 7562946479;
- che con Determinazione n.103 del 12/07/2018 (REG GEN 353) si è proceduto ad assumere relativoimpegno di spesa;
- che con propria determinazione n. 104 del 13/07/2018 (REG GEN 355) si è proceduto all'estensione dell'incarico per il coordinamento della sicurezza all'arch. Jacopo cellini in qualità di affidatario del servizio principale;
- che in data 31/07/2018 con REP 718 è stato sottoscritto atto aggiuntico con la ditta affidataria dell'appalto principale;

DATO ATTO che il direttore dei lavori, ing. Jessica Ionni dipendente dell'ufficio tecnico comunale, ha redatto lo Stato di Avanzamento n. 1 per Lavori effettuati a tutto il 03/09/2018 e pari ad € 55.139,12 al netto del ribasso d'asta;

VISTI i documenti contabili allegati al SAL n.1, in particolare: il Libretto delle misure, il Registro di Contabilità, lo Stato di Avanzamento dei lavori e il Certificato di Pagamento n.1 da cui risulta un credito della Ditta pari ad € 54.863,42 al netto del ribasso d'asta, della Ritenuta dello 0,5% e dell' Iva al 22%;

VISTA la fattura n. 25/PA del 21/09/2018 emessa dalla Ditta Ediltress SRL con sede a Monsampolo del tronto, via Manzoni n. 16 - P.Iva 01752240448 dell'importo totale di € 66.933,37 di cui € 54.863,42 imponibile ed  12.069,95 per IVA;

VERIFICATA la regolarità contributiva con  acquisizione di DURC Online prot. INPS_11448030 con validità fino al 13/11/2018;

RICHIAMATI:
- Il d.lvo 50/2016;
- Il Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di approvare  i documenti contabili relativi al SAL n.1 dei lavori relativi al "Rifacimento dei marciapdi in via Avellino - Loc. villa pigna" effettuati a tutto il 03/09/2018;

di procedere alla liquidazione della fattura n. 25/PA del 21/09/2018 emessa dalla Ditta  EDILTRES SRL con sede a Monsampolo del Tronto (AP) 63077, via Manzoni n. 16-  P.IVA 01752240448, con imputazione al CAP. 2835/28 IMP 470/2017  sub 1 del corrente bilancio di esercizio;

di dare atto che il CUP e CIG di riferimento sono i seguenti:
CUP  J73D17001050004 - CIG: 7313251DA1

- 

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 27-09-018

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Capriotti Marinella 

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA