COMUNE DI FOLIGNANO 
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.97 DEL 11-07-19

Folignano, li 15-07-19                                             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA DARI IN FO= 
                LIGNANO,  AMPLIAMENTO STRADALE E SISTEMAZIONE PAR=
                CHEGGIO  -  APPROVAZIONE  MODIFICHE CONTRATTO ART.
                106 COMMA 2 D.LVO 50/2016 - CUP: J79F18001040004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di luglio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

======================================================================

TERRANI MATTEO	Sindaco	P	
Dott. FLAIANI ANGELO	Vice Sindaco	P	
CASINI BRUNELLA	Assessore	P	
NEPI COSTANTINO	Assessore	P	
ACCORSI SERENA	Assessore	P	

======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume  la  presidenza il Signor TERRANI MATTEO in
qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

======================================================================
Soggetta a controllo      N             Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S             Soggetta a ratifica      N
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
======================================================================

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del III Settore, in qualità di responsabile del servizio LL.PP., e il Responsabile del VI Settore, in qualità di responsabile del servizio finanziario,  esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata 

Folignano li, 10/07/2019
Il Responsabile del III Settore                                                                              
 (arch. Francesca Romana Mancini)                                                     

Folignano li, 10/07/2019
Il Responsabile del VI Settore
(Marinella Capriotti)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Romana Mancini che integralmente si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATA la  proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore ;

VISTO il parere di Regolarità tecnica e contabile apposti sulla proposta rispettivamente dal responsabile del III e VI Settore;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lvo 50/2016 dando atto che la modifica non è riferibile ad errore progettuale ma ad intervenute esigenze dell'Amministrazione per il miglioramento funzionale dell'opera di cui non alterano la natura e l'impostazione generale;

RICHIAMATI:
-il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;

UNANIME DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE la Perizia di Variante relativa ai lavori di "Demolizione ex scuola elementare in piazza Dari, ampliamento stradale e sistemazione parcheggio" quale modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lvo 50/2016, perizia redatta ddall'ing. Francesco Trovarelli, costituita dagli eleborati elencati nel documento istruttorio e  per l'importo totale di € 270.000,00 di cui € 149.265,70 per importo lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 11.560,70, ed € 120.734,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

di DARE ATTO che la maggiore spesa contrattuale dei lavori  di € 12.588,50 oltre IVA nonchè la maggior spesa per spese tecniche pari ad € 2.383,06 (al netto del ribasso offerto) e oltre Iva e Cassa, trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera già finanziato al CAP.   2835/23 IMP 524/2018;

di  DARE ATTO che:                                                                                                                                   
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Folignano; 
- la modifica non è riferibile ad errore progettuale ma ad intervenute esigenze dell'Amministrazione per il miglioramento funzionale dell'opera di cui non alterano la natura e l'impostazione generale;
- la variazione rispetto all'importo contrattuale è pari al 9,49%,  non necessita di acquisizione di CIG aggiuntivo e, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016, l'esecuzione delle maggiori opere  può essere imposta all'impresa alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- viene concessa una proroga di n. 6 gg. per l'esecuzione delle opere previste in variante;
- il CUP  e il CIG sono i seguenti: CUP J79F18001040004 - CIG 7889008758

Data l'urgenza

UNANIME DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.Lvo 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
"""""
PREMESSO:
- che con propria determinazione n. 15 del 05/02/2019 si approvava il PROGETTO ESECUTIVO relativo ai “LAVORI DI DEMOLIZIONE EX SCUOLA  ELEMENTARE IN PIAZZA DARI, AMPLIAMENTO STRADALE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO” e si avviava una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori attribuendo alla S.U.A.P.A.P. Provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- che con con propria Determinazione n.82 del 26/04/2019, a seguito di gara esperita da parte della stazione unica appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace all’Impresa ISVA SRL con sede in Torino - P.Iva 06251140015, con il ribasso del 33,215%, pari ad un importo contrattuale di € 132.677,20 (di cui euro € 120.934,04 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 33,215% su € 181.079,64 ed € 11.743,16);
- che è stato acquisito il CIG derivato e che lo stesso risulta il seguente: 7889008758
- che con REP 269 in data 06/05/2019 è stato stipulato relativo contratto;
- che i lavori sono stati consegnati in data 06/05/2019 come risulta dal relativo verbale;

DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche progettuali finalizzate al miglioramento dell'opera della quale non vengono alterate la natura e l'impostazione generale. In generale le modfiche sono le seguenti:
- spostamento del muro in c.a. verso l'edificio scolastico al fine di un maggiore allargamento dell'incrosio tra via Santa Lucia e via Vie Vecchie e ampliamento stradale della via Vie Vecchie;
- ritombamento del canale di scolo rinvenuto sulla sede stradale di via Santa Lucia non visibile della fase di progettazione esecutiva;
- generale miglioramento sia funzionale che estetico della porzione residuale dell'edificio.
Quanto sopra è dettagliamente riportato nell'elaborato contenete la relazione generale di variante.

CONSIDERATO:
- che tale modifica rientra nei casi previsti dall’art. 106 comma 1 lett.2  che testualmente recita: " I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
    a) le soglie fissate all'articolo 35;
    b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni;
- che la Variante in oggetto non è stata determinata da errore progettuale ma da esigenze  richieste per il miglioramento dell'opera della quale non vengono alterate la natura e l'impostazione generale;

RITENUTO, che il caso di specie rientri nella condizione stabilita dalla normativa sopra richiamata   in quanto le modifiche non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto e la variazione del contratto rientra nel 15% del valore iniziale del contratto; 

DATO ATTO che  è stata richiesta disponibilità all'ing. Francesco Trovarelli, in qualità di redattore del progetto esecutivo, di redigere la variante in oggetto con imputazione della maggiore spesa necessaria per l'affidamento dell'incarico all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la Perizia di Variante redatta dall'ing. Francesco Trovarelli trasmessa con nota prto.n. 11082 del 08/07/2019 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- TAV. 3V - Stato riformato: piante, prospetti e sezioni;
- TAV. 4V - Planimetria interventi e particolari costruttivi;
- TAV. 5V - Carpenteria ed armatura muro in c.c.a.;
- Relazione di calcolo ed illustrativa, relazione sui materiali, relazione geotecnica e sulle fondazioni,
  tabulati di calcolo;
- Piano di manutenzione delle strutture;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro di raffronto;
- Schema di atto di sottomissione;
- Quadro economico;

VISTO il quadro economico di raffronto,  modificato successivamente alla trasmissione della variante per la correzione di errori materiali,  che di seguito si riporta:

DATO ATTO:
- che la maggiore spesa di € 12.588,50 oltre IVA necessaria per i lavori nonchè la maggior spesa per spese tecniche pari ad € 2.383,06  oltre Iva e Cassa, trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera già finanziato al CAP.   2835/23 IMP 524/2018;

DATO ATTO inoltre che:
- la variazione contrattuale è pari al 9,49% e pertanto può essere imposto all'impresa, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016, l'esecuzione delle maggiori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario;                                                                                          
- che il Resposnabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Folignano;

VISTA la completezza della documentazione della Perizia di Variante redatta nonchè la congruenza con la normativa vigente;

PROPONE il seguente dispositivo di deliberazione

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE la Perizia di Variante relativa ai lavori di "Demolizione ex scuola elementare in piazza Dari, ampliamento stradale e sistemazione parcheggio" quale modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lvo 50/2016, perizia redatta ddall'ing. Francesco Trovarelli, costituita dagli eleborati elencati nel documento istruttorio e  per l'importo totale di € 270.000,00 di cui € 149.265,70 per importo lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 11.560,70, ed € 120.734,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

di DARE ATTO che la maggiore spesa contrattuale dei lavori  di € 12.588,50 oltre IVA nonchè la maggior spesa per spese tecniche pari ad € 2.383,06 (al netto del ribasso offerto) e oltre Iva e Cassa, trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera già finanziato al CAP.   2835/23 IMP 524/2018;

di  DARE ATTO che:                                                                                                                                   
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Folignano; 
- la modifica non è riferibile ad errore progettuale ma ad intervenute esigenze dell'Amministrazione per il miglioramento funzionale dell'opera di cui non alterano la natura e l'impostazione generale;
- la variazione rispetto all'importo contrattuale è pari al 9,49%,  non necessita di acquisizione di CIG aggiuntivo e, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016, l'esecuzione delle maggiori opere  può essere imposta all'impresa alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- viene concessa una proroga di n. 6 gg. per l'esecuzione delle opere previste in variante;
- il CUP  e il CIG sono i seguenti: CUP J79F18001040004 - CIG 7889008758

Data l'urgenza
propone di deliberare 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.Lvo 267/2000.

Folignano, 10/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL III SETTORE
arch. Francesca Romana Mancini

"""""

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

  Il Presidente
f.to TERRANI MATTEO

Il Segretario comunale                  L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to Dott. FLAIANI ANGELO

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-07-19 e vi resterà fino al giorno 30-07-19 .

Folignano, li 15-07-19                      
  IL SEGRETARIO COMUNALE
    f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

======================================================================

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  26-07-019  ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li      
  IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

======================================================================
======================================================================