COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

***********

N. REG. GEN. 309

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

Numero  106   Del  28-05-19

0RIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI "AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO. REALIZZA= 
ZIONE  BLOCCO  N.  4". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER MODIFICA IN AUMENTO DEL CONTRATTO.

----------------------------------------------------------------------

Folignano (AP), lì 28-05-019

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA    

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il documento istruttorio redatto in data 27/05/2019 dal Responsabile del Procedimento geom. Massi Enrico che si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 74 del 24/05/2019, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, la modifica del contratto relativa ai lavori di ”AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO – REALIZZAZIONE BLOCCO N. 4”;

DATO ATTO che rispetto all’importo contrattuale originario, il maggior importo netto dei lavori è pari ad euro 20.780,22 oltre IVA (10%), per euro 2.078,02,  finanziato mediante parziale utilizzo del ribasso offerto in fase di gara;

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 22.858,24 IVA compresa, a favore della Ditta appaltatrice (Imp. 456 sub1) , previa riduzione  della stessa sull’Impegno principale di spesa n. 456 assunto in capo al CAP 2732;

RITENUTO altresì di dover procedere alla stipula dell’Atto di sottomissione  conseguente al maggior importo contrattuale, con la Ditta appaltatrice “Impresa Costruzioni Pubbliche SRL”;

RICHIAMATI:
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;

DETERMINA

di RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di RIDURRE di euro 22.858,24,  l’impegno di spesa n. 456 assunto in capo al CAP. 2732;

di INTEGRARE, di euro 22.858,24,  l’Impegno di spesa n. 456 sub 1 assunto in capo al CAP. 2732  a favore della Ditta “Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL”;
 
di PROCEDERE alla   stipula dell’Atto Aggiuntivo conseguente al maggior importo contrattuale di euro 20.780,22, con la Ditta appaltatrice “Impresa Costruzioni Pubbliche SRL”

di DARE ATTO che il CUP e CIG dell’opera pubblica sono i seguenti:
CUP J77B17000210004 – CIG 7614066E05

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO: 
- che con Delibera di G.M. n. 74 in data  24/05/2019, è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, la modifica del contratto relativa ai lavori di ”AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO - REALIZZAZIONE BLOCCO N. 4”, come da Perizia Tecnica di Variante redatta dal costituito Ufficio di Direzione Lavori;
- che rispetto al valore del contratto originario, il maggior importo netto di esso è aumentato  di euro 20.780,22 oltre IVA (10%), pari ad euro 2.078,02, cosi per complessivi euro 22.858,24,  finanziato mediante parziale utilizzo del ribasso offerto in fase di gara, allocato al CAP. 2732, Imp. n. 456;

RITENUTO che per il maggior importo contrattuale, IVA compresa, è necessario impegnare la somma di euro 22.858,24 a favore della Ditta appaltatrice e di dover procedere in tal senso previa riduzione dell’ Impegno principale (Imp. 456 CAP 2732)    e contestuale integrazione  di quello a favore della stessa Ditta (Imp. 456 sub. 1 CAP 2732);

PROPONE il seguente dispositivo di determinazione

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di RIDURRE di euro 22.858,24,  l’impegno di spesa n. 456 assunto in capo al CAP. 2732;

di INTEGRARE, di euro 22.858,24,  l’Impegno di spesa n. 456 sub 1 assunto in capo al CAP. 2732  a favore della Ditta “Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL”;

di PROCEDERE alla   la stipula dell’Atto Aggiuntivo conseguente al maggior importo contrattuale di euro 20.780,22, con la Ditta appaltatrice “Impresa Costruzioni Pubbliche SRL”;

di DARE ATTO che il CUP e CIG dell’opera pubblica sono i seguenti:
CUP J77B17000210004 – CIG 7614066E05

Folignano, il 27/05/2019
                                                                  Il Responsabile del procedimento
                                                                             geom. Enrico Massi

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 28-05-019

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Capriotti Marinella 

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA