COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

***********

N. REG. GEN. 665

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

Numero  193   Del  28-12-18

0RIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DA  REALIZZARSI IN ALCUNI LOCALI ADIBITI A 
SERVIZI  IGIENICI  PER  RIQUALIFICAZIONE  IGIENICO
FUNZIONALE  ASILO  NIDO  E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO
VERDE ANTISTANTE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVO=
----------------------------------------------------------------------

Folignano (AP), lì 28-12-018

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA    

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la  propria determinazione n.112 del 25/07/2018 (REG GEN 374) con la quale si procedeva all'aggiudicazione  dei lavori  "da realizzarsi in alcuni locali adibiti a Servizi igienici per riqualificazione igienico funzionale asilo nido" all'Impresa CIANNAVEI SRL- con sede ad ascoli Piceno - Via dell'Aspo n.50 - P.IVA 00427600440,  per l'importo contrattuale di di € 17.149,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 750,00 oltre l'IVA (22%);

DATO ATTO che con REP n.726 del 07/12/2018 si procedeva alla sottoscrizione del contratto nella forma di  scrittura privata;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è constatato che risultano necessari alcuni lavori non ricompresi nel computo metrico dei lavori approvati ma necessari al fine del miglioramento dell'impianto da realizzare e della migliore riqualificazione dei servizi igienici. In particolare le lavorazioni consistono in:
- Allaccio di una unità interna prevista in progetto ma per la quale non era stato previsto l'allaccio;
- Eliminazione completa delle muffe presenti al fine di rendere la superficie trattata più idonea alla messa in opera del materiale isolante.
- Smontaggio e rimontaggio di n.2 palfoniere;
- Realizzazione di canale a sezione rettangolare a copertura delle tubazioni origianariamente lasciate a faccia vista;

DATO ATTO che i succitati lavori, così come  dettagliatamente riportati nella lista dei lavori in economia, ammontano ad   € 1442,56 (al netto del ribasso offerto in sede di gara) oltre Iva al 22% per un totale di € 1.759,92 e che detto importo trova copertura all'interno del quadro economico del progetto attingendo dalla somma relativa dal ribasso d'asta;

RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa in considerazione della capienza della somma all'interno del quadro economico dell'opera;

VISTI:
- il D.Leg.vo 18/08/2000, N.267;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010;
DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI PROCEDERE sub impegno della somma totale di € 1.759,92 al  CAP.2900/00 IMP 365/2018 a favore della Ditta CIANNAVEI SRL- con sede ad ascoli Piceno - Via dell'Aspo n.50 - P.IVA 00427600440 per i lavori in economia ricompresi nel quadro economico dei lavori "da realizzarsi in alcuni locali adibiti a Servizi igienici per riqualificazione igienico funzionale asilo nido";

DI DARE ATTO che il CIG e CUP sono i seguenti:
CUP: J76C18000100002 - CIG:Z532686280

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 28-12-018

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Capriotti Marinella 

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA