COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

***********

N. REG. GEN. 317

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

Numero  109   Del  03-06-19

0RIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI  AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO - REA= 
LIZZAZIONE  BLOCCO N. 4. APPROVAZIONE 1^ SAL E LI=
QUIDAZIONE DELLA FATTURA CORRISPONDENTE.

----------------------------------------------------------------------

Folignano (AP), lì 03-06-019

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA    

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

VISTO il documento istruttorio che di seguito si riporta, redatto in data 31/05/2019 dal Responsabile del Procedimento geom. Massi Enrico, relativo all’ approvazione del Primo Stato di Avanzamento per Lavori eseguiti a tutto il 28 /05/2019 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Marco Marozzi dell’Ufficio Tecnico Comunale;
 
VISTO il d.Lgs n. 50/2016 e sue mm. e ii;

VISTO il  d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 2 del 15/02/2018;

RICHIAMATO l’art. 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto, 

DETERMINA

di RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

di APPROVARE il 1^ SAL (completo di tutta la documentazione contabile e descritta nel documento istruttorio), per lavori effettuati a tutto il 28/05/2019, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori netti per euro 199.434,31 ed un credito dell’Impresa, al netto delle ritenute infortuni e recupero di parte dell’anticipazione, pari ad euro 161.096,87 oltre IVA (10%) di euro 16.109,69, così per complessivi euro 177.206,56;

di LIQUIDARE, alla Ditta "Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL" (P.I. 01564370672) con sede in Montorio al Vomano (TE), in riferimento all’Imp. n. 456 sub.1, assunto al CAP. 2732 del corrente bilancio e a fronte della fattura elettronica presentata n. 14/P del 30/05/2019, la complessiva somma di euro 177.206,56 di cui quanti ad euro 161.096,87 quale importo netto dei lavori e quanti ad euro 16.109,69 quale importo I.V.A. (10%);

CUP: J77B17000210004 – CIG: 7614066E05 

**********

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:
- che con Determinazione n. 311 RS del 01/08/2018 (662/RG) del Dirigente del Settore Organi Istituzionali - AA.GG - Contratti della Provincia di Fermo, si è dato atto che l'aggiudicazione sottoscritta con propria determinazione n. 299 (R.G. 639) del 26/07/2018 a favore della Ditta "Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL" con sede in Montorio al Vomano (TE) P.I. 01564370672,  è  divenuta efficace a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica sui requisiti generali dichiarati in sede di partecipazione, come da comunicazione pervenuta;
- che con determinazione n. 141 (R.G. n. 462)  in data 21/09/2018 del Responsabile III Settore, preso atto di quanto sopra, venne assunto a favore della citata  Ditta, l’Impegno di spesa n. 456 sub. 1 al CAP. 2732 dell’importo complessivo di euro 335.167,11 comprensivo dei lavori contrattuali (euro 304.697,37 al netto del ribasso d’asta pari al 22,118%, compresi oneri sicurezza per euro 7.965,51) e di I.V.A. (euro 30.469,74 pari 10% dell’importo di contratto);
- che in data 24/10/2018, rep. n. 264,  è stato stipulato il contratto di appalto, reg.to in Ascoli Piceno il giorno 12/11/2018, al n. 4366 serie IT;
- che i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto effettivo inizio in data  05/11/2018, come da verbale agli atti;
- che con delibera di G.M. n. 74  del 24/05/2019 è stata approvata la perizia tecnica di variante, in aumento, redatta dall’Ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.Lgs 50/2016, comportante il maggior importo netto di euro 20.780,22;  

Rammentato che ai sensi dell’art. 2.16, del Capitolato Speciale di Appalto, “l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00”;

Dato atto:
- che in data 28/05/2019 è stato redatto il 1^ S.A.L., completo del Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori e sommario del Registro di Contabilità, a firma del  Direttore dei Lavori arch. Marco Marozzi coadiuvato dall’ing. Jessica Ionni e arch. Elisa Scalabroni quali direttori operativi e dal quale  risulta che l’Impresa, ha eseguito lavori netti, a tutto il 28/05/2019, pari ad euro 199.434,31; 
- che il credito dell’Impresa, al netto delle ritenute infortuni e recupero di parte dell’anticipazione, é pari ad euro 161.096,87, oltre IVA (10%) di euro 16.109,69,  come da Certificato di Pagamento n. 1 rilasciato da questo RUP in data 28/05/2019;

Vista la fattura elettronica n. 14/P del 30/05/2019 presentata dalla Ditta "Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL", assunta al protocollo comunale al n. 8686 in data 30/05/2019;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta con validità  11/07/2019 come da DURC on-line visionato;

VISTO il d.Lgs n. 50/2016 e sue mm. e ii;

VISTO il  d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 2 del 15/02/2018;

RICHIAMATO l’art. 2.16 del Capitolato Speciale di Appalto, 

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DETERMINAZIONE

di RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

di APPROVARE il 1^ SAL (completo di tutta la documentazione contabile e descritta nel documento istruttorio), per lavori effettuati a tutto il 28/05/2019, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori netti per euro 199.434,31 ed un credito dell’Impresa, al netto delle ritenute infortuni e recupero di parte dell’anticipazione, pari ad euro 161.096,87 oltre IVA (10%) di euro 16.109,69, così per complessivi euro 177.206,56;

di LIQUIDARE, alla Ditta "Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari SRL" (P.I. 01564370672) con sede in Montorio al Vomano (TE), in riferimento all’Imp. n. 456 sub.1, assunto al CAP. 2732 del corrente bilancio e a fronte della fattura elettronica presentata n. 14/P del 30/05/2019 , la complessiva somma di euro 177.206,56 di cui quanti ad euro 161.096,87 quale importo netto dei lavori e quanti ad euro 16.109,69 quale importo I.V.A. (10%).

CUP: J77B17000210004 – CIG: 7614066E05 

Folignano, il  31/05/2019
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Enrico Massi
				
													“”””””

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 03-06-019

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Capriotti Marinella 

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA