COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

***********

N. REG. GEN. 369

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -

Numero  127   Del  27-06-19

0RIGINALE

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI  MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DI  STRADE E AREE PUBBLICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER LAVORI DI SECONDA MODIFICA.

----------------------------------------------------------------------

Folignano (AP), lì 27-06-019

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA    

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il documento istruttorio 27/06/2019 redatto dal Responsabile del Procedimento geom. Massi Enrico che si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATI:
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;

DETERMINA

di RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di  IMPEGNARE al CAP 2917/13 la somma di euro 6.500,00;

di SUB IMPEGNARE, sull’Impegno assunto,  la somma di euro 6.302,06, IVA compresa, a favore della Ditta appaltatrice; 

di PROCEDERE alla   la stipula  dell’Atto di Sottomissione conseguente al maggior importo contrattuale di euro 5.165,62, con la Ditta appaltatrice “ASFALTRONTO SRL”;

di DARE ATTO che il CUP e i CIG dell’opera pubblica sono i seguenti:
CUP J77H19000550005 – CIG 7885487DB7 

 “””””””

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:
- che con delibera di G.M. n. 74 del 24/05/2019, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, è stata approvata una prima modifica del contratto (REP 745 del 24/06/2019) relativa ai lavori di ”MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E AREE PUBBLICHE”; 
- che con delibera di G.M. n. 92 del 27/06/2019, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016, è stata approvata una seconda modifica; 
- che rispetto al valore contrattuale originario (euro 57.363,90), il maggior importo netto complessivo dei lavori, pari ad euro 24.293,16 (di cui quanti ad euro 19.127,54 riferito alla modifica precedente e quanti ad euro 5.165,62 riferito alla seconda modifica), non eccede il 50% di quello iniziale;
- che la modifica di cui alla seconda perizia di importo pari ad euro 105.000,00, comporta una maggiore spesa, rispetto a quella del progetto originario (euro 98.500,00), di euro 6.500,00 finanziata attingendo al CAP 2917/13 del corrente anno finanziario;

RAMMENTATO:
- che il progetto originario, per il complessivo importo di euro 98.500,00 allocato nel bilancio comunale al CAP 2835/42 (Impegno principale n. 215/2019), è finanziato per euro 70.000,00 con contributo statale (comma 107 art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio) e per euro 28.500,00 con fondi comunali;

RITENUTO:
- di dover impegnare al CAP 2917/13 la somma di euro 6.500,00;
- di dover sub impegnare, sull’Impegno assunto,  la somma di euro 6.302,06, IVA compresa, a favore della Ditta appaltatrice; 

RITENUTO altresì di dover procedere alla  stipula dell’Atto di Sottomissione conseguente al maggior importo contrattuale di euro 5.165,62, con la Ditta appaltatrice “ASFALTRONTO SRL”;

Il sottoscritto RUP, PROPONE il seguente dispositivo di determinazione

di RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di  IMPEGNARE al CAP 2917/13 la somma di euro 6.500,00;

di SUB IMPEGNARE, sull’Impegno assunto,  la somma di euro 6.302,06, IVA compresa, a favore della Ditta appaltatrice; 

di PROCEDERE alla   la stipula  dell’Atto di Sottomissione conseguente al maggior importo contrattuale di euro 5.165,62, con la Ditta appaltatrice “ASFALTRONTO SRL”;

di DARE ATTO che il CUP e i CIG dell’opera pubblica sono i seguenti:
CUP J77H19000550005 – CIG 7885487DB7 

Folignano, il 27/06/2019
                                                                  Il Responsabile del procedimento
                                                                             geom. Enrico Massi

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 27-06-019

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Capriotti Marinella 

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA