COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LL.PP.

Numero 94   DEL  16-06-2017                Reg.Gen. n.228

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto:	CICLOVIA  DELLA  COSTA PICENA. COMPLETAMENTO PISTA
		CICLO-PEDONALE  CENTRO CITTADINO - LUNGOMARE NORD.
		APPROVAZIONE  STATO FINALE, RELAZIONE AL CONTO FI=
		NALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.					

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Richiamate
-	la deliberazione di G.C. n. 176 del 30-09-2013 del Comune di San Benedetto del Tronto, dichiarata immediatamente eseguibile;

-	la deliberazione di G.C. n. 166 del 10-09-2013 del Comune di Grottammare, dichiarata immediatamente eseguibile;

-	la deliberazione di G.C. n. 93 del 27-09-2013 del Comune di Cupra Marittima, dichiarata immediatamente eseguibile;

con le quali è stato approvato lo schema di accordo per lo svolgimento, in collaborazione tra i richiamati Comuni, delle attività per la partecipazione, con il progetto Ciclovia Costa Picena, al bando relativo al Piano nazionale sicurezza stradale (PNSS) – 4° e 5° programma di attuazione;

   Dato atto che: 
-	è stato sottoscritto l’accordo tra le amministrazioni comunali di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima con il quale le medesime si sono impegnate a presentare in maniera congiunta il progetto Ciclovia Costa Picena per partecipare al bando “Piano Nazionale Sicurezza stradale - 4° e 5° Programma. Bando per l’accesso ai cofinanziamenti per interventi di sicurezza stradale”, pubblicato sul Bur n. 35 della Regione Marche in data 15 maggio 2013;
-	con Decreto del dirigente della P.F. Viabilità Regionale e Gestione del trasporto n. 114/TPL del 15-05-2014 sono state approvate le graduatorie di merito, assegnando alla proposta congiunta presentata il finanziamento richiesto del 45% dell’importo complessivo;

	In data 13-04-2015 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Marche e l’Amministrazione proponente (Comune di San Benedetto del Tronto in rappresentanza del raggruppamento di Amministrazioni Comunali) per l’attuazione del progetto Ciclovia Picena, il cui costo complessivo della proposta unitaria è pari a € 889.000,00 così articolata:
o	Comune di San Benedetto del Tronto € 330.000,00;
o	Comune di Grottammare € 330.000,00;
o	Comune di Cupra Marittima € 229.000,00;

	Con delibera di G.C. n. 93 del 27.09.13 è stato approvato il progetto preliminare per il completamento della pista ciclabile nel centro cittadino – lungomare nord, redatto dall’ing. Pietro Montenovo;

	Con determinazione del servizio LL.PP. n. 110 del 05.10.15 sono stati affidati gli incarichi professionali all’arch. Massimo Sciarra per quanto concerne il supporto alla progettazione architettonica, all’ing. Angelo Massi quale responsabile della sicurezza in fase di realizzazione dell’opera e all’ARCH. Gianni Prete quale direttore operativo;

	Con delibera di G.C. n. 83 del 08.10.15, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di che trattasi, redatto dall’ing. Pietro Montenovo coadiuvato dall’arch. Massimo Sciarra;

	Dal quadro economico dell’intervento si evince la spesa necessaria per la realizzazione dell’opera pari ad € 229.000,00 di cui € 165.930,09 per lavori comprensivi di € 2.025,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 63.069,91 per somme a disposizione dell’amm.ne com.le, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori	€ 184.141,70	
Oneri sicurezza	€ 2.025,56	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 182.116,14	
Ribasso d’ufficio del 10%	€ 18.211,61	
Importo lavori a base di gara	€ 163.904,53	
Oneri sicurezza	€ 2.025,56	
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 165.930,09	
Somme a disposizione dell’amm.ne com.le		
IVA 10%	€ 16.593,01	
Spese tecniche progettazione def./esec.	€ 13.509,24	
Spese tecniche coord. sicurezza in esec.	€   5.620,42	
Spese tecniche direttore operativo 	€   3.147,16	
Contributi previdenziali su spese tecniche	€      891,07	
Iva 22% su spese tecniche  e contributi	€   5.096,94	
Incentivo progettazione	€   3.682,83	
Imprevisti e lavori in economia	€ 14.529,24	
Totale somme a disposizione	€   63.069,91	
TOTALE GENERALE	€ 229.000,00	
	
	Il progetto da realizzare consiste essenzialmente nel completamento della pista ciclabile esistente in prossimità del parco padre Erminio Martelli, ovvero nel tratto compreso tra la “lega navale” e la concessione demaniale “il gabbiano”, mediante la predisposizione del terreno, la realizzazione di un massetto per la predisposizione dei sottoservizi e la successiva finitura con calcestruzzo architettonico e cordoli in travertino;

Con determinazione del servizio LL.PP. n. 142 del 28.12.2015 è stata avviata la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo/esecutivo denominato “ciclovia della costa picena, completamento pista ciclo pedonale centro cittadino – lungomare nord”, approvato con DGC n. 83 del 08.10.2015. È stata inoltre affidato alla SUA, Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di che trattasi, in forza della convenzione sottoscritta in data 17.04.2015;

	Con nota prot. n. 7633 del 04/03/2016, assunta a prot. n. 2284 in data 07/03/2016 la SUA, Provincia di Fermo ha trasmesso la determinazione n. 111 del 04/03/2016 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori in argomento alla ditta S.G.C. Società Generale Costruzioni e Impianti Srl, con sede in Campofilone (FM) alla via Marina, 58, p.i. 03776390639;

	Con nota prot. n. 2808 del 17.03.16, la SUA della provincia di Fermo ha trasmesso la determinazione n. 135 del 17.03.16, con la quale è stata rettificata l’aliquota del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta S.G.C. SRL, pari al 7,45%;

	Con determinazione del servizio LL.PP.n. 8 del 21.03.16 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di che trattasi alla ditta S.G.C. Società Generale Costruzioni e Impianti Srl, con sede in Campofilone (FM) alla via Marina, 58, p.i. 03776390639, per un prezzo di € 151.717,30 + € 2.025,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso = € 153.742,86, oltre ad IVA 10%; 

	In data 21.03.16, n. 2918 di protocollo, è stato redatto il “verbale di consegna dei lavori”, dal direttore dei lavori è l’impresa appaltatrice;

	Con determinazione del servizio LL.PP. n. 16 del 07.04.16 è stato liquidato il primo acconto delle competenze professionali ai tecnici incaricati;

	Con determinazione del servizio LL.PP. n. 29 del 05.05.16 è stato approvato lo schema di contratto relativo all’appalto di che trattasi;

	Con determinazione del servizio LL.PP. n. 31 del 15.05.16 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 46.933,30 relativa al primo stato di avanzamento dei lavori e determinata con certificato di pagamento n. 1, oltre che è stata liquidata la somma di € 7.877,43 per lavori in economia;

	In data 28 maggio 2016, i lavori di che trattasi vennero sospesi a causa delle condizioni metereologiche avverse, come si evince dal medesimo verbale;

	In data 27 giugno 2016, i lavori vennero ripresi, per essere di nuovo sospesi con verbale del 12 luglio 2016, per l’arrivo della stagione estiva;

	Con determinazione del servizio LL.PP. n. 58 del 12.07.16 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 65.832,87 oltre ad IVA, relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori e determinata con certificato di pagamento n. 2, oltre che sono state liquidate il secondo acconto delle competenze tecniche; 	

	In data 12.07.16, il direttore dei lavori, ing. Pietro Montenovo ha sospeso i lavori come si evince dal verbale in pari data, a causa dell’inizio della stagione balneare. 

	Durante il corso delle lavorazioni, si sono rese necessarie delle lievi modifiche alle lavorazioni appaltate, finalizzate comunque al miglioramento della funzionalità dell’opera nel suo complesso, senza comportare modifiche sostanziali all’impostazione progettuale iniziale;

	In particolare, tali variazioni, si sono rese necessarie per risolvere aspetti di dettaglio o per risolvere circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, pur non modificando la spesa complessiva dell’intervento;

	Con determinazione del servizio LL.PP. n. 112 del 21.10/2016 è stata approvata la prima perizia di variante tecnica suppletiva, ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, prevedente un spesa complessiva di € 229.000,00, di cui € 167.409,95 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 61.590,05 per somme a disposizione dell’amm.ne com.le come risulta dal seguente prospetto:

Lavori	€ 192.436,16	
Oneri sicurezza	€ 2.025,56	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 190.410,60	
Ribasso d’ufficio del 10%	€ 19.041,06	
Importo lavori a base di gara	€ 171.369,54	
Ribasso offerto del 7,45%	€ 12.767,03	
Importo di variante	€ 158.602,51	

Oneri sicurezza	€ 2.025,56	
IMPORTO LAVORI IN VARIANTE	€ 160.628,07	
Somme a disposizione dell’amm.ne com.le		
IVA 10%	€ 16.062,81	
Inc. art. 92 D.Lgs. 163/06	€   3.848,72	
Spese tecniche progettazione def./esec.	€ 14.843,68	
Spese tecniche coord. sicurezza in esec.	€   6.175,61	
Spese tecniche direttore operativo 	€   3.458,04	
Iva 22% su spese tecniche  e contributi	€   5.600,41	
Lavori in economia ripristino sede ciclabile	€   8.738,40	
Lista in economia del 01.05.16	€ 8.665,17	
Totale somme a disposizione	€   68.371,93	
TOTALE GENERALE	€ 229.000,00	

	Come si evince dal quadro di raffronto della perizia di variante, l’importo contrattuale verrà elevato da € 165.930,09 ad € 160.628,07, e pertanto lo stesso è contenuto entro il cinque per cento dell’originario importo, ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;

	In particolare, tale perizia di variante ha riguardato i seguenti aspetti di dettaglio:
•	Realizzazione di impianto idrico per irrigazione del verde pubblico esistente lungo il percorso ciclo-pedonale.
•	Lavori stradali di completamento; ripresa delle superfici asfaltate adiacenti al progettato tracciato ciclopedonale
•	Cordolo di confine est; lastra di travertino fissata su cordolo in conglomerato cementizio armato.
•	Fondazione confine est; fondazione rinforzata completamente ipogea di protezione sul lato est per il tratto centrale di ml 60, costituita da scapoli di pietrame e massi naturali di I categoria.
•	Sede ciclo-pedonale; tracciato realizzato pavimentazione a basso impatto ambientale (conglomerato bituminoso) fino allo spazio pavimentato esistente a ovest.
•	Impianti; sistemazione dell’area di deflusso a mare della tubazione Ø600 che attraversa la sede della pista ciclo-pedonale, relativa agli scarichi della acque meteoriche provenienti dai tombini ferroviari situati a ovest del tracciato stesso.
•	Lavori stradali di completamento; realizzazione e integrazione all’interno della sede ciclo-pedonale di rampa di accesso all’area di alaggio della L.N.I. e ripresa delle superfici asfaltate adiacenti al tracciato ciclo-pedonale.

	Il giorno 26/12.2016, il direttore dei lavori ha rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, nonché lo Stato Finale dei lavori di che trattasi;

	Dallo Stato finale, si evince che la ditta esecutrice ha eseguito lavori per un totale di € 160.628,81 oltre ad IVA, al netto del ribasso offerto;

	Dalla Relazione al Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione, si evince che i lavori contrattuali sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della direzione dei lavori, pertanto nulla osta alla liquidazione del saldo vantato dalla ditta appaltatrice, ammontante ad € 19.974,61 oltre ad IVA 10%;

	Durante il corso dei lavori, è stato eseguito un intervento in economia per il ripristino della sede ciclabile nei tratti ammalorati, come previsto nel quadro economico dell’intervento, come si evince dalla lista in economia per una spesa di € 7.944,00 oltre ad IVA 10%;

	Alla luce della sopraelencata documentazione, nulla osta alla liquidazione dei seguenti crediti:
Impresa S.G.C. srl – Stato Finale - € 19.974,61 + € 1.997,46 = € 21.972,07;
Impresa S.G.C. srl – Lavori sistemazioni stradali - € 7.944,00 + € 794,40 per IVA 10% = € 8.738,40;
Arch. Massimo Sciarra – Saldo progettazione - € 3.997,43 + € 879,43 per IVA 22% = € 4.876,86;
Ing. Angelo Massi – Saldo coordinamento sicurezza - € 2.678,63 + € 589,30 = € 3.267,93;
Arch. Gianni Prete – Saldo direzione operativa - € 1.632,54 + € 359,16 per IVA 22% = € 1.991,70;

	In ottemperanza al disposto di cui all’art.11, comma 5, del vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.;

	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare, lo Stato finale dei lavori di completamento della pista ciclo-pedonale nel centro cittadino – Lungomare nord, dal quale si evince che la ditta esecutrice ha eseguito lavori per un totale di € 160.628,81 oltre ad IVA, al netto del ribasso offerto;

Di approvare la Relazione al Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione, dai quali si evince che i lavori contrattuali sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della direzione dei lavori, pertanto nulla osta alla liquidazione del saldo vantato dalla ditta appaltatrice, ammontante ad € 19.974,61 oltre ad IVA 10%;

Di approvare la lista in economia per sistemazioni stradali ammalorate, già previsto nel quadro economico dell’intervento, per una spesa di € 7.944,00 oltre ad IVA 10%;

Di dare atto che possono essere liquidati i seguenti crediti:
Impresa S.G.C. srl – Stato Finale - € 19.974,61 + € 1.997,46 = € 21.972,07;
Impresa S.G.C. srl – Lavori sistemazioni stradali - € 7.944,00 + € 794,40 per IVA 10% = € 8.738,40;
Arch. Massimo Sciarra – Saldo progettazione - € 3.997,43 + € 879,43 per IVA 22% = € 4.876,86;
Ing. Angelo Massi – Saldo coordinamento sicurezza - € 2.678,63 + € 589,30 = € 3.267,93;
Arch. Gianni Prete – Saldo direzione operativa - € 1.632,54 + € 359,16 per IVA 22% = € 1.991,70;

Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 229.000,00 trova la necessaria copertura finanziaria al cap. 873/5, codice di bilancio 2090101, ed è finanziata in quanto ad € 103.050,00 mediante contributo regionale ed in quanto ad € 125.950,00 mediante mutuo contratto con la cassa depositi e prestiti; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ING. PIETRO MONTENOVO	

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario,  a norma dell’art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000
APPONE IL PROPRIO VISTO
relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 03-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA	

	VISTO DI COMPATIBILITA’  MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 			         
RILASCIA
il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 

Data: 03-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA	

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li,  07-07-2017       
                                                                                       
	L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
                    F.to Maurizio Virgulti
IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to DOTT. ALFONSO SALVATO	

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2017 al 22-07-2017  n.____________ del registro albo pretorio, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza municipale, li 

       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
	  F.to Maurizio Virgulti
IL SEGRETARIO COMUNALE	
F.to DOTT. ALFONSO SALVATO	

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ING. PIETRO MONTENOVO