AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 32 DEL  01-02-2019

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli. Lavori aggijuntivi urgenti disposti con Ordinanza Sindacale n° 9 del 30.01.2018  e completamento. Variante Determinazioni
Atteso che , esperite procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Ufficio LL.PP. Gregori , l’impresa Minicucci Cairo sta iniziando i lavori di “Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli- CIG 71680741CB”;
Che il medesimo R.U.T. ha comunicato in data 13.01.2018 Prot 315 alla Ditta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori D’Amato, la necessità di verificare le condizioni della frana stessa , a seguito di segnalazione da parte di cittadini ;
Che il D.L. stesso in data 18.01.2017 via PEC , rimetteva anche allo scrivente una relazione in cui denotava l’ampliarsi della corona di frana a danno della già ristretta sede stradale, e quindi lo stato di pericolo in cui versava la carreggiata, oltre alla necessità , per eseguire i lavori , di effettuare, a causa della necessità di ricostruire adeguato piano di stazionamento per la macchina trivellatrice, di chiudere al transito il tratto interessato dai lavori, per almeno 45 giorni lavorativi;
•	Vista l’Ordinanza n° 9 del 30.01.2018, nella quale lo scrivente disponeva :
<< All’impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. , con sede in Antrodoco, Via del Castello 30, di effettuare immediatamente e comunque entro gg. 3 dal ricevimento della presente notificata via PEC , i lavori di cui alla narrativa , consistenti nell’ulteriore restringimento, verso valle, della carreggiata , da effettuarsi mediante apposizione di rete di ad alta visibilità fissata con picchetti , e nell’allargamento temporaneo verso monte della sede stradale stessa , previa costituzione di adeguato sottofondo>>
Dato atto che i lavori furono tempestivamente effettuati, e che la strada venne mantenuta in esercizio grazie ai medesimi;
Atteso che , successivamente , è stato realizzato ed ultimato l’intervento di realizzazione della parete palificata di contenimento della strada a valle;

Vista e richiamata la Determinazione nà 201 del 24.05.2018, ove si prendeva atto ed approvava in,linea tecnica la perizia di variante richiesta dal D.L. per situazioni impreviste ed imprevedibili dallo stesso D.L. certificate ;

Dato atto che la perizia medesima venne inoltrata dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento alla Regione Lazio, Ente finanziatore , al fine di verificare l’assenso dell’Ente stesso rispetto all’utilizzo delle economie di gara per finanziare i maggiorii oneri ;

Atteso che la Regione Lazio , a mezzo nota REGISTRO UFFICIALE.U.0531894.04-09-2018, ha comunicato l’assenso all’utilizzo delle somme;

Preso atto come nella perizia di variante stessa, fossero previsti €. 5.869,65 Iva compresa per lavori in economia da valutare a consuntivo;

Vista la Determinazione n°  406 in data odierna, recante definitiva approvazione della perizia e rideterminazione degli impegni di spesa sul capitolo 2552 del Bilancio;

Atteso che ivi vengono imputate , ferma restando la spesa complessiva di e. 110.000,00 corrispondente a quanto finanziato dalla Regione , €. 6.392,83 per lavori in economia;

Vista la direttiva sindacale del 9.11.2018 prot. 9883 , ove , tra l’altro<< si dispone che , oltre alla contabilizzazione dei lavori effettuati dall’impresa Marinelli di cui all’Ordinanza in oggetto, si dispone che vengano eseguiti, a garanzia della manutenibilità della strada e del ripristino delle proprietà private su cui è stato operato l’allargamento temporaneo della carreggiata, necessario  a garantire il transito , i lavori di ripristino che debbono comprendere , se vi sono economie tra le somme a disposizione del finanziamento regionale, anche un cordolo di altezza non superiore a cm. 50 sul lato verso monte della carreggiata>>

Vista la Determinazione n° 407 del 09.11.2018, con la quale : a) si determinava la contabilità dei lavori effettuati in adempimento dell’Ordinanza Sindacale n° 9/2018. da parte della ditta Marinelli Costruzioni srl, nella somma di €.  1.914,64 oltre IVA al 22%; b) si affidava , in esecuzione della direttiva sindacale n° 9883 del 9.11.2018, l’esecuzione dei lavori di completamento , per importo di €. 3.325,38 oltre IVA al 22%, alla ditta Marinelli Costruzioni srl già destinataria dell’Ordinanza 9/2018;

Dato atto che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è accertato che lo scopo di assicurare la manutenibilità e la sicurezza della circolazione , rendeva necessario l’allungamento a ml. 36,00 del cordolo di cinta della carreggiata stradale ;

Dato atto che lo scrivente ha ordinato in corso di esecuzione alla ditta di apportare la variazione predetta oltre ad altre ,anche in riduzione , che sono dettagliate nella tabella comparativa che segue :

Atteso che vi è una maggiore spesa di netti €. 1.114,32 , che ammontano, considerata l’Iva al 22% , a complessivi €. 1.359,37 ;

Ritenuto impegnare detta somma di €. 1.359,37 sul capitolo 2546-2 RR.PP. ;

Dato atto che le modifiche introdotte sono state concordate per le brevi con il D.L. D’Amato;

Dato atto  che il completamento della pavimentazione , previsto in computo, non è stato ancora realizzato, causa le basse temperature, e che lo stesso verrà realizzato non appena vi saranno le condizioni di fattibilità, presumibilmente entro il 28.02.2019;

DETERMINA
1.	DI APPROVARE COME APPROVA LA VARIAZIONE AI LAVORI, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE NELL’ESTENSIONE FINO ALLA LUNGHEZZA DI ML. 36,00 , DEL CORDOLO DI CINTA DELLA CARREGGIATA STRADALE , E NELLE ALTRE VARIAZIONI DISTINTE NELLA TABELLA COMPARATIVA DI CUI ALLA TABELLA CHE SEGUE :

2.	DI IMPEGNARE LA SOMMA AGGIUNTIVA DI €. 1.359,37 SUL CAPITOLO 2546-2 RR.PP. ;
3.	DI STABILIRE CHE ALLA LIQUIDAZIONE SI PROVVEDERA’ CON ATTO SUCCESSIVO APPENA ESEGUITI I LAVORI DI BITUMATURA;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-02-2019  R.A. n°  137 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-02-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-02-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori