AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 378 DEL  19-10-2018

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n° 68 del 10.07.2018. Demolizione edificio Fg. 25 p.lla 746/parte in esecuzione prescrizioni G.T.S. del 27.04.2018. Variazioni in corso d'opera. Approvazione ed adeguamebnto impegno di spesa cap. 1735 Bilancio. CIG Z0924A38F9
Atteso che , a seguito di richiesta del Sindaco prot.n. 3996 del 18/04/2018 , inerente , tra gli altri,i resti di un edificio in frazione Rocca di Fondi, Fg. 25 p.lla 746/parte, il Coordinamento Operativo Intercomunale Unico di Protezione Civile (d’ora in avanti in breve COI), ha convocato il GTS per la data del 27.04.2018;
Dato atto che sul’edificio di cui alla p.lla  746/parte  è stata prescritta la demolizione delle murature rimanenti, in quanto lo stesso versa in condizioni di particolare degrado con caduta di pietrame sulla pubblica via; 
Visto e richiamato il verbale GTS del 27.04.2018;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 68 del 10.07.2018, indirizzata all’impresa Boccacci Federico , con la quale veniva disposta , in esecuzione del detto verbale, la Gregori la demolizione integrale dei resti dell’edificio citato in narrativa , comprensiva del carico e trasporto a discarica autorizzata delle macerie e dei materiali rinvenuti sull’area , secondo le prescrizioni di legge , e dei lavori di finitura per ripristinare le condizioni di ordinario decoro e salubrità dei luoghi, sulla base dell’allegato computo metrico;
Visto il Computo Metrico allegato all’Ordinanza , redatto sulla base dei vigenti Tariffari , con particolare riferimento a quello commissariale per la Ricostruzione e quello della regione Lazio per oo.pp. anno 2012 , dal quale si evince che la spesa  al netto del ribasso del 20% previsto dall’art. 163 del D.lgs. 50/2016, per i due interventi, che denota una spesa complessiva , compresi gli oneri , le imposte e gli accantonamenti obbligatori di € 18.951,14, , comprensiva di accantonamenti obbligatori ed imposte, di cui € 14.335,20  per soli lavori e oneri di sicurezza , detratto il ribasso del 20% previsto dall’art. 163 de D.Lgs. 50/2016
Atteso che, al fine di eseguire i lavori , è stata incaricata un’impresa qualificata , e che è stata individuata la ditta Boccacci Federico, P.IVA 00721760577 , Codice Fiscale BCCFRC68M10A345L, Via Monte Giano 1, Antrodoco. la quale risulta in possesso dei mezzi e della qualificazione adatta ad eseguire le opere , di importo largamente inferiore a €. 40.000,00, ed è allibrata tra quelle iscritte all’Anagrafe Antimafia degli esecutori tenuta presso la Struttura di  Missione di Contrasto Antimafia del Ministero degli Interni , la quale è disponibile ad eseguirli con urgenza e sotto la sorveglianza del personale dell’Ufficio tecnico ;
Atteso che il Sindaco dichiara in Ordinanza come la stessa Circolare UC/TERAG/47429 prevede la rimborsabilità da parte del Soggetto Attuatore Sisma 2016 , delle spese per lo svolgimento delle attività previste, secondo le modalità previste dalla circolare UC/TERAG/44398 del 013.09.2016  e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Determinazione n° 276 del 10.08.2010, recante approvazione e impegno di spesa;
Vista l’allegata relazione dell’istruttore De Santis , e computo metrico , dalla quale si evince che si sono rese necessarie lavorazioni aggiuntive relative alla messa in sicurezza della parti di muratura rimaste dopo le demolizioni, e nella demolizione selettiva di parti degli edifici circostanti , oltre ad aggiustamenti contabili ed all’inserimento della transennatura  di Via della Chiesa disposta con altra Ordinanza Sindacale;
Atteso che l’importo di affidamento, inizialmente previsto in €. 14.335,20 oltre Iva , diviene pari a €. 18.508,99 , detratto il ribasso art. 163 D.Lgs. 50/2016, ed al netto di IVA , essendo le maggiori opere pari  a 4.173,79 oltre Iva al 22% al netto del ribasso;
Ritenuto integrare kl’impegno di spesa di cui alla Determinazione n° 276/2018, per €. 5.008,55
Ritenuto approvare la la relazione allegata ;
Dato atto che i lavori sono in corso di ultimazione;

DETERMINA

1.	di prendere atto della relazione del geom. De Santis allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2.	di integrare l’impegno di spesa assunto con Determinazione n° 276/2018, impegnando sul capitolo 1735 Bilancio 2018, la somma di €. 5.008,55 , a favore della ditta Boccacci Federico, P.IVA 00721760577 , Codice Fiscale BCCFRC68M10A345L, Via Monte Giano 1, Antrodoco;
3.	di demandare la liquidazione a successivo atto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-12-2018  R.A. n°  899 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-12-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-12-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori