AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 478 DEL  13-12-2018

OGGETTO: Gara CIG 71680741CB. Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli. Variante in c.o. .Impegno di spesa
Visto il Decreto Sindacale n° 27 del 16.10.2017, recante attribuzione allo scrivente Geom. Giuseppe Gregori, della Responsabilità dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Antrodoco ;
Atteso che , con precedenti attività , l’Arch. Mauro La Pietra , Responsabile Ufficio Tecnico comunale , aveva , con le premesse appresso riportate, attivato la fase di progettazione dell’intervento in oggetto ;
Dato atto che lo scrivente è subentrato all’architetto LA Pietra nei ruoli attinenti programmazione, ed progettazione e esecuzione  LL.PP.;
Visti e richiamati i seguenti atti, emessi o richiamati nei provvedimenti a firma dal precedente Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. , Arch. La Pietra, rispetto ai quali lo scrivente non è tenuto ad entrare nel merito;
Dato atto  che , con la propria Determinazione n° 258 del 01.09.2017 , l’Arch. La Pietra , secondo le premesse riportate nel virgolettato di cui sopra , approvò il verbale di gara e determinò l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Minicucci Cairo;
Vista la Determinazione dello scrivente Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. Geom. Giuseppe Gregori , n° 130 del 12.12.2017, con la quale , esperite le attività inerenti la verifica dei requisiti soggettivi, venne approvata la graduatoria di gara e pronunciata l’aggiudicazione definitiva in capo a Minicucci Cairo srl , per il ribasso offerto del 31,07% a fronte dell’importo a base di gara di €. 56.749,00 , oltre oneri attuazione Piani di sicurezza per e. 6.049,00 , e dunque per l’importo contrattuale al netto di tali oneri di €. 45.166,08 ;
Visto il verbale di consegna dei lavori del  19.12.2017;
Visto il contratto con scrittura privata del 06.02.2018;
Atteso che con opportuna corrispondenza da parte del Direttore dei Lavori a mezzo PEC in data 24.05.2018,è stata, in ragione , come attestato dal medesimo, dell’accentuarsi del movimento franoso e della difficoltà di procedere in sicurezza con i lavori di trivellazione della palificata trasmessa la proposta di variante in corso d’opera  per la realizzazione dei lavori , finalizzata ad effettuarli in esatta conformità con il progetto approvato per qaunto attiene alle opere di difesa della carreggiata (palificata stradale identica al progetto iniziale) e con alcune variazioni di cantierizzazione, attraverso le quali era possibile , secondo il D.L. , realizzare i lavori in totale sicurezza e evitando la chiusura della strada in oggetto;
Vista la Determinazione n° 201 del 24.05.2018, con la quale lo scrivente prendeva atto della variante stessa;
Dato atto che la variante determinava un incremento di spesa da €. 45.166,09  a €. 58.200,78 , oltre Iva al 22% per complessivi €. 71.004,25;
Vista la nota Regione Lazio Registro Ufficiale 531894 del 04.09.2018 , con la quale in relazione alla variante stessa , si autorizza l’utilizzo delle economie di gara al fine di finanziare i maggiori lavori ;
Tao atto che anche le spese tecniche presentano un incremento a €. 15.437,50 a €. 21.028,68 oltre imposte, per complessivi €. 26.681,19. e quindi è necessario integrare l’impegno di €. 19.587,10 ,per la maggior somma di €. 7.094,09;
Ritenuto pertanto essendo intervenuta l’approvazione regionale , sub impegnare le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori  e per  le spese tecniche sul capitolo 2552 del Bilancio Comunale ;
Ritenuto pertanto sub impegnare :
•	sul capitolo 2552 impegno 312/2016 sub 3  €. 71.004,25 a favore dell’impresa Minicucci Cairo srl, per  “Esecuzione lavori di consolidamento della strada comunale Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli”;
•	sul capitolo 2552 impegno 312/2016 sub 4  €. 3.886,99 a favore della società Furmin srl per “Progettazione variante c.o.” ;
DETERMINA

1.	preso atto dell’approvazione regionale del 04.09.2018 sulla proposta di variante , di impegnare  le seguenti somme sul capitolo 2552 del Bilancio Comunale :
•	sul capitolo 2552 impegno 312/2016 sub 3  €. 71.004,25 a favore dell’impresa Minicucci Cairo srl, per  “Esecuzione lavori di consolidamento della strada comunale Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli”;
•	sul capitolo 2552 impegno 312/2016 sub 4  €. 3.886,99 a favore della società Furmin srl per “Progettazione variante c.o.” ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 14-02-2019  R.A. n°  146 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 14-02-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 14-02-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori