AREA TECNICA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 198 DEL  07-06-2017

OGGETTO: approvazione rendicontazione finale dei lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Elementare Carlo Cesi" ai sensi della D.G.R. 42/2015. Intervento IN 392. CUP I84H16000480002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta di contributo prot. 2822 del 23/4/2015 per l’attuazione del programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi della D.G.R. 42/2015;
DATO ATTO che la predetta richiesta di contributo era finalizzata principalmente alla messa in sicurezza del solaio del refettorio della Scuola Elementare di Antrodoco, zona sensibile dell’edificio dove, per la funzione che ricopre, si concentrano nell’ora dei pasti tutti gli alunni ed il corpo insegnante;
VISTO il quadro tecnico economico allegato alla predetta richiesta di contributo:
A)	LAVORI	
A1)	IMPORTO LAVORI:	€ 35.500,00	
A2)	di cui oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.065,00	
A3)	importo totale lavori a base di gara A1)-A2)	€ 34.435,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	imprevisti IVA inclusa:	€ 561,00	
B2)	spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L. e Coordinamento per la sicurezza:	€ 5.000,00	
B3)	spese tecniche per collaudo statico, prove di laboratorio e di carico oneri e cassa compresi	€ 4.000,00	
B4)	cassa di previdenza 4% su B2)	€ 200,00	
B5)	IVA 22% su spese tecniche e cassa:	€ 1.144,00	
B6)	IVA 10% sui lavori:	€ 3.550,00	
B7)	Accantonamento art. 92 D.lgs 163/2006: (2% su A1)	€ 710,00	
B8)	Totale somme a disposizione:	€ 15.165,00	
Importo totale generale di progetto:	€ 50.665,00	

VISTA la nota avanzata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Infrastrutture Sociali prot. 587557/03/50 del 30/10/2015, assunta al protocollo comunale in data 2/11/2015 al numero 8181 di protocollo, con la quale la Regione Lazio ha comunicato che con Determinazione n° G11932 del 5/10/2015 è stato formalmente concesso il finanziamento in conto capitale a favore del Comune per l’importo di 50.665,00 € ai sensi della D.G.R. 42/2015;
DATO ATTO che le erogazioni del finanziamento avverranno secondo le disposizioni della Determinazione Regionale n° G01299 del 13/2/2015 come segue:
•	5% all’atto della Determinazione di concessione formale del finanziamento;
•	erogazioni successive nei limiti stabiliti dalla L.R. 88/1980, tenendo conto della ripartizione finanziaria delle risorse disponibili negli esercizi finanziari 2016/2017 e comunque all’effettiva realizzazione della relativa fonte di finanziamento.
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n° 18 del 23/1/2016 con cui è stato affidato l’incarico professionale per la per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e esecuzione di n° 1 prova di carico sul solaio oggetto di interventi, finanziati ai sensi della D.G.R. 42/2015 all’Ing. Francesco Alonzi, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rieti con il n° A- 648 e con studio sito nel Comune di Rieti in Via Luigi Cipriani n° 258/F;
VISTA la trasmissione in data 25/1/2016 – prot. 554 da parte del predetto professionista del progetto definitivo per lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Elementare Carlo Cesi - risanamento e messa in sicurezza del solaio del refettorio”;
RICHIAMATA la D.G.M. n° 7 del 27/1/2016 con cui è stata approvata la progettazione definitiva dell’intervento secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza ed IVA con aliquota 10%	 €        36.190,39 	
A.2)	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	 €          1.460,63 	
A.3)	Totale lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: A1)+A2)	 €        37.651,02 	
A) TOTALE IMPORTO LAVORI 	 €     37.651,02 	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Spese tecniche per Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza ed esecuzione di prove diagnostiche	 €          7.100,00 	
B.2)	Incentivo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006 (2% su A)	 €             753,02 	
B.3)	Oneri previdenziali professionali con aliquota 4% su voce B1)	 €             284,00 	
B.4)	IVA 10% sui lavori: 10% A)	 €          3.765,10 	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	 €          1.111,86 	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 €     13.013,98 	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO A)+B)	
 	 €     50.665,00 	
DATO ATTO che con nota prot. 683 del 27/1/2016 è stato richiesto visto di rispondenza all’ente finanziatore alle finalità della D.G.R. 42/2015;
DATO ATTO che è stato acquisito il visto di rispondenza prot. 271372/03/50 del 23/5/2015 da parte della Regione Lazio con contestuale rimodulazione d’ufficio del quadro economico come segue:
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza ed IVA con aliquota 10%	 €        36.190,39 	
A.2)	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	 €          1.460,63 	
A.3)	Totale lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: A1)+A2)	 €        37.651,02 	
A) TOTALE IMPORTO LAVORI 	 €     37.651,02 	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Spese tecniche per Progettazione, Direzione dei Lavori  e Coordinamento per la Sicurezza	 €          5.647,65 	
B.2)	Incentivo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006 (2% su A)	 €             753,02 	
B.3)	Oneri previdenziali professionali con aliquota 4% su voce B1)	 €             225,91 	
B.4)	IVA 10% sui lavori: 10% A)	 €          3.765,10 	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	 €          1.111,86 	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 €     11.503,54 	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO A)+B)	
 	 €     49.154,56 	

CONSIDERATO che la rimodulazione effettuata d’ufficio, che assume pertanto valore di Quadro Tecnico Economico esecutivo, ha riguardato esclusivamente le spese tecniche eccedenti la misura del 15% dell’importo lavori a base d’asta, senza alterazione delle somme per l’esecuzione delle lavorazioni, degli oneri per la sicurezza e degli imprevisti;
RICHIAMATA la Determina n° 232 del 5/7/2016 con cui è stata rettificata la Determina di affidamento professionale n° 18 del 23/1/2016 stralciando l’incarico per l’esecuzione di prove diagnostiche sul solaio oggetto di interventi e rimodulando, al contempo, l’importo dell’incarico stesso coerentemente alle risultanze espresse dalla Regione Lazio nel proprio visto di rispondenza, per l’importo di 5.873,56 € comprensivo di cassa professionale con aliquota 4%;
VISTA la trasmissione in data 19/7/2016 – prot. 6081 da parte del professionista incaricato con la predetta Determina n° 232/2016 del progetto esecutivo dei lavori;
VISTA la trasmissione di documentazione integrativa da parte del progettista in data 25/07/2016 – prot. 6238 relativa all’Allegato n° 8 – Piano di Manutenzione;
RICHIAMATA la D.G.M. n° 95 del 27/7/2016 con cui è stata approvata la progettazione esecutiva dell’intervento secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza ed IVA con aliquota 10%	 €        36.190,39 	
A.2)	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	 €          1.460,63 	
A.3)	Totale lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: A1)+A2)	 €        37.651,02 	
A) TOTALE IMPORTO LAVORI 	 €     37.651,02 	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Spese tecniche per Progettazione, Direzione dei Lavori  e Coordinamento per la Sicurezza	 €          5.647,65 	
B.2)	Incentivo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006 (2% su A)	 €             753,02 	
B.3)	Oneri previdenziali professionali con aliquota 4% su voce B1)	 €             225,91 	
B.4)	IVA 10% sui lavori: 10% A)	 €          3.765,10 	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	 €          1.111,86 	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 €     11.503,54 	
TOTALE IMPORTO INTERVENTO A)+B)	
 	 €     49.154,56 	

RICHIAMATA la Determina n° 323 del 5/10/2016 con cui i lavori sono stati affidati, secondo la procedura di cui all’art. 32 – comma 14 del D.lgs 50/2016, alla Società Marinelli Costruzioni S.R.L. con sede in Antrodoco (RI) - Via del Castello n° 30 – C.F. e P.IVA 00626760573 per un importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a € 36.919,97 € oltre IVA con aliquota 10%, corrispondente ad un importo lordo di 40.611,97 €;
DATO ATTO che con il medesimo dispositivo è stato rimodulato d’ufficio il quadro tecnico economico approvato con D.G.M. n° 95 del 27/7/2016 a seguito del predetto affidamento come segue:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza ed IVA con aliquota 10%	 €        36'190,39 	
A.2)	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	 €          1'460,63 	
A.3)	Ribasso di gara: 2,02 % su A.1)	 €             731,05 	
A.4)	Importo lavori rimodulato post affidamento: A.1) - A.3)	 €        35'459,34 	
A) IMPORTO CONTRATTUALE:  A.2) + A.4)	 €     36'919,97 	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Spese tecniche per Progettazione, Direzione dei Lavori  e Coordinamento per la Sicurezza	 €          5'647,65 	
B.2)	Incentivo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006 (2% su 37.651,02 €)	 €             753,02 	
B.3)	Oneri previdenziali professionali con aliquota 4% su voce B1)	 €             225,91 	
B.4)	IVA 10% sui lavori: 10% A)	 €          3'692,00 	
B.5)	Imprevisti comprensivi di IVA	 €          1'111,86 	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 €     11'430,43 	
C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO: A) + B) 	 €     48'350,41 	
D) ECONOMIE POST AFFIDAMENTO IVA COMPRESA 	 €           804,15 	
E) TOTALE GENERALE = IMPORTO FINANZIATO: C) + D) 	 €     49'154,56 	

RICHIAMATA la scrittura privata regolante l’appalto del 12/10/2016;
DATO ATTO che con nota assunta al protocollo comunale in data 29/11/2016 – prot. 10251 il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di variante di dettaglio ai sensi dell’art. 149 - comma 1 del D.lgs 50/2016 finalizzata ad incrementare, rispetto al progetto esecutivo approvato con D.G.M. n° 95 del 27/7/2016, la porzione di solaio da sottoporre a risanamento conservativo, senza aumento del costo complessivo dei lavori approvati e al fine di contribuire alla messa in sicurezza della Scuola Elementare alla luce dei noti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia;
VISTO il parere favorevole alla redazione della perizia di variante resa dal R.U.P. in data 6/12/2016 - prot. 10492;
VISTA la trasmissione in data 9/12/2016 - prot. 10615 da parte del direttore dei lavori della perizia di variante ai lavori approvati con D.G.M. n° 95 del 27/7/2016, sottoscritta dall’Impresa esecutrice;
RICHIAMATA la Determina n° 403 del 12/12/2016 con cui è stata approvata la predetta variante di dettaglio senza aumento di spesa dell’opera;
VISTA la trasmissione in data 3/1/2017 – prot. 91 da parte del Direttore dei Lavori del certificato di ultimazione delle opere alla data del 27/12/2016 sottoscritto senza riserve dall’Impresa esecutrice;
DATO ATTO che i lavori, in relazione alle sospensioni e riprese resesi necessarie a causa delle verifiche post sisma sull’edificio scolastico oggetto di interventi, sono stati ultimate nel pieno rispetto del termine contrattuale indicato nella scrittura privata del 12/10/2016;
VISTA la trasmissione in data 9/2/2017 – prot. 1505 da parte del Direttore dei Lavori degli atti di contabilità finale, sottoscritti senza riserve dall’Impresa Appaltatrice, e del certificato di regolare esecuzione;
RICHIAMATA la Determina n° 55 del 1/3/2017 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori e rimodulato contestualmente il quadro economico come segue:
A)	LAVORI	
A.1)	Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza ed IVA con aliquota 10%	 €        35.700,96 	
A.2)	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	 €          1.214,03 	
A) IMPORTO LAVORI DA STATO FINALE COMPRESA SICUREZZA:  A.1) + A.2)	 €     36.914,99 	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1)	Spese tecniche per Progettazione, Direzione dei Lavori  e Coordinamento per la Sicurezza	 €          5.647,65 	
B.2)	Incentivo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006 (2% su A)	 €             738,30 	
B.3)	Oneri previdenziali professionali con aliquota 4% su voce B1)	 €             225,91 	
B.4)	IVA 10% sui lavori: 10% A)	 €          3.691,50 	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	 €     10.303,35 	
C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO: A) + B) 	 €     47.218,34 	
D)  IMPORTO FINANZIATO: C) + D) 	 €     49.154,56 	
E) ECONOMIE COMPLESSIVE IVA COMPRESA (ribasso d'asta, stato finale e imprevisti): D) - C) 	 €       1.936,22 	

VISTA la trasmissione in data10/4/2017 – prot. 3939 da parte dell’Impresa esecutrice Marinelli Costruzioni S.R.L della fattura elettronica n° 10/PA del 7/4/2017 dell’importo di 36.914,99 € oltre IVA con aliquota 10%;
VISTO il Provvedimento di liquidazione n° 75 del 11/4/2017 con cui è stata liquidata a favore dell’Impresa esecutrice la somma, comprensiva di IVA con aliquota 10%, di 40.606,49 € a titolo di saldo dei lavori;
VISTA la trasmissione in data 8/5/2017 – prot. 4786 da parte del professionista Ing. Francesco Alonzi della fattura elettronica n° 1/PA del 8/5/2017 dell’importo di 5.873,56 € comprensivo di cassa professionale con aliquota 4%, unitamente alla dichiarazione sullo status di libero professionista in assenza di dipendenti e del regime fiscale c.d. forfettario;
VISTO il Provvedimento di liquidazione n° 95 del 10/5/2017 con cui è stata liquidata a favore del professionista incaricato la somma complessiva di 5.873,56 € a titolo di saldo degli oneri professionali per progettazione e direzione dei lavori;
VISTA la Determina n° 192 del 31/5/2017 con cui è stata impegnata la somma complessiva di 406,06 € a titolo di fondo incentivante ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui liquidata a favore del RUP la somma di 324,85 € e accantonata la somma di 81,22 €;
VISTA la Determina n° 193 del 31/5/2017 con cui è stata impegnata la somma complessiva di 332,24 € a titolo di fondo incentivante ai sensi per collaboratore al RUP dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, di liquidata a favore del collaboratore la somma di 265,79 € e accantonata la somma di 66,45 €;
VISTO il D.lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento Comunale di ripartizione del fondo incentivante:
DETERMINA
1.	di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per la progettazione, esecuzione, direzione lavori e fondo incentivante dei lavori di "messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Elementare Carlo Cesi” ai sensi della D.G.R. 42/2015 - Intervento IN 392 è pari a 47.218,35 €;
2.	di dare atto che, a fronte del finanziamento concesso di 49.154,56 €, risulta un’economia complessiva di 1.936,21 €.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  ARCH. Mauro La Pietra -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 07-06-2017  R.A. n°  507 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 07-06-2017

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 07-06-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	ARCH. Mauro La Pietra