AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 387 DEL  06-11-2019

OGGETTO: rettifica Determina n° 338 del 24/9/2019. Lavori di disostruzione e regimazione di scolo idrico in Fraz. Rocca di Corno al fine della tutela di abitazioni private. C.I.G. Z7129E082B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che all’altezza del Km 10+200 della S.S. 17 Appulo-Sannitico in Fraz. Rocca di Corno è presente uno scolo idrico che termina, mediante tombino di raccolta, sulla Strada Statale in direzione Antrodoco;
CONSIDERATO che tale tracciato, riportato nella mappe catastali come “acque”, produce in concomitanza di importanti eventi metereologici il riversamento sul piano viabile di detriti che possono pregiudicare la sicurezza dei veicoli in transito;
ATTESO che, stante la competenza in materia di acque pubbliche in capo alla Provincia ai sensi della L.R. L.R. 53/98, risulta necessario provvedere con urgenza alla disostruzione del tracciato terminale al fine di eliminare i disagi per le abitazioni private limitrofe allo stesso;
CONSIDERATO che, a seguito di sopralluogo congiunto con personale ANAS e Provincia, emerge la necessità di eseguire il taglio e sfalcio della vegetazione infestante all’interno del pozzetto di raccolta ed il ripristino delle condizioni ottimali di regimazione idrica verso questo;
RICHIAMATA la Determina n° 338 del 24/9/2019 con cui venne incaricata la Ditta Individuale “Legnami di Perotti Giampiero” con sede in Rieti – Via Colle Paradiso n° 28 – P.IVA 01186420574 – C.F. PRTGPR79P17H282C dell’esecuzione dei predetti lavori;
DATO ATTO che con il medesimo dispositivo venne costituito l’impegno di spesa n° 307 del 1/10/2019 sul capitolo n° 2905 - c.b. 08.01-2.02.01.09.999 di importo pari a 1.000,40 € (820,00 € a titolo di imponibile oltre 180,40 € per IVA con aliquota 225);
ATTESO che, stante innumerevoli solleciti verbali, i lavori non hanno avuto inizio;
CONSIDERATO che con nota prot. 9154 del 2/11/2019 lo scrivente emetteva nei confronti dell’affidatario specifico preavviso di revoca dell’affidamento dando come termine ultimo per l’avvio dei lavori il giorno 6/11/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione dell’intervento sopra descritto al fine di evitare possibili riversamenti sul piano viabile della S.S. 17 di detriti provenienti dallo scolo, anche in considerazione delle condizioni metereologiche avverse che caratterizzano il territorio;
CONSIDERATO, altresì, che le problematiche inerenti la circolazione stradale limitrofa all’area oggetto di interventi sono monitorate dalla Prefettura di Rieti che con cadenza periodica richiede lo stato di attuazione degli interventi mitigativi delle stesse;
DATO ATTO che alla data del 6/11/2019 l’impresa affidataria non ha avviato i lavori e che pertanto ricorrono i presupposti per la revoca dell’incarico dovendo, al contempo, provvedere all’individuazione di nuovo operatore economico;
SENTITA per le vie brevi la Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900– C.F. e P.IVA 00919170571 resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni indicate nella Determina n° 338 del 24/9/2019;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Soc. Cricchi Costruzioni SRL attraverso il servizio Durc on line avente protocollo INAIL_17334702 e scadenza 6/11/2019;
 VISTA l’indifferibilità e l’urgenza di eseguire i predetti lavori;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
•	di rettificare la Determina n° 338 del 24/9/2019 esclusivamente per quanto attiene all’operatore individuato che da Ditta Individuale “Legnami di Perotti Giampiero” diverrà Soc. Cricchi Costruzioni SRL;
•	di rettificare, di conseguenza, l’impegno di spesa n° 307 del 1/10/2019 di 1.000,40 € costituito sul capitolo n° 2905 - c.b. 08.01-2.02.01.09.999 relativamente al solo beneficiario;
•	di confermare quant’altro non rettificato con la presente;
•	di dare atto che è stato acquisto il Codice C.I.G. n° Z7129E082B;
•	di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;
•	di trasmettere la presente all’operatore revocato all’indirizzo perotti.giampiero@pec.it
•	di trasmettere la presente al nuovo operatore individuato all’indirizzo cricchicostruzioni@pec.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 06-11-2019  R.A. n°  796 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 06-11-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 06-11-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI