AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 163 DEL  14-05-2019

OGGETTO: lavori di "manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale". Affidamento lavori aggiuntivi. C.I.G. Z652866D3F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – AREA V^
PREMESSO che con Determina n° 150 del 2/5/2019 i lavori di “manutenzione straordinaria di Via Garibaldi e limitrofe ai fini della sicurezza veicolare e pedonale" - Finanziamento ex Legge 145/2018 e Decreto Ministero dell’Interno del 10/1/2019 venivano affidati, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) alla Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900– C.F. e P.IVA 00919170571 per l’importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a € 30.650,05 € oltre IVA con aliquota 22%, corrispondente ad un importo lordo di € 37.393,07 €;
DATO ATTO che con verbale prot. 3722 del 8/5/2019 avveniva la consegna dei lavori alla presenza del Direttore dei Lavori nominato con Determina n° 134 del 15/4/2019;
ATTESO che durante le lavorazioni sono state riscontrate criticità riconducibili all’assenza, in alcuni tratti di Via Garibaldi, di strato di binder adeguato alla successiva posa di strato di usura, come attestato dal Direttore dei Lavori con propria relazione assunta al protocollo comunale in data 13/5/2019 – prot. 3922;
CONSIDERATO che tali criticità possono essere ricondotte ad eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione e che la soluzione tecnica della problematica è la realizzazione di idonee tassellature composte dalla fresatura di ulteriori 5 cm e dalla realizzazione di pari spessore di binder strutturale;
VISTO il computo metrico redatto dal Direttore dei Lavori da cui si evince una spesa aggiuntiva di 3.452,02 € oltre oneri fiscali;
DATO ATTO che tali somme non possono trovare copertura sul finanziamento principale concesso con Legge 145/2018 c.d. Legge di Bilancio 2019 e Decreto del Ministero degli Interni del 10/1/2019 in quanto le economie di gara potranno essere impiegate dall’Ente solo a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione dell’opera;
SENTITA per le vie brevi la Soc. Cricchi Costruzioni S.R.L., già presente in cantiere per quanto sopra esposto, la quale si è resa disponibile ad eseguire i necessari lavori aggiuntivi applicando un ribasso del 25% sull’importo definito dal Direttore Lavori e pertanto corrispondente all’importo netto di 2.761,62 € oltre oneri;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti indicati dall’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che la spesa occorrente si configura come intervento di manutenzione straordinaria volto alla messa in sicurezza di strada pubblica;
ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta Società attraverso D.U.R.C. on line avente protocollo INAIL_15499552;
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs.n° 50/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
•	di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, alla Società Cricchi Costruzioni S.R.L. con sede in Borgo Velino (RI) - Via Salaria Km 94+900– C.F. e P.IVA 00919170571 i lavori di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza di Via Garibaldi ed aggiuntivi rispetto a quelli affidati con Determina n° 150 del 2/5/2019, come meglio descritti nella documentazione tecnica rimessa al protocollo comunale in data 13/5/2019 – prot. 3922 da parte del D.L.;
•	di impegnare la somma lorda di 3.369,17 € (2.761,62 € a titolo di imponibile – 607,55 € per IVA con aliquota 22%) sul capitolo n° 343 – c.b. 01.05-1.03.02.09.008;
•	di dare atto che la presente spesa si configura come intervento di manutenzione straordinaria volto alla messa in sicurezza di strada pubblica;
•	di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z652866D3F;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to  Ing. CRISTIAN ROSCETTI -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 29-05-2019  R.A. n°  430 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 29-05-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 29-05-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ing. CRISTIAN ROSCETTI