AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 331 DEL  16-11-2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali nel cimitero del capoluogo - II^ Stralcio - Approvazione e liquidazione Stato Finale dei Lavori , Certificato di Regolare Esecuzione . Impresa Fabi Giuseppino. CIG 6376615529
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 163/2006  (ora D.Lgs n° 50/2016);
Visto il D.P.R. 207/2010 art. 124 commi 1 e 2  e art. 140 commi 2 e 3 (si vede l’art. 216 del DLgs 50/2016);
Visto il D.L 69/2013 e smi,  convertito in L. 98/2013;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 27/2017 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. allo scrivente Geom. Giuseppe Gregori ;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 350 del 28/10/2010 con la quale la spesa complessiva di € 584.000,00, necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi, è stata impegnata sul Cap. 2732 Bilancio 2012 RR.PP.;

Vista la DGM n°5 del 14.02.2014 di approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di loculi cimiteriali II Stralcio

Richiamata la determinazione n° 259 del 05.10.2015, con la quale si è aggiudicata in via definitiva l’appalto per i lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali II° stralcio alla ditta Fabi Giuseppino, con sede legale a Antrodoco (RI) Via Bagno n° 35 – P.Iva n° 00692090574, per un importo di € 160.572,02 oltre oneri della sicurezza pari a € 12.357,40 e Iva nella misura di legge (10%) per complessivi € 190.222,36;

Richiamato il Contratto di Appalto Rep. 148 del 03.02.2016, con il quale i lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali II° stralcio, sono stati affidati alla ditta sopra richiamata;

Richiamata la Determinazione n° 115 del 09.03.2016 con la quale, ai sensi dell’art. 26 ter del DL 69/2013, come convertito in L. 93/2013, si è determinato quale importo di anticipazione da corrispondere all’appaltatore, la cifra complessiva di € 34.585,88 corrispondente al 20% dell’importo contrattuale;

Visto il provvedimento di liquidazione n° 47 del 16.03.2016 dell’anticipazione corrisposta all’appaltatore,  imputando la spesa complessiva di € 34.585,88 sul Cap. 2732 Imp.1703/06 sub12, ossia e. 31.441,70 al netto di IVA al 10%;

Vista la propria Determinazione n° 248 del 13.07.2016 di approvazione del I° SAL e del relativo certificato di pagamento, nell’importo determinato dal D.L. di €. 72.900,00 al netto di IVA;

Vista la Determinazione n°  107 del 04.04.2017 , recante approvazione del 2° SAL , nell’importo , al netto dei precedenti acconti , di e. 37.300,00 oltre Iva al 10% ;

Visti gli atti di contabilità dello Stato finale , pervenuti da parte della Direzione dei Lavori trasmessi dalla D.L. in data odierna prot. 10587 , formanti parte integrante e sostanziale della presente ancorchè non materialmente allegati costituiti da :
1.	Stato finale dei Lavori
2.	Certificato di Regolare Esecuzione;
3.	Relazione del DL sul conto finale;
4.	Libretto delle Misure;
5.	Sommario e Registro di Contabilità;
Dato atto che il credito netto dell’impresa Fabi Giuseppino, secondo quanto certificato negli atti contabili di cui sopra , ammonta :
Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso 	€. 161.965,79
Oneri attuazione sicurezza				€.   12.357,40
Sommano						€. 174.323,19
A detrarre precedenti acconti
Anticipazione						-€.   31.441.70
Precedenti certificati					-€  110.200,00
Sommano detrazioni					-€. 141.641,17
Resta il credito netto di 				€.    32.682,02	

Atteso che , all’esito dei predetti atti, lo scrivente, nel frattempo divenuto Responsabile Unico del Procedimento in forza della nomina sindacale , ha emesso l’allegato Certificato di Pagamento Finale di importo corrispondente;

Dato atto che lo scrivente ha accertato la regolarità contributiva dell’impresa , giusta l’attestato INAIL_8977451;
Dato altresì atto che , in data 27.10.2017 , come si evince dalla nota prot. 544356 in pari data della regione Lazio – Dir Reg Infrastrutture , area Genio Civile , è stato depositato il certificato di collaudo , con esito positivo , da parte del collaudatore Dott. Arch. Alessandro Paolucci;;
Ritenuto di dover approvare gli atti di contabilità sopra esposti;

Dato atto che la spesa complessiva dell’opera , pari a €. 191.755,51, tova copertura quanto a € 34.416,18 Iva compresa, trova copertura finanziaria sul Cap. 2732 Imp.1703/06 sub12, e per la differenza, la di €. 1.533,74, sul medesimo capitolo 2732 Imp. 1703/06 sub 1

	D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate,;
1.	di approvare 

•	lo Stato Finale dei Lavori , il Certificato di regolare Esecuzione , e gli atti di contabilità connessi (parte integrante  e sostanziale della presente ancorchè non materialmente allegato ) pervenuto in data odierna prot.10587 ;
•	il Certificato di Pagamento Finale , allegato alla presente, nel quale di approva il pagamento del credito residuo di e. 32.682,02 oltre Iva al 10% , per complessivi 35.950,22;
2.	di dare atto che è stato acquisito il CIG n°6376615529;
3.	di dare atto che il Certificato di pagamento verrà liquidato con opportuno provvedimento dopo la  trasmissione di regolare fattura elettronica;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to    -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 16-03-2018  R.A. n°  274 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 16-03-2018

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 16-03-2018	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori