AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N° 407 DEL  09-11-2018

OGGETTO: Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli. Lavori aggiuntivi urgenti disposti con Ordinanza Sindacale n° 9 del 30.01.2018  e completamento. Determinazioni.
Atteso che , esperite procedure di gara ai sensi del D.lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Ufficio LL.PP. Gregori , l’impresa Minicucci Cairo sta iniziando i lavori di “Consolidamento della frana lungo la strada Antrodoco Rocca di Fondi loc. Casale Marinelli- CIG 71680741CB”;
Che il medesimo R.U.T. ha comunicato in data 13.01.2018 Prot 315 alla Ditta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori D’Amato, la necessità di verificare le condizioni della frana stessa , a seguito di segnalazione da parte di cittadini ;
Che il D.L. stesso in data 18.01.2017 via PEC , rimetteva anche allo scrivente una relazione in cui denotava l’ampliarsi della corona di frana a danno della già ristretta sede stradale, e quindi lo stato di pericolo in cui versava la carreggiata, oltre alla necessità , per eseguire i lavori , di effettuare, a causa della necessità di ricostruire adeguato piano di stazionamento per la macchina trivellatrice, di chiudere al transito il tratto interessato dai lavori, per almeno 45 giorni lavorativi;
•	Vista l’Ordinanza n° 9 del 30.01.2018, nella quale lo scrivente disponeva :
<< All’impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. , con sede in Antrodoco, Via del Castello 30, di effettuare immediatamente e comunque entro gg. 3 dal ricevimento della presente notificata via PEC , i lavori di cui alla narrativa , consistenti nell’ulteriore restringimento, verso valle, della carreggiata , da effettuarsi mediante apposizione di rete di ad alta visibilità fissata con picchetti , e nell’allargamento temporaneo verso monte della sede stradale stessa , previa costituzione di adeguato sottofondo>>
Dato atto che i lavori furono tempestivamente effettuati, e che la strada venne mantenuta in esercizio grazie ai medesimi;
Atteso che , successivamente , è stato realizzato ed ultimato l’intervento di realizzazione della parete palificata di contenimento della strada a valle;

Vista e richiamata la Determinazione nà 201 del 24.05.2018, ove si prendeva atto ed approvava in,linea tecnica la perizia di variante richiesta dal D.L. per situazioni impreviste ed imprevedibili dallo stesso D.L. certificate ;

Dato atto che la perizia medesima venne inoltrata dallo scrivente Responsabile Unico del Procedimento alla Regione Lazio, Ente finanziatore , al fine di verificare l’assenso dell’Ente stesso rispetto all’utilizzo delle economie di gara per finanziare i maggiorii oneri ;

Atteso che la Regione Lazio , a mezzo nota REGISTRO UFFICIALE.U.0531894.04-09-2018, ha comunicato l’assenso all’utilizzo delle somme;

Preso atto come nella perizia di variante stessa, fossero previsti €. 5.869,65 Iva compresa per lavori in economia da valutare a consuntivo;

Vista la Determinazione n°  406 in data odierna, recante definitiva approvazione della perizia e rideterminazione degli impegni di spesa sul capitolo 2552 del Bilancio;

Atteso che ivi vengono imputate , ferma restando la spesa complessiva di e. 110.000,00 corrispondente a quanto finanziato dalla Regione , €. 6.392,83 per lavori in economia;

Vista la direttiva sindacale in data odierna prot. 9883 , ove , tra l’altro<< si dispone che , oltre alla contabilizzazione dei lavori effettuati dall’impresa Marinelli di cui all’Ordinanza in oggetto, si dispone che vengano eseguiti, a garanzia della manutenibilità della strada e del ripristino delle proprietà private su cui è stato operato l’allargamento temporaneo della carreggiata, necessario  a garantire il transito , i lavori di ripristino che debbono comprendere , se vi sono economie tra le somme a disposizione del finanziamento regionale, anche un cordolo di altezza non superiore a cm. 50 sul lato verso monte della carreggiata>>

Atteso che la contabilizzazione dei lavori di cui all’Ordinanza 9/20158, deve effettuarsi a termini dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, con i prezziari regionali vigenti detraendo un ribasso del 20%,ammonta a €.  1.914,64 oltre IVA al 22% , secondo il seguente esito :

 Atteso che, in esecuzione della direttiva Sindacale , lo scrivente ha valutato anche le opere di completamento , consistenti nella realizzazione di un cordolo di cinta della carreggiata , in c.a. , di altezza non superiore a ml. 0.50 , da porre a ridosso delle proprietà private, precedentemente interessate dall’allargamento necessario al fine di garantire la circolazione, per importo di €. 3.325,38 oltre IVA al 22% , secondo il seguente Schema:

Dato atto che la spesa complessiva assomma a €. 5.240,02 oltre Iva al 22% per complessivi €. 6.392,83;

Dato atto che le somme sopra determinate sono calcolate con riferimento alle Tariffe Ufficiali della Regione Lazio anno 2012, attualmente vigenti, con ribasso del 20% ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016;

Visti gli articoli 36 comma 2 lettera a) e 163 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che la realizzazione del cordolo di cinta della carreggiata , non comporta necessità di autorizzazione sismica ai sensi del Regolamento Regionale 13.07.2016 art. 8 comma 1 lettera e), in quanto il cordolo non assolve a funzioni di contenimento;

Ritenuto affidare il completamento dei lavori alla stessa impresa Marinelli Costruzioni srl , di Antrodoco , Codice Fiscale 00626760573, la quale risulta in regola con il DURC giusta INAIL INAIL_13270011, ed iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori tenuta dal Ministero degli Interni , con scadenza al 31.01.2019;

Ritenuto altresì stabilire che il D.L. del contratto principale (affidato alla ditta Minicucci Cairo srl) , arch. paolo D’Amato, dovrà assicurare il necessario coordinamento tecnico e di sicurezza, al fine di fare in modo che il posizionamento del cordolo posto verso monte sia effettuato con elevato grado di compatibilità e sicurezza nella circolazione e in maniera omogenea rispetto alla paratia palificata posta verso valle;

DETERMINA

1.	DI PRENDERE ATTO DELLA PREMESSA QAULE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE;
2.	di determinare la contabilità dei lavori effettuati in adempimento dell’Ordinanza Sindacale n° 9/2018. da parte della ditta Marinelli Costruzioni srl, nella somma di €.  1.914,64 oltre IVA al 22%;
3.	di affidare , in esecuzione della direttiva sindacale n° 9883 in data odierna , l’esecuzione dei lavori di completamento , per importo di €. 3.325,38 oltre IVA al 22%, alla ditta Marinelli Costruzioni srl già destinataria dell’Ordinanza 9/2018;
4.	di dare atto che la spesa complessiva assomma a €. 6.392,83, compresa IVA al 22% , e che tale somma risulta già impegnata per lavori in economia sul capitolo 2552 del Bialncio Comunale RRPP 2017;
5.	di incaricare il Direttore dei Lavori D.L. del contratto principale (attinente la realizzazione delle opere di presidio e sostegno su palificate), Arch. Paolo D’Amato, , di assicurare il necessario coordinamento tecnico e di sicurezza, al fine di fare in modo che il posizionamento del cordolo posto verso monte sia effettuato con elevato grado di compatibilità e sicurezza nella circolazione e in maniera omogenea rispetto alla paratia palificata posta verso valle;
6.	di approvare il computo metrico estimativo allegato alla presente sub lettera A) ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- F.to  Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to   Giuseppe Gregori -

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’ art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria

IMP.  N° _________ DEL _____________

ANTRODOCO,           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to  RAG. MARIA LIBERATA FAINA -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per   la durata di gg15 in data 12-02-2019  R.A. n°  136 
IL MESSO COMUNALE
F.to 

ANTRODOCO, 12-02-2019

E’ copia conforme all’originale. 

Dalla Residenza Municipale, 12-02-2019	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Giuseppe Gregori